2005. 2. 1 (火 ) 10:00

건 설 교 통 위 원 회

2005年度

主 要 業 務 計 劃

京畿道建設本部

목        차

Ⅰ. 일반 현황	2

Ⅱ. 2005년 업무추진 방향	7

Ⅲ. 주요업무 추진계획	8

1. 지역간 연계도로망 구축	9

2. 이용자 중심의 공공건축물 건립	16

3. 자연재해 예방을 위한 하천정비사업	23

4. 유료도로의 효율적 관리	33

5. 건설행정의 효율적 지원	36

Ⅳ. 2004년 업무추진 성과	41

※ 간부공무원 명단	44

Ⅰ.일반현황

○ 기구 및 인력

○ 주요 기능

○ 예산 규모

○ 기본 현황

기구 및 인력

----------------  3부 10팀 1지소

기  구

본 부 장

관 리 부

건설1부

건설2부

기획조정팀		계약관리팀		도로관리팀		도 로 건 설 1 팀		도 로 건 설 2 팀		시설관리팀		도로보수팀		북부지소		건 축 1 팀		건 축 2 팀		하천팀

-------------------  96 / 96명

정원/현원

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	기능직
계	96	1	3	11	13	19	9	40
관 리 부	34	1	1	3	3	5	4	17
건설1부	26		1	4	5	6	1	9
건설2부	18		1	3	3	6	3	2
북부지소	18			1	2	2	1	12

※ 민주화운동 관련자 명예회복 및 보상심의 위원회 파견 1명(건설2부/6급)

※ 공로연수 1명(건설1부 기능6급)

부 별 주 요 기 능

부 별	주 요 기 능
관 리 부	o 건설본부 행정의 기획조정 및 재산관리 o 예산 및 지출, 공사․용역 등 계약에 관한사항 o 소송수행, 과적단속 및 시험실 운영 o 의왕～과천 유료도로 관리
건설1부	o 도로․교량사업의 설계․시공 및 감리 o 도로 및 도로시설물에 대한 유지보수 관리 o 교량의 내진보강 및 유지보수
건설2부	o 공공건축물의 설계․시공 및 감리 o 지방하천의 개수 및 유지보수
북부지소	o 도로시설물의 유지보수 o 교량의 유지 보수관리, 과적차량 단속 o 예산 및 지출, 공사 계약에 관한사항

예  산  규  모

분야별

2005년 3,219억원(’04년 당초 3,595억원 대비 10.4% 감소)

유료도로 특별회계

272억(8.5%)

하천 개․보수 318억(9.9%)

경상예산 등

50억(1.5%)

공공청사 건립 575억(17.9%)

총예산

3,219억원

도로 건설․관리

2,004억(62.2%)

※  도로건설 예산 ’04년 당초대비 30.5% 감소(’04년 당초 2,885억원)

회계별

일반회계 2,947억원 / 특별회계 272억원

(단위 : 백만원)

회 계 별	합 계 (A+B)	본 부 예 산(A)				재배정 (B)
		소계	경상예산	사업예산	기 타
계	321,907	55,301 (100%)	4,997 (9.0%)	30,742 (55.6%)	19,562 (35.4%)	266,606
일 반 회 계	294,667	28,061	4,942	23,019	100	266,606
유료도로 특별회계	27,240	27,240	55	7,723	19,462	-

※ 기  타 : 일반회계 100백만원 (손해배상금 100)

유료도로특별회계 19,462백만원(전출금 19,150, 예비비 등 312)

※ 재배정 : 266,606백만원(도로 177,370, 하천 31,768, 공공청사 57,468)

기  본  현  황

도 로

64개 노선 2,522km / 포장율 77.3%

국가지원 지방도 : 11개 노선    991㎞ (포장율 - 78.2%)

지    방    도  : 53개 노선  1,531㎞ (포장율 - 76.7%)

하 천

517개소 3,485km / 개수율 88.5%

국 가 하 천 :  15개소    476㎞  (개수율 - 98.4%)

지방1급하천 :    4개소     94㎞ (개수율 - 85.0%)

지방2급하천 :  498개소    2,915㎞ (개수율 - 87.4%)

구조물

526개소 / 교량 520개소, 터널 6개소

1종 : 26개소    2종 : 48개소    기타 교량 : 452개소

관리재산

대지 8필지 36,922㎡, 건물 10동 6,347㎡

본    부 : 대지 7필지 33,332㎡, 건물 9동 5,463㎡

북부지소 : 대지 1필지  3,590㎡, 건물 1동   884㎡

Ⅱ. 2005년 업무추진 방향

	업 무 목 표
○ 지역간 교통난 해소와 균형발전을 위한 도로망 구축 ○ 건설자재 품질향상 및 견실한 시공관리 ○ 이용자 중심의 쾌적한 공공건축물 건립 ○ 자연재해 예방을 위한 친환경적 하천정비 ○ 건설행정의 효율적 지원

	실 천 방 안
○ 완벽한 시공관리와 철저한 도로유지관리로 공용성 증대 ○ 지역간 연계 강화를 위한 간선도로망 조기구축 ○ 건설공사 신기술․신공법 도입으로 경제성 확보 ○ 효율적인 공정․품질관리 감독으로 공기내 사업완공 ○ 항구적 치수 기능과 지역특성을 살린 친환경적 하천정비 ○ 계약운영의 투명성 제고 및 도로시설물 관리 강화

도민의 삶의 질 향상과 도민으로부터 신뢰받는 건설문화 정착

Ⅲ. 주요업무 추진계획

1. 지역간 연계도로망 구축

2. 이용자 중심의 공공건축물 건립

3. 자연재해 예방을 위한 하천정비사업

4. 유료도로의 효율적 관리

5. 건설행정의 효율적 지원

1. 지역간 연계도로망 구축

○ 지역간 연계강화를 위한 간선도로망 구축

○ 쾌적하고 안전한 도로기능 유지

○ 위험도로 구조개선을 통한 안전확보

○ 내진성능 향상으로 지진피해 발생 최소화

지역간 연계강화를 위한 간선도로망 구축

◈ 지역발전과 주민의 편리성 제고로 삶의 질 향상

◈ 물류비용 절감으로 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 50건/305.7㎞, 1,708억원(국비 835, 도비 873)

□ 공 사 : 24건/ 158.7㎞, 1,322억원(국비 765, 도비 557)

□ 보 상 : 17건/ 93.9㎞, 278억원(국비 70, 도비 208)

□ 설 계 :  9건/ 53.1㎞, 108억원(도비)

□ 추진계획

○ 공    사 : 안성～양성 등 24건 158.7km

□ 철저한 공정관리로 가능한 최대한 공사기간 단축 추진

※ 보상추진 실적에 따라 송포～인천 등 7건 46km 발주 추진

○ 보    상 : 안중～조암 등 17건 93.9km

□ 지가상승에 따른 보상비 증가를 억제하기 위해 집중투자

※ 제1회추경시 보상비 추가확보(지역개발기금 융자)

○ 설    계 : 일죽～도계 등 9건 53.1km

□ ’04년도 이월사업으로 조기완료 추진

□ 기대효과

○ 산업물동량 수송원활과 물류비용 절감으로 기업경쟁력 강화 및 경제 활성화 도모

○ 도로이용 서비스 제고로 주민의 삶의 질 향상

쾌적하고 안전한 도로기능 유지

◈ 도로 및 도로시설물에 대한 효율적 유지관리로 쾌적한

도로환경 조성

◈ 지속적인 보수․보강을 통한 대형 안전사고 사전예방

ꊱ  포장도 유지관리

□ 사업개요

○ 3개 분야 23개소 1,367km, 111억원(도비)

□ 포 장 도 보수 ---- 12개소   78km  45억원

□ 차 선 도 색 ---- 11개소 1,289km  27억원

□ 지방도상시보수 ---  1 식           39억원

□ 추진계획

○ 2005.    1월 : 현장조사, 자료준비

○ 2005. 2～3월 : 실시설계

○ 2005. 3～4월 : 공사착공

○ 2005.   12월 : 공사완료

□ 기대효과

○ 포장도의 적기 보수로 주행 안전성 확보

○ 도로 및 도로시설물에 대한 상시보수로 쾌적한 도로환경 조성

○ 도로 시설물의 적기 개․보수로  안전성 확보

ꊲ 구조물(교량․터널) 유지관리

□ 사업개요

○ 4개 분야 535개소  57억원(도비)

□ 교량 재가설   ------------1개소    17억원

□ 교량(터널) 부분보수 ------ 1식      20억원

□ 교량(터널) 정기점검 ------ 526개소 13.5억원

□ 구조물 상시보수 ----------- 8개소    6.5억원

□ 추진계획

○ 교량재가설 : 실시설계 및 보상추진

○ 교량(터널) 부분보수 : 정기점검 결과에 의거 추진

○ 교량(터널) 정기점검 : 상․하반기 실시(2회)

○ 구조물상시보수

□ 2005. 1 ～ 2월 : 현장조사, 자료준비

□ 2005. 3 ～ 4월 : 실시설계

□ 2005. 5 ～12월 : 공사추진

□ 기대효과

○ 노후 시설물 적기 개․보수로 구조물의 사용성 및 안전성 확보

○ 교량(터널)등 구조물에 대한 체계적인 관리로 대형 안전사고 사전예방

○ 구조물에 대한 상시보수로 유지관리 효율화

ꊳ 지방도 포장관리시스템(PMS) 구축

□ 사업개요

○ 사업량 : 관내 국지도 및 지방도 9개 노선 316km

○ 사업비 : 5억원(기투자 12억원 / 향후 48억원)

○ 사업기간 : 2003년 부터 계속

□ 추진계획

○ 1단계(시범 사업단계) : 2003 ～ 2004년

∙ 시범구간의 시스템 구축

∙ P.M.S 주」 및 상시교통량 조사시스템 운영개선 및 효과 평가

○ 2단계(정착단계) : 2005 ～ 2006년

∙ 시스템의 양적확대 및 질적개선(포장파손 예측모델 개발등)

∙ 실시간 교통정보 제공체계 구축

○ 3단계(확장단계) : 2007년 이후

∙ 포장도 D/B구축 완료

∙ 경기도 지방도 상시조사체계구축 완료

∙ 연계시스템 구축을 통한 대민서비스 고급화

□ 기대효과

○ 포장도의 노후상태에 따라 사업우선순위 및 최적 공법제시로

사전 예방적 차원의 도로관리체계 구축

○ 예산절감 및 체계적 유지보수규모 예측가능

주」포장관리시스템(PMS) : 포장도 유지보수의 정책판단을 위해 사용되는 컴퓨터 프로그램으로 포장  조사, 평가, 유지보수, 경제성 등을 과학적으로 분석할 수 있는 시스템

위험도로 구조개선 사업

◈ 위험도로 개량을 통한 교통안전사고 사전예방

◈ 지속적인 보수를 통한 쾌적하고 안전한 도로기능 유지

□ 사업개요(전체)

○ 사 업 명 : 북리 선형개량공사등 86개소

○ 사 업 량 : L=155㎞, B=10.0 ～ 18.5m

○ 사 업 비 : 1,150억원(기투자 108, 2005년 104, 향후 943)

○ 사업기간 : 2004 ～ 2013년

□ 추진계획

○ 연도별 추진계획                                               (단위:억원)

구 분	총 계	’04년	’05	‘06 이후	비고
사업비	1,150	108	104	943
사업량 (개소/㎞)	91/152.6	21/9.51	7/14.27	63/128.82

○ ‘05년 사업

∙ ‘05.  1 ~  2월 : 현장조사 및 실시설계 용역 발주

∙ ‘05.  3 ~  5월 : 실시설계용역 착수 및 준공

∙ ‘05.  6 ~ 10월 : 도로구역변경결정 및 용지보상 협의

∙ ‘05. 11 ~ 12월 : 공사발주 및 착공

□ 기대효과

○ 교통사고 빈발지역과 사고위험이 높은 구간에 집중 투자하여

교통안전사고 사전예방

○ 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

주」『자동차교통관리개선특별회계법』개정(‘03.5.29)으로 교통위반 범칙금 및 과태료를 재원으로 함.

내진성능 향상으로 지진피해 발생 최소화

◈ 교량성능 향상으로 지진발생시 피해 최소화

◈ 지진발생시 교량의 기본기능 발휘로 공용의 안정성 확보

□ 사업개요

○ 2개 교량(비룡대교, 장진교), 10억원

※ 대상사업 : “시설물의안전관리에관한특별법”상 1,2종 교량

○ 년도별 추진현황

교량구분	추 진 실 적				’05년 계획
	소계	’02년	’03년	’04년
소 계	34	8	20	6	2
1종	14	4	6	4
2종	20	4	14	2	2

□ 추진계획

○ 2005.  2 : 공사발주

○ 2005.  3 : 공사착공

○ 2005. 11 : 공사완료

□ 기대효과

○ 교량 내진성능 개선 및 보강을 통해 공용의 안전성 확보와

쾌적한 도로환경 조성

○ 지진발생시 사회 기본기능 유지 및 본래기능의 조속 확보

2. 이용자 중심의 공공건축물 건립

○ 이용자 중심의 공공건축물 건립

○ 경인교대 경기캠퍼스 건립

○ 수지체육공원 조성

○ 경인교대 후면 절개지 보강사업

○ 축산위생연구소 북부지소 건립

○ 축산위생연구소 남부지소 건립

이용자 중심의 공공건축물 건립

◈ 이용자 편의를 도모한 최적의 문화․복지․체육시설 건립

◈ 기본시설과 유기적 조화를 이루는 부대시설 건립

□ 사업개요

ꠏ 16건 319,207㎡,

○ 계속 사업 :  5건/182,877㎡

○ 신규 사업 : 11건/136,330㎡

□ 북부노인전문병원 (6,745㎡) ／ □ 서부노인전문병원 (6,480㎡)

□ 여주노인전문병원 (1,652㎡) /   □ 경기도검도회관 (1,652㎡)

□ 도립환경교육센터(연천,2,314㎡)/   □ 도립환경교육센터(하남,3,636㎡)

□ 도립미술관(8,264㎡)          /  □ 어린이박물관(8,264㎡)

□ 바이오센터(31,405㎡)         /  □ 차세대융합기술연구원(59,504㎡)

□ 바이오장기생산연구시설(6,413㎡)

□ 연차별 투자 및 준공계획(투자계획)

사 업 명	사업량 (연면적)	사 업 비 (억원)
		계	기투자	2004	2005	2006	향후
5건	182,877㎡	1,008	16	417	575	-
경인교대 경기캠퍼스	52,333㎡	859	15	397	447	-
경인교대후면 사면보강 녹화	60,000㎡	40	-	4	36	-
수지체육공원 조성공사	66,815㎡	52	1	12	39	-
축산위생연구소남부지소	1,807㎡	25	-	1	24	-
축산위생연구소북부지소	1,922㎡	32	-	3	29	-

※ 준공계획 : ’05년 4건, ’06년 1건.

경인교대 경기캠퍼스 건립

◈ 초등교원의 원활한 충원을 위한 교육시설 건립

◈ 경기도민의 숙원사업 해결로 행정의 신뢰성 확보

□ 사업개요

○ 위    치 : 안양시 만안구 석수동 6-8번지 일원

○ 사 업 량 : 연면적 52,333㎡

○ 사 업 비 : 85,900백만원(토지매입비 포함)

○ 사업기간 : 2003. 12월 ~ 2006. 12월

○ 시 공 자 : 현대건설(주)외 2개사

○ 감 리 자 : (주)아이티엠코퍼레이션 건축사사무소

□ 추진사항

○ ’02. 11. 01 : 설계용역 착수

○ ’03  11. 29 : 설계용역 완료

○ ’03. 12. 19 : 건축협의 및 실시계획인가

○ ’03. 12. 23 : 공사착수

○ ’04. 12. 30 : 현공정 60%(’05.3월 개교시설 86%)

□ 추진계획

○ ’05. 02월 : 개교시설 완료(강의동1,2동, 음악관, 학생복지센터)

○ ’05. 08월 : 2단계시설 완료(체육관, 운동장)

○ ’06. 12월 : 공사준공(행정동, 도서관, 기숙사)

□ 기대효과

○ 초등교원의 원활한 수급으로 교육여건 개선 및 도민의 숙원       사업 해결

수지체육공원 조성

◈ 도민에게 다양한 스포츠․레저공간 제공으로 삶의 질 향상

◈ 21세기에 걸 맞는 신 개념의 휴양문화 정착유도

□ 사업개요

○ 위    치 : 용인시 풍덕천동 산13-1번지 일원

○ 조성면적 : 66,815㎡(20,211평)

○ 사 업 비 : 5,198백만원

○ 사업기간 : 2004. 8월 ～ 2005. 7월

○ 주요시설 : 다목적운동장, 인라인스케이트장, 테니스장(4면)

배드민턴장(5면), 게이트볼장(2면), 농구장 등

○ 시 공 자 : (주)은아종합건설/신구종합건설(주)

○ 감 리 자 : (주)경화엔지니어링

□ 추진사항

○ ’02. 05. 07 : 타당성조사 및 기본설계 완료

○ ’03  01. 16 : 도시계획시설 결정․고시

○ ’03. 12. 12 : 실시설계 완료

○ ’04. 03. 02 : 실시계획 인가(용인시장)

○ ’04. 08. 16 : 공사착수

○ ’04. 12. 30 : 현공정 16%

□ 추진계획

○ ’05. 7월 : 공사준공

□ 기대효과

○ 생활체육활성화 및 도민의 삶의 질 향상

경인교대 후면 절개지 보강사업

◈ 사면보강 및 녹화를 통한 재해예방

◈ 미관조성으로 쾌적한 학습분위기 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 안양시 만안구 석수동 6-8번지 일원

○ 사 업 량

∙보강사업 : 락볼트(1,270공) 및 낙석방지망 설치(7,742㎡)

∙녹화사업 : 녹생토 및 조경수 식재(20,000㎡)

○ 사 업 비 : 4,000백만원

○ 사업기간 : 2004. 11월 ~ 2005. 5월

○ 시 공 자 : 혁지종합건설(주)

○ 감 리 자 : IMT, 정림 컨소시엄

□ 추진사항

○ ’03. 10. 01 : 사업계획 수립

○ ’03  09. 30 : 투융자심사 완료

○ ’04. 09. 30 : 실시설계 완료

○ ’04. 11. 09 : 공사착수

○ ’04. 12. 30 : 현공정 24%

□ 추진계획

○ ’05. 5월 : 공사준공

□ 기대효과

○ 절개지 낙석방지 및 캠퍼스 미관조성으로 쾌적한 학습분위기       조성

축산위생연구소 북부지소 건립

◈ 노후 청사환경 개선으로 근무여건 개선 및 민원인 불편해소

◈ 시험연구사업 활성화를 통한 신기술 보급과 안전 축산물 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 양주시 고읍동 산54 - 5

○ 사 업 량 : 지하1층, 지상2층  연면적 1,922㎡

○ 사 업 비 : 3,208백만원

○ 사업기간 : 2004. 10월 ~ 2005. 4월

○ 시 공 자 : 태림종합건설(주)

○ 감 리 자 : 동양건축사사무소

□ 추진사항

○ ’03. 04. 08 : 청사신축이전 기본계획 수립

○ ’03  11. 05 : 사업부지 매입

○ ’04. 09. 14 : 실시설계 완료

○ ’04. 10. 07 : 공사착수

○ ’04. 12. 30 : 현공정 42%

□ 추진계획

○ ’05. 4월 : 공사준공

□ 기대효과

○ 쾌적한 청사환경으로 직원 근무여건개선 및 업무능률 향상

축산위생연구소 남부지소 건립

◈ 노후 청사 환경개선으로 근무여건 개선 및 민원인 불편해소

◈ 시험연구사업 활성화를 통한 신기술 보급과 안전 축산물 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 안성시 공도읍 만정리 274-10(택지개발지구내)

○ 사 업 량 : 지하1층, 지상2층  연면적 1,807㎡

○ 사 업 비 : 2,523백만원

○ 사업기간 : 2004. 11월 ~ 2005. 5월

○ 시 공 자 : 제이에스종합건설(주)

○ 감 리 자 : 건축사사무소 수성

□ 추진사항

○ ’03. 03. 03 : 청사신축이전 기본계획 수립

○ ’04  08. 11 : 사업부지 사용동의(경기지방공사)

○ ’04. 09. 23 : 실시설계 완료

○ ’04. 11. 09 : 공사착수

○ ’04. 12. 30 : 현공정 15%

□ 추진계획

○ ’05. 2월 : 부지매입예정

○ ’05. 5월 : 공사준공

□ 기대효과

○ 쾌적한 청사환경으로 직원 근무여건개선 및 업무능률 향상

3. 자연재해 예방을 위한 하천정비

○ 자연재해 예방을 위한 하천정비

○ 송라천 수해상습지 개선사업

○ 매곡천 수해상습지 개선사업

○ 용담천 수해상습지 개선사업

○ 연양천 수해상습지 개선사업

○ 무봉천 수해상습지 개선사업

○ 안성천 자연형하천정비 시범사업

○ 오산천 정비사업

○ 남한강 홍수예방을 위한 하도준설사업 추진

자연재해 예방을 위한 하천정비

◈ 항구적 치수기능과 지역특성을 살린 친환경적 개수공사로

도민의 안정된 생활환경 조성

◈ 수해상습지 개선사업의 차질 없는 추진으로 수해예방

□ 사업개요

ꠏ 7개소 42.43km, 318억원 -

○ 하천정비사업 ----------- 2개소 18.19㎞, 55억원

∙ 장기계속사업 : 오산천, 안성천(자연형 하천 시범사업)

○ 수해상습지 개선사업 ----- 5개소 24.24㎞, 263억원

∙ 장기계속사업 :  송라천, 매곡천, 용담천, 연양천, 무봉천

※ 남한강 홍수예방을 위한 하도준설사업(연장 2.8㎞, 146억원)

□ 연차별 투자 및 준공계획

○ 투자계획

사 업 명	사업 기간	사업량 (㎞)	사 업 비 (억원)
			계	기투자	2004	2005	2006	2007	2008
7건		L= 42.43	840	261	110	318	151
오 산 천 정비사업	02～05	L= 14.19	382	225	110	47
송 라 천 수해상습지	03～05	L= 1.38	32	11		21
매 곡 천 수해상습지	03～06	L= 4.78	60	8		52
용 담 천 수해상습지	03～06	L= 11.7	217	11		136	70
연 양 천 수해상습지	03～05	L= 2.02	30	6		24
무 봉 천 수해상습지	03～06	L= 4.36	59	-		30	29
안성천 시범사업	04～06	L= 4.00	60	-		8	52

※용지보상비로 15억원 시․군에 직접교부(용담천10억원,무봉천5억원)

○ 준공계획 : ’05년 3개소 17.59㎞,  ’06년 4개소 24.84㎞

송라천 수해상습지 개선사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 화성시 매송면 송라리 일원

○ 사 업 량 : 하천개수 L=1.38㎞

○ 총사업비 : 3,213백만원(국비1,928  도비1,285)

○ 사업기간 : 2004. 7 ～ 2005. 7 (12개월)

○ 시 공 자 : 세영종합건설(주)

○ 감 리 자 : 한국종합기술개발공사

□ 추진사항

○  ’03. 3. 3 ～ 7. 3 : 실시설계

○ ’03.  9.  3 : 사전환경성검토 협의

○  ’03. 11.  3 : 하천정비시행계획고시

○  ’04.  1. ～ : 편입용지 및 지장물 보상 협의

○  ’04.  7. 19 : 공사착공

○  ’04. 10. 11 : 전면책임감리용역 착공

○  ’04. 12. 30 : 현공정 20%

□ 추진계획

○ ’05.  7월  : 공사준공

□ 기대효과

○ 친환경적인 하천보존을 위한 기반 구축 및 저지대 홍수피해 예방

○ 농경지 유실 및 침수방지 효과

매곡천 수해상습지 개선사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 이천시 호법면 매곡리 일원

○ 사 업 량 : 하천개수 L=4.78㎞

○ 총사업비 : 5,983백만원(국비3,589 도비2,394)

○ 사업기간 : 2004. 7 ～ 2006. 1 (18개월)

○ 시 공 사 : 동산종합건설(주)

○ 감 리 자 : 한국종합기술개발공사

□ 추진사항

○  ’03. 3. 3. ～ 7. 3 : 실시설계

○ ’03.  9. 3 : 사전환경성검토 협의

○  ’04. 11. 3 : 하천정비시행계획고시

○ ’04. 1. ～ :  편입용지 및 지장물 보상실시중

○  ’04. 7. 14 : 공사착공

○  ’04. 10. 11 : 전면책임감리용역 착공

○  ’04. 12. 30 : 현공정 23%

□ 추진계획

○  ’06. 1월 : 공사 준공

□ 기대효과

○ 친환경적인 하천보존을 위한 기반 구축 및 저지대 홍수피해 예방

○ 지속적인 민원의 해소 효과

용담천 수해상습지 개선사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 여주군 산북면 용담리 일원

○ 사 업 량 : 하천개수 L=11.7㎞

○ 총사업비 : 21,715백만원(국비13,029 도비8,686)

○ 사업기간 : 2004. 12 ～ 2006. 12 (24개월)

○ 시 공 사 : (주)대송

○ 감 리 자 : (주)남원건설엔지니어링

□  추진사항

○ ’03.  2. 28 ～ 6. 28 : 실시설계

○ ’03.  9.  3 : 사전환경성검토 협의

○ ’03. 11.  3 : 하천정비시행계획 고시

○ ’04.  1 ～ : 편입용지 및 지장물 보상 실시중

○ ’04.  8. 30 : 전면책임감리용역 착공

○ ’04. 12. 22 : 공사계약

○ ’04. 12. 30 : 공사착수

□ 추진계획

○  ’06.  12월 : 공사준공

□ 기대효과

○ 친환경적인 하천보존을 위한 기반 구축 및 저지대 홍수피해 예방

○ 농경지 유실 및 침수방지 효과

연양천 수해상습지 개선사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 여주군 여주읍 멱곡리 일원

○ 사 업 량 : 하천개수 L=2.02㎞

○ 총사업비 : 3,049백만원(국비1,829 도비1,220)

○ 사업기간 : 2004. 8 ～ 2005. 8 (12개월)

○ 시 공 사 : (주)성림개발

○ 감 리 자 : (주)남원건설엔지니어링

□ 추진사항

○ ’03.  2. 28 ～ 6. 28 : 실시설계 완료

○ ’03..  9.  3 : 사전환경성검토 협의

○ ’03. 11.  3 : 하천정비시행계획고시

○ ’04. 1. ～ : 편입용지 및 지장물 보상 실시중

○ ’04.  8. 13 : 공사착공

○ ’04.  8. 30 : 전면책임감리용역 착공

○ ’04. 12. 30 : 현공정 20%

□ 추진계획

○ ’05. 8월 : 공사 준공

□ 기대효과

○ 친환경적인 하천보존을 위한 기반 구축 및 저지대 홍수피해 예방

○ 하천의 기능회복과 전통성 복원 효과

무봉천 수해상습지 개선사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 화성시 남양면 무봉리 일원

○ 사 업 량 : 하천개수 L=4.36㎞

○ 총사업비 : 5,925백만원(국비3,555 도비2,370)

○ 사업기간 : 2005. 4 ～ 2006. 9 (18개월)

○ 감 리 자 : 한국종합기술개발공사

□ 추진사항

○ ’03. 3. 3 ～ 7. 3 : 실시설계

○ ’03. 9.  3 : 사전환경성검토 협의

○ ’03. 11. 3 : 하천정비시행계획고시

○ ’04.  8. ～ 편입용지 및 지장물 보상 추진중

□ 추진계획

○ ’05.  3월 : 공사 발주

○ ’05.  4월. : 시공업체 선정 및 공사착공

○ ’06.  9월 : 공사 준공

□ 기대효과

○ 친환경적인 하천보존을 위한 기반 구축 및 저지대 홍수피해 예방

○ 농경지 유실 및 침수 방지 효과

안성천 자연형하천정비 시범사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 안성시 도기동 일원

○ 사 업 량 : 친환경적 하천정비 L=4.0km

○ 총사업비 : 6,000백만원 (도비6,000)

○ 사업기간 : 2005. 10 ～ 2006. 12

□ 추진사항

○ ’04.  8. 11 : 실시설계용역 발주검토

○ ’04.  8. 27 : 실시설계용역 발주의뢰

□ 추진계획

○ ’05.  1. ～ ’05. 6. : 실시설계용역 및 사전환경성 검토

○ ’05.  7월 : 하천정비시행계획고시

○ ’05.  7. ～ ’05. 12 : 편입용지 및 지장물 보상협의

○ ’05. 10월 : 공사 착공

○ ’06. 12월 : 공사 준공

□ 기대효과

○ 친환경적인 하천정비를 위한 모델 적용으로 향후 하천정비 사업의 친환경 기준 제시

○ 도시경관의 구조적 개선효과

오산천 정비사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 용인시 모현면 오산리～광주시 오포읍～경안천 합류점

○ 사 업 량 : 하천개수 L=14.19㎞

○ 총사업비 : 38,217백만원(도비38,217)

○ 사업기간 : ’02. 8 ～ ’05. 3

○ 시 공 자 : 삼대건설(주)등 6개사

○ 감 리 자 : 남원건설엔지니어링

□ 추진사항

○ ’01 06. 27 ～ ’01. 09. 25 : 실시설계

○ ’01. 12. 10 : 사업시행청 변경통보 (용인시→건설본부)

○ ’01.  7. 25 : 하천정비시행계획고시

○ ’02.  8. 19 : 오산천 정비사업 공사착공

○ ’02.  9.  2 : 전면책임감리용역 착수

○ ’03.  4. ～ : 편입용지 및 지장물 보상협의

○ ’04. 12. 30 : 현공정 90%

□ 추진계획

○’05.  3월 : 공사 준공

□ 기대효과

○ 친환경적인 하천보존을 위한 기반 구축 및 저지대 홍수피해 예방

○ 농경지 유실 및 침수방지 효과

남한강 홍수예방을 위한 하도준설사업 추진

◈ 재해로부터 도민의 재산과 생명을 보호하고, 안정적인 골재 수급과 친환경적인 하천보존을 위한 기반 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 여주군 능서면 백석리 일원

○ 사업기간 : ’05. 1 ～ ’05. 12

○ 사 업 량 :  연장 L=2.8㎞

○ 총사업비 : 146억원(골재 390만㎥ 매각대금)

□ 추진사항

○ ’04.  5.  4. : 남한강 홍수예방을 위한 관계자회의(국무조정실)

○ ’04.  6.  2 : 남한강 홍수예방을 위한 하도준설사업 추진계획 보고 (도지사)

○ ’03. 08. 30 : 사전환경성 검토서 협의

○ ’04. 11.  1 : 사전환경성 검토 협의 회신

※ 남한강정비 기본계획 완료후 재검토

□ 추진계획

○ ’04. 12. : 사전환경성검토 재협의(육상부만 준설)

○ ’05.  1. : 사전환경성검토 협의 완료후 사업추진

□ 기대효과

○ 친환경적인 하천보존을 위한 기반 구축 및 저지대 홍수피해 예방

○ 골재수급의 안정성 확보

4. 유료도로의 효율적 관리

○ 이용자 편의위주의 유료도로 관리

○ 유료도로 통행요금 징수시스템 교체

이용자 편의위주의 유료도로 관리

◈ 의왕～과천 유료도로의 효율적인 유지관리로 원활한

교통소통 및 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요

○ 도로 및 시설물 유지보수 : 3,472백만원

○ 통행요금징수시스템 교체사업 : 4,080백만원

○ 차입금 상환 : 19,150백만원

□ 추진방향

○ 적기 유지보수를 통한 도로관리 강화 : 수시 순찰, 사전 보수

○ 민간위탁의 철저한 관리로 대민서비스 개선 및 효율성 추구

□ 추진계획

○ ｢시설물 안전관리에 관한 특별법｣에 의거 정기점검 용역 후, 유지보수 실시

○ 유료도로 무료화시점 분석을 위한 용역의뢰 : ’05. 3～5월

○ 민간위탁 지도 관리를 위한 연찬회 실시 : 년 1회

○ 이용자 편의 위주의 통행요금 징수시스템 교체 : 6월 준공

※ 경기도유료도로통행요금징수조례시행규칙 개정

⇒ 개정시기 : 요금징수시스템 완공전(4～6월)

⇒ 개정내용 : 요금징수시스템 연계 관련, 차종분류 및 관리인원 증원 등

□ 기대효과

○ 효율적 관리를 통한 이용자 편의 추구 및 도정의 신뢰성 제고

○ 도로건설 및 유지관리 재원 확보

유료도로 통행요금 징수시스템 교체

◈ 유료도로 현금요금징수시스템을 한국도로공사의 고속도로      카드 및 전자카드와 병행 사용으로 이용자 편의 도모

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 요금징수시스템 교체 1식

∙ 차로 및 부스설비 설치   ․ 도주 및 과적차량 촬영

∙ 영업소 설비 보완        ․ 관리용 소프트웨어 개발 등

○ 사 업 비 : 40.8억원(유료도로 특별회계)

∙ 운영장비 및 차로설치 비용 : 22.8억원(건설본부 시행)

∙ 차종분류 및 정산관련 S/W  : 18억원(한국도로공사 위탁)

○ 사업기간 : ’04. 6월 ～ ’05. 6월

□ 추진사항

○ 통행요금징수시스템구축계획 수립 : ’04. 3월

○ 유료도로통행요금징수시스템 교체 실시설계용역 : ’04.6～8월

○ 경기도와 한국도로공사간 고속도로카드 및 전자카드 병행사용 기본협약서 체결 : ’04. 11. 30월

○ 유료도로통행요금징수시스템 구축 계약 : ’04. 12. 10.

□ 추진계획

○ 전산실 서버 및 영업소 설비 설치    : ’05. 1 ～ 2월

○ 16차로에 대한 차종분류장치 설치 등 : ’05. 3 ～ 4월

○ 시스템 H/W 및 S/W 연계 시험 운영 : ’05. 5 ～ 6월

○ 교체 통행요금징수시스템 정상 가동   : ’05. 7월

5. 건설행정의 효율적 지원

○ 계약 운영의 투명성 제고를 위한 업무개선

○ 과적차량 단속으로 쾌적한 도로환경유지

○ 건설공사 견실시공을 위한 품질시험

계약 운영의 투명성 제고를 위한 업무개선

◈ 전자입찰 서비스를 확대하여 업체의 입찰경비 절약

◈ 경쟁입찰 확대로 공정하고 투명한 계약업무 추진

□ 사업개요

○ 입찰 사전예고제 운영 : 2회(상․하반기)

○ 전자입찰 및 전자계약제도 확대 운영

○ 지역경제활성화 및 경기진작을 위해 대금 조기 지급

○ 관급자재의 사업장별 공급 및  관리 실태 점검

□ 추진계획

○ 입찰 사전예고제 운영

□ 대 상 : 계약금액 3천만원 이상 공사․용역

□ 내 용 : 사업규모 및 예산액 등 분기별 발주계획을 인터넷(G2B,               경기넷․건설본부 홈페이지)에 공개

○ 전자입찰제 확대 시행 및 전자계약제도 운영

□ 모든 입찰(국제입찰대상 : 공사 252억원, 용역 3.3억원이상)을 포함,

전자입찰로 시행

□ 계약을 On-Line으로 체결(G2B) : ‘05. 2월

□ 계약체결시 청렴계약이행 서약제 지속 실시

○ 지역경제 활성화를 위하여 대금 조기 지급

□ 대금 청구시 기성금 7일⇒ 2일, 준공금 14일⇒ 4일 이내

○ 추정가격 50억원이상 물품․공사․용역등 계약심의회 심의 지속운영

○ 관급자재의 사업장별 공급관리 및 사용실태 점검 : 하반기

□ 철근등 자재 수불사항을 수시로 확인하여 잉여자재의 발생 방지

□ 사업장별 관급자재에 대한 사용실태 점검으로 재고 적정화 도모

□ 기대효과

○ 입찰에서 계약까지 전 과정을 인터넷상에서 처리하고 공개하여 공정하고 투명한 고객중심의 행정 구현

○ 공사 대금 조기 지급으로 지역경제 활성화 도모

○ 관급자재 공급관리 개선으로 불필요한 예산낭비 사전 차단

과적차량 단속으로 쾌적한 도로환경유지

◈ 고정식 검문소 및 이동단속반의 효과적 배치로 단속강화

◈ 단속의 효율성 제고를 위한 홍보 강화

□ 사업개요

○ 근    거 : 도로법 제54조

○ 단속노선 : 지방도 및 국지도 64개 노선 2,522km

○ 단속기준 : 총중량 40톤, 축중량 10톤 초과

○ 단속방법 : 고정검문소(2개소), 이동단속(2개반)

○ 배치인원 : 46명(기능직 9, 공익 34, 기타 3)

□ 추진계획

○ 단속요원 자질향상을 위한 교육 실시 : 월 1회

○ 이동식축중기 교체 구입 : 2월 (18,000천원)

○ 계측결과 분쟁소지 예방을 위한 계측장비의 정밀성 확보

□ 계측장비 점검 : 이동식 - 연1회, 고정식 - 월1회

○ 취약시기 과적차량 단속 시범운영

□ 시    기 : 연4회 (분기 1회)

□ 운영시간 : 18:00 ～ 익일 05:00

□ 단속지역 : 도내 과적근원지(골재채취,레미콘공장 등 밀집지역)

□ 기대효과

○ 도로구조물 보호로 안전사고 방지 및 유지보수사업비 절감

○ 원활한 교통소통 확보로 쾌적한 도로시설 유지

건설공사 견실시공을 위한 품질시험

◈ 정확한 품질시험 및 처리 결과의 신속한 통보

◈ 건설자재 품질향상 및 견실한 시공관리로 신뢰성 제고

□ 사업개요

○ 법적근거

□ 건설기술관리법 제25조 제1항 및 동법시행령 제48조

□ 경기도 건설공사품질시험수수료 징수조례

○ 시험품목 및 장비

□ 도․시․군 및 국가기관과 개인

□ 산업표준화법 제10조 규정과 한국산업규격(K․S)에 의함

○ 시험장비․종목

□ 도로포장 두께 및 밀도 등 61종목

□ 디지털만능재료시험기 등 71종 170점

□ 추진계획

○ 토목시험기기 교체 구입 : ‘05. 3월 (50,000천원)

○ ’05년 건설공사 품질시험 수수료 공고

□ 도보, 경기넷, 건설본부 및 각 시․군 홈페이지 등

○ 품질시험수수료 세외수입 : 연간 350백만원

□ 기대효과

○ 품질시험의 중요도를 적극 홍보하여 견실시공 유도

○ 공종별 검사시험 이행으로 부실시공 방지 및 자재 품질향상 도모

Ⅳ. 2004년 업무추진 성과

1	지역간 연계도로망 구축

○ 지역발전과 주민의 편리성 제고로 삶의 질 향상

○ 물류비용 절감으로 균형발전 도모

⇒ 54건/335km, 2,808억원(국비 889, 도비 1,707, 기타 212)

∙ 공사추진 : 28건/184km 2,370억원

(본오～오목천간 등 4건 22km 준공)

∙ 설계추진 :  9건/ 51km,    63억원

∙ 보상추진 : 17건/100km,   375억원

2	쾌적한 도로기능 유지

○ 효율적인 지방도 유지관리를 위한 단가계약 확대 추진

∙ 차선도색 및 안전시설물설치 등은 연간 단가계약으로 추진

○ 도로 및 부속시설물에 대한 유지관리로 쾌적한 도로환경 조성

∙ 도로유지관리 : 140개소 38,162백만원(양여금 4,525, 도비 33,637)

○ 지속적인 보수․보강을 통한 대형 안전사고 사전예방

∙ 교량유지관리 : 523개소 8,700백만원(도비)

3	시설물의 내구력 증진

○ 기존교량의 내진보강으로 지진피해 최소화

∙ 총 36개 교량 중 6개 교량 추진(’03년까지 28개 완료)

○ 도로 유지비용 절감 및 교통서비스의 질적 향상을 위한 포장도

유지관리시스템(PMS) 개발 추진

∙ 5개노선 / 315km,  5억원(도비)

4	자연재해 예방을 위한 하천 정비

□ 7개 하천 42.43㎞,   268억원

○ 하천정비사업 : 2개 하천 18.19㎞, 160억원

∙ 신규사업 : 안성천(자연형하천 시범사업) ⇒ 설계 용역중

∙ 계속사업 : 오산천(90%)

○ 수해상습지 개선사업 : 5개 하천 24.24㎞, 108억원

∙ 계속사업 : 송라천(20%), 매곡천(23%), 연양천(20%),

용담천(04.12월 공사착수), 무봉천(용지보상중)

※ 남한강 하도준설 : 사전환경성 검토 협의중(육상부만 준설)

5	이용자 중심의 공공건축물 건립

□ 9건 213,389㎡,  1,463억원

○ 공공건축물 건립 : 8건 146,574㎡, 1,411억원

∙완료사업 : 4건 30,512㎡, 455억원

⇒ 장애인복지관(04년2월), 배드민턴경기장(04년2월),

도립국악당(04년6월),  문화의전당 지하주차장(04년6월)

∙계속사업 : 4건 116,062㎡, 956억원

⇒ 경기캠퍼스 건립(60%), 축산위생연구소 남부지소(15%),

축산위생연구소 북부지소(42%),

경인교대 후면절개지 사면보강 및 녹화사업(24%)

○ 수지 체육공원 조성공사 : 1건 66,815㎡, 52억원(16%)

6	의왕～과천 유료도로 관리

○ 도로사용료 징수 : 27,138백만원(일평균 74백만원)

○ 통 행 량 : 34,705천대(일평균 95천대)

○ 도로시설비 차입금 상환 : 18,400백만원

○ 유료도로 유지관리

∙ 의왕․과천터널 비상방송장치 설치, 방음벽 정비, 통행요금징수시스템교체사업 착수, 유료도로사무소 청사 도색사업 등

7	도로대장 전산화 추진

○ 도형자료 작성 및 각종조서 데이터베이스 구축

∙ 2004년 도로대장 구축 실적 : 162km

∙ '91～'04년 실적 : 1,734km 구축 완료

※ 도형자료 : 평면도, 종․횡단도, 구조물도 등

8	도로보호를 위한 과적차량 단속

○ 단속실적 : 검차 352,614대, 적발 469대

∙ 상시단속 : 검차 306,124대, 적발 377대

∙ 특별단속(년4회) : 검차 46,490대, 적발 92대

○ 과적예방 홍보 : 홍보물 배부 및 전광판 홍보 : 4회(40일)

○ 과적단속요원 교육 실시 : 12회

9	건설공사 품질 향상을 위한 시험실 운영

○ 정확한 품질시험 실시로 행정의 공신력 제고와 견실시공 정착 유도

∙ 토목시험 : 1,008건, 4,284회(시험수수료 331백만원)

○ 시험의뢰 방법을 개선하여 민원인 불편사항 해소

∙ 방문 및 공문접수를 FAX 접수까지 확대 실시 : 516건

10	지역건설경기 활성화를 위한 공사․용역계약

○ 도로, 건축분야 공사 및 용역계약 : 249건 2,126억원

∙ 공사 : 130건 1,890억원,  용역 : 119건 236억원

○ 전자입찰 : 137건 1,034억원

○ 지역경제 활성화를 위한 자금의 조기집행

∙ 선금, 기성금, 준공금 : 128건 3,079억원 (98.5%)

⇒ 공사 : 74건 2,970억원, 용역 : 54건, 109억원

○ 중소․지역업체 수주 확대 지원 : 101건 920억원

∙ 대상 : 추정가격 3천만원 이상 사업

간 부 공 무 원 명 단

▣ 간부공무원 명단 / 45

간 부 명 단

구 분	직 위	직 급	성 명	비 고
본 부	본 부 장	지방시설부이사관	조 병 돈
	관 리 부 장	지방서기관	오 용 근
	건설 1 부장	지방시설서기관	박 성 권
	건설 2 부장	지방시설서기관	김 준 용
	기획조정팀장	지방행정사무관	길 동 섭
	계약관리팀장	지방행정사무관	박 정 양
	도로관리팀장	지방토목사무관	안 광 현
	도로건설1팀장	지방토목사무관	이 재 영
	도로건설2팀장	지방토목사무관	김 한 섭
	시설관리팀장	지방토목사무관	김 정 기
	도로보수팀장	지방토목사무관	정 덕 진
	건축 1 팀 장	지방건축사무관	윤 태 호
	건축 2 팀 장	지방건축사무관	이 범 목
	하 천 팀 장	지방토목사무관	홍 지 선
지 소	북부지소장	지방토목사무관	정 헌 채