2007. 2. 8 (목)

건설교통위원회

2007년도

주 요 업 무 계 획

경 기 도 건 설 본 부

목     차

Ⅰ. 일반현황	2

Ⅱ. ‘06 업무성과 평가 및 시사점	7

Ⅲ. ‘07년 정책목표 및 이행과제	8

Ⅳ. 주요업무 추진계획	9

1. 이용자 중심의 도로건설 및 유지관리	10

2. 다양한 문화욕구 충족 및 의료․과학연구 인프라 구축	15

3. 건설행정의 효율적 지원	18

Ⅴ. 역점시책	22

간부공무원 명단	23

Ⅰ. 일 반 현 황

기구 및 인력

주 요 기 능

기 본 현 황

예 산 규 모

기구 및 인력

-------------------  3부 10팀

기  구

본 부 장

관 리 부

건설1부

건설2부

기획조정팀		계약관리팀		도로관리팀		도 로 건 설 1 팀		도 로 건 설 2 팀		도로보수팀		시설관리팀		건 축 1 팀		건 축 2 팀		기전팀

-------------------  74 / 74명

정원/현원

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
계	74/74	1/1	3/3	10/10	13/13	15/6	5/7	0/7	27/27
관 리 부	33/33	1/1	1/1	3/3	4/4	5/2	2/4	0/1	17/17
건설1부	26/26		1/1	4/4	6/6	6/2	1/2	0/3	8/8
건설2부	15/15		1/1	3/3	3/3	4/2	2/1	0/3	2/2

주 요 기 능

관 리 부

건설본부 행정의 종합기획․조정, 재산관리

예산 및 지출, 공사․용역 등 계약에 관한 사항

과적단속, 소송수행, 유료도로 관리 및 시험실 운영

건설1부

지방도 및 교량사업의 설계․시공․감리

지방도 시설물의 유지․보수관리

건설2부

공공건축물의 설계․시공 및 감리

건축설비공사 설계ㆍ시공 및 감리

기 본 현 황

도 로

53개 노선, 2,713km (포장율 79.3%)

국가지원 지방도 : 11개 노선,  995㎞ (포장율 79.2%)

지    방    도  : 42개 노선, 1,718㎞ (포장율 79.3%)

※ 건설본부관리 : 37개 노선, 1,309km, (포장율 74.2%)

∙ 국가지원지방도 : 10개 노선, 484km, (포장율 72.3%)

∙ 지    방    도 : 27개 노선, 825km, (포장율 76.0%)

구조물

557개소 (교량 547개소, 터널 10개소)

1종 : 27개소    2종 : 51개소    기타 교량 : 479개소

※ 건설본부관리 : 338개소 (교량 330개소,  터널 8개소)

∙1종 : 19개소  ∙2종 : 30개소  ∙기타 교량 : 289개소

관리재산

대지 4필지 63,564㎡, 건물 7동 3,922㎡

본    부 : 대지 2필지  7,045㎡, 건물 2동 2,642㎡

유료도로 : 대지 2필지 56,519㎡, 건물 5동 1,280㎡

건설장비․차량 : 굴삭기 등 31대 (중기 5, 차량 15, 제설장비 11)

예 산 규 모

분야별

2007년 건설본부 예산규모  3,649억원

회계별

일반회계  3,359억원 / 특별회계  290억원

《 자체예산 》                                           (단위 : 백만원)

회 계 별	계	경상예산	사업예산	기 타
계	59,289	4,498	31,131	23,660
일 반 회 계	30,299	4,349	25,750	200
유료도로 특별회계	28,990	149	5,381	23,460

※ 기타 : 일반회계 200백만원(손해배상금), 특별회계 23,460백만원(전출금23,000, 예비비등460)

《 재배정예산 》                                         (단위 : 백만원)

계	도로건설	공공건축물 건립
305,600	216,361	89,239

Ⅱ. ‘06 업무성과 평가 및 시사점

‘06년도는 조직을 효율적으로 운용하고 예산을 효과적으로

집행하여 업무성과를 최대화하고 고객만족 제고를 위한

공동 노력의 한해 였음.

건설본부 조직의 개편 및 보강으로 업무 효율성 제고

• 북부지소를 “경기도도로사업소”로 분리설치

⇒ 경기북부지역 도로사업의 통일성과 연계성 및 효율성 확보

• 기전팀 신설 ⇒ 공공건축물 설비시공관리의 전문성 제고

• 상근인력확보 ⇒ 과적차량 단속인원 부족 해소(6명 충원)

SOC의 집중투자로 그동안 부진했던 사업을 조기완료

• ’04년 4건 22km, ‘05년 3건 19km, ’06년 8건 54.7km 완료

• 행정절차 이행기간 단축 및 치밀한 공정관리, 유지관리사업 효율적 추진

※ 예산부족 및 보상지연으로 공기단축에 우려되는 점도 있었음.

공공건축물 건립으로 도민 삶의질 향상에 기여

• 교통정보센터, 여주노인전문병원 등 6건 준공

• 동두천노인전문병원, 백남준미술관 등 문화․복지시설과 경기바이오  센터 등 과학연구시설 건립 추진

이용자 편의위주의 유료도로 유지․관리

• 민간위탁의 철저한 관리로 효율성 추구

• 도로 및 시설물 유지보수(16억원), 일반회계 전입금 상환 : 227억원

‘07년에는 업무혁신 및 신기술 도입을 통해 건설행정의 투명성 및        효율성을 제고하고, “선택과 집중”의 원칙으로 예산을 효율적으로        집행하며, 친환경․예방적 사업추진과, 특히 공기단축으로 도민        에게 쾌적하고 안전한 생활환경 제공

Ⅲ. ‘07년 정책목표 및 이행과제

도민이 만족하는 건설행정 구현

정책목표 1

이용자 중심의

도로건설 및 유지관리

1. 쾌적한 삶을 영위하는

문화․의료복지시설

건립

2. 고부가가치 산업육성을

위한 과학연구시설 건립

1. 유료도로의 효율적

유지관리

2. 도로보호를 위한

과적차량 단속

3. 전자 수의계약시

지역제한 의무화

정책목표 2

다양한 문화욕구 충족 및

의료․과학연구 인프라 구축

정책목표 3

건설행정의

효율적 지원

1. 교통정체구간 집중지원을      통한 조기완공 추진

2. 체계적인 유지관리로

안전한 도로기능 유지

3. 위험도로 개량을 통한      교통사고 예방

역 점 시 책

효율적인 공사관리로 사업비 절감, 공기단축, 주민불편 최소화

Ⅳ. 주요업무 추진계획

1. 이용자 중심의 도로건설 및 유지관리

2. 다양한 문화욕구 충족 및 의료 ․ 과학연구           인프라 구축

3. 건설행정의 효율적 지원

1. 이용자 중심의 도로건설 및 유지관리

○ 교통정체구간 집중 지원을 통한 조기완공 추진

○ 체계적인 유지관리로 안전한 도로기능 유지

○ 위험도로 개량을 통한 교통사고 예방

교통정체구간 집중 지원을 통한 조기완공 추진

○ 교통정체구간 집중 예산투자 및 공기단축 추진

○ 지역발전과 주민 편익성 제고로 도민불편 해소

□ 사업개요

○ 계    획 :  49건,  323.9km,  3조 6,794억원

∙공 사 중 : 21건,    136.1km,   1조 5,688억원

∙보 상 중 : 18건,     99.5km,    1조 0,989억원

∙설    계 : 10건,     88.3km,    1조 0,117억원

※ ‘07년 예산 : 40건,  2,270억원 (국비 507,  도비 1,763)

- 재배정 : 38건,  2,179억원 (국비 507,  도비 1,672)

- 자  체 :  2건,    91억원 (도비 100%)

□ ‘06 추진사항

○ 공 사 중 : 서운～안성 등 27건,  184.8km (공정율 41%)

∙철저한 공정관리와 적정한 예산 투자로 주민편익 증대

※ ‘06년 준공 : 교하~조리 등 8개소 54.7km

○ 보 상 중 : 안중～조암 등 16건,  89.4km (공정율 35%)

∙보상예산 적기 투자로 지가상승에 따른 보상비 증액 억제

○ 설계완료 : 남사～동탄 등 12건, 102.0km (공정율 100%)

∙도로구역결정고시 6건,  행정절차 이행중 6건

□ ‘07 추진계획

○ 공사 완공이 시급한 사업의 집중투자로 공기단축, 조기완공추진

∙‘07년 준공 : 반송～기흥 등 5건,  20.04km,  764억원

○ 계속사업은 교통정체구간 우선추진으로 주민편익 제고

∙송포～인천 등 16건,  116.08km,  892억원

○ 보상중인 사업은 지속적인 협의 보상실시로 민원해소

∙안중～조암 등 18건,  99.5km,  604억원

○ 설계 완료된 사업은 도로구역변경결정 등 행정절차 이행

∙설계완료(남사～동탄 등 9건), 신규설계(공도～양성 1개소 10억원)

체계적인 유지관리로 안전한 도로기능 유지

○ 도로기능 강화․관리를 통한 쾌적하고 안전한 도로유지

○ 예방차원의 도로유지로 교통사고 등 불편 해소

1. 포장도 유지관리

□ 사업개요

○ 포장도 유지관리 : 4개분야  620km,  65억원

∙포 장 도 보 수 :  20km,  15억원

∙차  선  도  색 : 600km,  15억원

∙교통안전시설정비 : 전구간,   10억원

∙법면 등 유지관리 : 전구간,   25억원

□ ‘06 추진사항

○ 연간단가계약 체결로 효율적인 유지관리 시행

∙‘06 지방도 유지관리 공사완료 : 4개분야 623km, 65억원

○ 지속적 도로관리 및 순찰을 통한 수시, 상시보수

∙‘06 지방도 부분 파손구간 긴급보수 : 아스콘 58톤

∙‘06 지방도 안전시설물 보수 : 갈매기표지판 등 3,000개

□ ‘07 추진계획

○ 포장도 유지관리의 연간단가계약 확대 및 신속한 집행

∙‘07. 1 ～ 2 : 유지보수․관리 사업계획수립(현지조사 등)

∙‘07. 3 ～ 4 : 설계 및 공사발주

∙‘07. 4 ～10 : 공사추진 및 사업완료

2. 구조물 유지관리

□ 사업개요

○ 대  상 : 338개소,   31억원

∙교  량 :  330개소,  20,454m

∙터  널 :    8개소,   3,907m

○ 구조물 안전점검 : 연 2회,  15억원

○ 구조물 부분보수 : 131개소, 16억원

□ ‘06 추진사항

○ ‘06 지방도상 교량, 터널 안전점검 실시

∙교량 및 터널 : 339개소,  5억(2회실시)

∙정밀안전진단 : 이포대교  1억(5년마다 실시)

○ ‘06 구조물 보수

∙교량 및 터널 부분(긴급)보수 : 152개소,  22억

□ ‘07 추진계획

○ 교량, 터널 등 구조물의 안전점검 및 보수로 공용내하력 증가

∙정기점검 : 지방도상(교량, 터널) 전구간  338개소,  5억원

∙정밀점검 : 교량 42개소,  10억원

∙구조물(교량)보수 : 131개소(부분보수 130, 재가설 1),  16억원

위험도로 개량을 통한 교통사고 예방

○ 사고위험 구간 선형개량으로 안전하고 편리한 도로기능 제공

○ 굴곡부 위험도로 개선을 통한 교통안전사고 사전예방

□ 사업개요

○ 위험도로 개선 : 10개소, 11.55km, 541억원

∙국가지원 사업 :  5개소,   6.68km,  175억원 (공사2, 보상3)

∙도비추진 사업 :  5개소,   4.87km,  366억원 (공사3, 보상1, 설계1)

※ ‘07 년 사 업 : 7개소,   7.91km,   68억원

- 국가지원사업 : 2개소,  3.04km,  9억원 (‘06이후 계속)

- 도비추진사업 : 5개소,  4.87km, 59억원 (계속 3, 신규 2)

※ ‘06년 예산사업 : 3개소,  3.64km

□ ‘06 추진사항

○ 위험도로 개선사업을 통한 교통사고 위험요인 해소

∙‘04년～‘06년까지 공사완료 : 3개소,  1.33km,  48억원

※ 영동리, 금광리, 구시리 등 선형개선

□ ‘07 추진계획

○ 위험도로 조기 개선으로 도로의 안전성 및 쾌적성 유지

∙공사착수 : 안성 소내리 등 5개소,  3.87km,  34억원

※ 안성 오산리․소내리․신령리, 양평 교평리․전수리

∙용지보상 : 광주 곤지암～열미간 등 4개소,  6.38km,  29억원

※ 양평 석곡리,  김포 개곡리,  광주 곤지암～열미간,  용인 북리

∙설계착수 : 양평～가평 야밀고개 1개소,  1.3km,  6억원

2. 다양한 문화욕구 충족 및 의료 ․ 과학           연구 인프라 구축

○ 쾌적한 삶을 영위하는 문화ㆍ의료복지시설 건립

○ 고부가가치 산업육성을 위한 과학연구시설 건립

쾌적한 삶을 영위하는 문화ㆍ의료복지시설 건립

○ 문화․의료복지 시설의 확충으로 삶의 질 향상

○ 이용자 만족의 쾌적한 공공건축물 건립

□ 사업개요

○ 계속사업 : 3건,  15,358㎡,  418억원 (‘07년사업비 285억원)

∙동두천노인전문병원 (6,924㎡),  백남준미술관 (5,440㎡),

실학박물관 (2,994㎡)

○ 신규사업 : 6건,  38,023㎡,  795억원 (‘07년사업비 289억원)

∙뮤지엄파크주차장 (8,595㎡),  축산위생연구소 동부지소 (2,047㎡),

경기도노인회관 (2,843㎡),  서부노인전문병원 (8,200㎡)

남양주노인전문병원 (6,460㎡),  어린이박물관 (9,878㎡)

□ ‘06 추진사항

○ 공 사 중 : 3건

∙동두천노인전문병원(38%), 백남준미술관(7%), 실학박물관(7%)

○ 설 계 중 : 3건

∙축산위생연구소 동부지소, 어린이박물관, 경기도노인회관

□ ‘07 추진계획

○ 공사중인 계속사업 완공 : 2건(동두천 노인전문병원, 실학박물관)

※ 백남준미술관 : ´08. 2월 완료예정

○ 신규사업 공사추진 : 6건

고부가가치 산업육성을 위한 과학연구시설 건립

○ 차세대 성장산업의 인프라 확충을 통한 글로벌경쟁력 제고

○ 고부가가치 산업육성 기반구축을 위한 R&D 집적기반 조성

□ 사업개요

○ 광교테크노벨리 산․학․연 첨단 R&D단지 조성 : 2건,  1,636억원

(‘07년사업비 538억원)

∙차세대융합기술연구원 (지하2층 지상16층,  58,550㎡,  362억원)

∙경기바이오센터 (지하2층 지상15층,  32,024㎡,  176억원)

○ 국립과학관건립 지원사업 : 1건, 1,000억원 (‘07년사업비 262억원)

□ ‘06 추진사항

○ 공 사 중 : 2건

∙경기바이오센터 : 공정 96% (내부마감 공사중)

∙차세대융합기술연구원 : 공정 33% (골조공사중)

○ 설 계 중 : 1건

∙국립과학관건립 지원사업 : 실시설계중 (´06. 9 ～ ´07. 3)

□ ‘07 추진계획

○ 광교테크노밸리 첨단R&D 단지조성

∙경기바이오센터 : ‘07. 2월 완공

∙차세대융합기술연구원 : ‘08. 2월 완공

○ 국립과학관건립 지원사업 : ‘09. 5월 완공

3. 건설행정의 효율적 지원

○ 유료도로의 효율적 유지관리

○ 도로보호를 위한 과적차량 단속

○ 전자 수의계약시 지역제한 의무화

유료도로의 효율적 유지관리

○ 의왕～과천 유료도로의 효율적인 유지관리로 원활한 교통소통

및 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요

○ 관리대행 : (주)경기개발공사

○ 위탁관리 계약금액 : 9억원

○ 도로 및 시설물 유지보수 : 14억원

○ 전입금 상환 : 230억원

□ ‘07 추진계획

○ 유료도로 요금소 차량정체 해소방안 강구

∙요금소 부스 증설 및 복수 차로제 도입 등

○『시설물 안전관리에 관한 특별법』에 의거 정기점검 용역 후,

교량, 터널 등 시설물에 대한 유지보수 실시 : 연중

○ 유료도로 건설 전입금 적기 전출로 도로건설 재원의 효율적

지원

○ 적기 유지보수를 통한 도로관리 강화 : 수시순찰, 사전보수

○ 민간위탁의 철저한 관리로 대민서비스 개선 및 효율성 추구

도로보호를 위한 과적차량 단속

○ 도로의 구조를 보전하여 교통사고를 사전에 예방하고 도로보수

사업비 절감을 도모

○ 원활한 교통소통 확보와 쾌적한 도로시설 유지

□ 사업개요

○ 근    거 : 도로법 제54조 및 동법시행령 제28조의 3

○ 단속기준 : 총중량 40톤, 축중량 10톤, 폭2.5m 높이 4.0m

길이 16.7m이상 초과차량

○ 단속방법 : 고정검문소(1개소), 이동단속(1개반)

○ 배치인원 : 14명(기능직 5, 상근인력 6, 유료도로 3)

□ ‘07 추진계획

○ 단속요원 자질향상을 위한 교육실시 : 월 2회

○ 이동 단속반 확대 운영 : 1개반 → 2개반

∙추가인원 및 예산확보

○ 계측결과 분쟁소지 예방을 위한 계측장비의 정밀성 확보

∙계측장비 점검 : 고정식 - 24회(매월 2회)

∙계측장비 교정검사 : 이동식 - 1회

○ 취약시기 과적차량 특별단속 실시 : 4회(분기별 1회)

○ 단속의 효율성 제고를 위한 홍보강화

∙홍보 리후렛 배부, 유료도로 전광판 활용 홍보 등

∙과적근원지 사업장 방문 계도 : 수시

∙과적근원지 공문 발송 : 건설현장, 레미콘 공장 등

○ 명예 과적단속원제 도입 : 유관단체 소속 4～5명

전자 수의계약시 지역제한 의무화

○ 전자 수의계약시 공사현장 인근지역으로 지역제한 실시

○ 지역경제 활성화 및 물류비용 절감으로 지방행정의 신뢰제고

□ 사업개요

○ 전자 수의계약 범위

구 분	공 사			용역.물품.기타	계약방법
	일반공사	전문공사	전기.통신 등
2인견적 제 출	추정가격 1천만원 초과 1억원 이하	추정가격 1천만원 초과 7천만원이하	추정가격 1천만원 초과 5천만원 이하	추정가격 5백만원 초과 3천만원 이하	G2B (전자입찰)

※ 지방자치단체 수의계약 운영요령(행정자치부 예규)

○ 수의계약 대상공사

∙차선도색, 법면보호시설, 과속방지턱, 미끄럼 방지시설 등

∙소규모 교량보수, 교통안전시설 설치공사, 소파보수 등

□ ‘07 추진계획

○ 효율적인 공사추진과 물류비용 절감을 위하여 사업장이

소재한 시․군의 지역업체로 입찰참가 제한

○ 부실시공 사전예방과 수의계약의 투명성 제고를 위하여

시․군지역업체 입찰참가 제한기준 설정

∙ 해당 시․군내 입찰참가자격을 갖춘 업체가 10개 이상인 경우는  해당 시․군으로, 10개 미만인 경우는 인접 2～3개 시․군으로 참여 확대

※ 2006년도 수의계약 실적 : 30건,  850,795천원

Ⅴ. 역 점 시 책

효율적인 공사관리로 사업비 절감, 공기단축, 주민불편 최소화

○ 선택과 집중을 통한 교통정체 최소화로 공기단축 및 사업비 절감

○ 우수한 신기술 및 신공법을 도입 기술발전을 도모하고 효율적인

공사관리로 주민불편 최소화

□ 현    황

○ 교통불편 최소화를 위해 추진중인 도로공사가 장기화로 교통정체

○ 장기간 사업추진에 따른 지역주민 및 교통소통 불편초래와

사업효과도 반감

□ ‘06 추진사항

○ 연장이 긴 구간은 단계별시공 및 부분개통 계획을 수립 불편 해소

○ 설계완료전 행정절차 병행추진으로 공사착공기간 단축

∙환경영향평가(검토), 농지전용협의, 도로구역결정 등 관련기관 협의

○ 동탄～고매간 도로확포장공사 등 지방도 사업 23개 현장에

신기술 제307호 강관말뚝 합성형 두부보강공법 등 33건 적용

□ ‘07 추진계획

○ 공정계획(CPM) 재검토로 주공정과 부대공정의 동시 이행으로

공기단축 방안 검토

○ 동절기 공사추진(12월 ～ 2월)

∙토공, 부대공은 계속시행 콘크리트타설은 보온양생 등 제한적 시행

○ 교통흐름을 방해하는 공사 지양, 공사안내표지 등의 반듯한 선진국형 현장관리로 공사현장주변 교통불편 해소 도모

∙지방도 공사장 교통관리기준 시행

○ 신기술, 신공법의 과감한 도입으로 사업예산절감

간부공무원 명단

구 분	직 위	직 급	성 명	비 고
건 설 본 부	본 부 장	지방부이사관	이 화 순
	관 리 부 장	지방서기관	박 상 돈
	건설 1 부장	지방시설서기관	이 경 은
	건설 2 부장	지방시설서기관	김 준 용
	기획조정팀장	지방행정사무관	정 인 웅
	계약관리팀장	지방행정사무관	박 민 식
	도로관리팀장	지방토목사무관	정 헌 채
	도로건설1팀장	지방토목사무관	이 원 영
	도로건설2팀장	지방토목사무관	김 남 근
	도로보수팀장	지방토목사무관	김 선 규
	시설관리팀장	지방토목사무관	이 충 우
	건축 1 팀 장	지방건축사무관	모 상 규
	건축 2 팀 장	지방건축사무관	한 대 희
	기 전 팀 장	지방전기사무관	오 세 윤