2010 주요업무보고

경     기    도

( 건 설 본 부 )

목       차

Ⅰ.	일 반 현 황	--------------------------------------------------------------------------															3
	1. 기구 및 인력		-------------------------------------------------------------------														3
	2. 부서별 주요기능		---------------------------------------------------------														4
	3. 기본현황	---------------------------------------------------------------															5
	4. 예산규모	---------------------------------------------------------------															6
Ⅱ.	‘10년도 정책목표 및 과제						-------------------------------------------------------										7
Ⅲ.	정책과제별 추진계획						-----------------------------------------------------										9
	1. 효율적인 도로건설 및 관리										----------------------------------------						9
	〇 지역간 연계강화를 위한 간선도로망 구축														--------------------------------		10
	〇 쾌적하고 안전한 도로기능 유지									------------------------------------------							11
	〇 이용자 편의위주의 유료도로 관리													----------------------------------			14
	2. 효율적인 공공건축물 건립							---------------------------------------------------									15
	〇 이용자 중심의 공공건축물 건립												--------------------------------------				16
	〇 공공 건축물 품질 향상 및 시공능력 제고												---------------------------------------				17
	〇 이용자 만족을 위한 준공 건축물 하자관리												--------------------------------------				18
	3. 하천의 체계적․종합적 정비 추진								-------------------------------------------								19
	〇 안전하고 환경친화적인 하천정비 추진											---------------------------------------					20
	〇 경기도 “고향의 강” 선도사업 추진											---------------------------------------					21
	〇 체계적 하천관리를 위한 하천기본계획 재정비													----------------------------------			22
	〇 한강살리기 사업 추진				-----------------------------------------------------------												23
Ⅳ.	당면 현안사항					----------------------------------------------------------											25
	1. 도 신청사 건립 추진					------------------------------------------------------											26
	2. 서수원～의왕간 민간투자 고속화도로 조기 개통															-----------------------	27
Ⅴ.	간부공무원 현황			------------------------------------------------------------------													29

Ⅰ. 일반현황

1. 기구 및 인력

--------------------  4과 16팀

기  구

					건설본부
관 리 과 (3팀)			도로건설과 (5팀)					건축시설과 (4팀)					하 천 과 (4팀)
기획조정팀 계약관리팀 과적단속팀			간선도로팀 지방도로팀 도로시설팀 도로환경개선팀 도로운영팀					건 축 1 팀 건 축 2 팀 건축설비팀 행정타운팀					하천행정팀 하천계획팀 하천시설팀 강변살자팀

-------------------  99 / 98명

정원/현원

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
계	99/98	1/1	4/4	16/16	21/21	15/9	10/13	0/2	32/32
관 리 과	30/31	1/1	1/1	3/3	3/3	4/2	1/3	0/1	17/17
도로건설과	31/31		1/1	5/5	8/7	4/1	3/6	0/0	10/11
건축시설과	19/18		1/1	4/4	5/4	2/3	3/2	0/1	4/3
하 천 과	19/18		1/1	4/4	5/7	5/3	3/2		1/1

2. 부서별 주요기능

3. 기본현황

• 건설본부 행정의 종합 기획 ․ 조정

• 예산 편성, 회계 및 공유재산 관리

• 공사 ․ 용역 등 계약, 관급자재, 물품구매 및 지출

• 과적차량 단속 및 도로대장 전산화

• 국지도, 지방도 설계 ․ 시공 및 감리

• 민자도로 건설공사 추진

• 지방도 포장도 유지 ․ 관리

• 지방도 시설물(교량, 터널) 유지 ․ 관리

• 위험도로 선형개량사업 추진

• 의왕~과천 유료도로 및 자동차 전용도로 관리

• 건설공사 품질시험실 운영

• 공공 건축물 설계 ․ 시공 및 감리

• 준공 건축물 하자보수 관리

• 기계, 전기, 통신, 소방 공사 시공․감리 및 하자보수 관리

• 치수사업 종합계획 및 하천정비 기본계획 수립

• 하천 시설물 유지 및 보수관리

• 하천 개수 및 보수 공사

• 하천 미불용지 보상 및 소송 수행

• 한강살리기사업 추진

도로건설과

건축시설과

하 천 과

관  리  과

도  로

71개 노선, 2,896,7km(포장율 81.6%)-10개노선 중복

□ 국가지원지방도 : 11개 노선,   996.8km (포장율 80.6%)

□ 일 반 지 방 도 : 42개 노선,  1,743.4km (포장율 80.7%)

□ 위  임  국  도 :  8개 노선,   156.5km (포장율 100%)

- 漢水以南	:	42개 노선,	1,769.2km,	(중복 10개 노선)
․국 지 도	:	10개 노선,	600.9km,	(중복 5개노선)
․지 방 도	:	27개 노선,	1,129.4km,	(중복 4개노선)
․위임국도	:	5개 노선,	38.9km,	(중복 1개노선)
- 漢水以北	:	29개 노선,	1,127.5km,	(중복 10개 노선)
․국 지 도	:	6개 노선,	395.9km,	(중복 5개노선)
․지 방 도	:	19개 노선,	614.0km	(중복 4개노선)
․위임국도	:	4개 노선,	117.6km	(중복 1개노선)

구조물

398개소 (교량 381, 터널 14, 지하차도 1, 옹벽 2)

□ 국    도 :  20개소(교량 20개소)

□ 국 지 도 : 121개소(교량 117, 터널 2, 지하차도 1, 옹벽 1)

□ 지 방 도 : 257개소(교량 244, 터널 12, 옹벽 1)

❍ 1종 : 27개소   ❍ 2종 : 47개소  ❍ 기타 : 324개소

※ 지방도․위임국도 : 371개소(교량361, 터널8, 지하차도1, 옹벽1)

※ 유료도로 :  27개소(교량 20 터널 6, 옹벽 1)

하  천

515개소 3,493㎞/요개수 4,755㎞, 기개수 3,464㎞(72.%)

□ 국 가 하 천 : 15개소  481㎞/요개수 473㎞, 기개수 415㎞(개수율 87.8%)

□ 지 방 하 천 : 500개소 3,012㎞/요개수 4,282㎞, 기개수 3,049㎞(개수율 71.2%)

※ 소하천 : 2,182개소  3,256㎞

관리재산

대지 3필지 63,865㎡, 건물 6동 4,258㎡

□ 본    부 : 대지 2필지  7,538㎡, 건물 2동 2,754㎡

□ 유료도로 : 대지 1필지 56,327㎡, 건물 4동 1,504㎡

□ 건설장비․차량 : 굴삭기 등 30대 (중기 6, 차량 13, 제설장비 11)

4. 예산규모

---------------  4,282억원

'10 예산규모

(단위:백만원)

구 분		2010년	2009년	증감액	비고
총 계		428,168	429,639	△1,471	△0.3%
회계별	소 계	176,566	226,552	△49,986	△22.1%
	일반회계	149,219	198,471	△49,252	△24.8%
	유료도로특별회계	27,347	28,081	△734	△2.7%
재 배 정		251,602	203,087	48,515	23.9%

회계별 현황

자체 예산

(단위:백만원)

회 계 별	계	정책사업	행정운영	재무활동	비 고
계	176,566	157,118	798	18,650
일반회계	149,219	148,421	798	-
특별회계	27,347	8,697	-	18,650

재배정 예산

(단위:백만원)

계	도로 건설	공공건축물 건립	비 고
251,602	191,725	59,877

Ⅱ. ‘10년도 정책목표 및 과제

도민이 만족하는 건설인프라 구축

정책목표		효율적인 도로건설 및 관리		효율적인 공공건축물 건립		하천의 체계적․ 종합적 정비 추진
정책과제		1. 지역간 연계강화를 위한 간선도로망 구축		1. 이용자 중심의 공공건축물 건립		1. 안전하고 환경친화적인 하천정비
		2. 쾌적하고 안전한 도로기능 유지		2. 공공 건축물 품질 향상 및 시공능력 제고		2. 경기도 “고향의 강” 선도사업 추진
		3. 이용자 편의위주의 유료도로 관리		3. 이용자 만족을 위한 준공 건축물 하자관리		3. 체계적 하천관리를 위한 하천기본계획 재정비
						4. 한강살리기 사업 추진

Ⅲ. 정책과제별 추진계획

과제 1		효율적인 도로건설 및 관리

□ 지역간 연계강화를 위한 간선도로망 구축

□ 쾌적하고 안전한 도로기능 유지

□ 이용자 편의위주의 유료도로 관리

1		지역간 연계강화를 위한 간선도로망 구축

◈ 선택과 집중 투자를 통한 공기단축 및 도로이용자 편익증진 도모

◈ 지역발전과 주민 편리성 제고를 통한 도민불편 해소

◈ VE를 통한 신기술 신공법 도입 및 친환경 자재사용으로 예산절감

VE(Value Engineering) : 최소의 생애주기비용으로 시설물의 필요한 기능을 확보하기 위하여 설계내용에 대한 경제성 및 현장 적용의 타당성을 기능별, 대안별로 검토하는 것

□ 사업개요

❍ 간선 도로망 구축 : 서운～안성 등 21건/143.1km, 계획 공정율 50%

- 신도시 주변도로      : 동탄～고매 등   5건/22.3km, 계획 공정율 47%

- 수도권 교통정체해소 : 서운～안성 등   4건/37.5km, 계획 공정율 67%

- 기업하기 좋은 도로  : 남양～구장(2) 등 5건/20.8km, 계획 공정율 65%

- 관광지 주변도로     : 분천～안녕      1건/ 1.9km, 계획 공정율 10%

- 동서축 도로확충     : 고당～수산 등   4건/33.2km, 계획 공정율 52%

- 민간투자사업        : 서수원～의왕 등 2건/27.4km, 계획 공정율 60%

※ 미착공 : 20건(보상 17건, 설계완료 3건)

‘10년 예산 : 36건, 1,932억원(국비 777, 도비 403, 지방채 752)

□ 그간의 추진실적

❍ ‘09년 공사 추진 : 서운～안성 등 21건, 146.9km/2,511억원

⇒ 목표 공정율 43% 달성

※ ‘09년 준공 : 학일～고당 등 2건, 9.2km, 154억원

❍ 제3경인 고속화도로 3개월 공기단축으로 ‘10. 5월 조기개통 및

고당～수산간 도로 ‘10. 4월 개통

□ 향후 추진계획

❍ 서수원～의왕간 고속화도로 상습정체구간 조기개통 추진

- 경기 영업소～학의JCT(3.2km) '10. 12월 조기 개통(2년 단축)

❍ 공사중인 21개 사업에 집중예산 투입으로 계획 공정율 달성

- 서운~안성 등 21건, 143.1km/1,556억원 , 평균 계획 공정율 50%

2		쾌적하고 안전한 도로기능 유지

◈ 도로기능 관리․강화를 통한 쾌적하고 안전한 도로유지

◈ 굴곡부 위험도로 개선을 통한 교통안전사고 예방

□ 지방도 유지 및 개선

□ 사 업 개 요

❍ 포장도 유지관리 : 76억원

- 포장도보수공사 : 9개 시‧군 34억원

- 차선도색공사   : 9개 시‧군 26억원

- 도로시설물 정비공사 : 9개 시‧군 9억원

- 상시보수공사   : 18개소, 7억원

❍ 위험도로 개선 : 7개소, 8.43km, 82억원

- 국가지원 사업(5개소)--------- 5.51km, 52억원

- 도비추진 사업(2개소)--------- 2.92km, 30억원

□ 그간의 추진실적

❍ 체계적이고 효율적인 지방도 유지관리로 도로이용자 편의 도모

- 지방도 유지관리 공사추진 : 109억원

❍ 위험도로 개선사업을 통한 교통사고 위험요인 해소

- 공사완료 : 광주 곤지암~열미 1개소, 1.4km, 95억원

- 공사착공 : 김포 개곡리 등 4개소, 4.55km, 77억원

□ 향후 추진계획

❍ 지방도 유지관리의 단가계약 확대 및 신속한 집행

❍ 위임국도 L=38.9km 구간 포장도 유지관리 추진(국비 100%)

❍ 위험도로 조기 개선으로 교통사고 사전예방

- 공사추진 : 김포 개곡리 등 4개소, 4.55km, 40.6억원

․양평 석곡리(L=1.35km), 안성 신령리(L=1.1km), 김포 개곡리(L=1.76km),

양평 전수리(L=0.34km)

- 용지보상 : 양평 그루고개 등 2개소, 2.06km, 11.5억원

․양평 그루고개(L=1.14km), 안성 금광리(L=0.92km)

- 설계완료 : 양평 야밀고개 L=1.82km, 30억원

□ 구조물 유지관리

□ 사업대상 : 398개소

《 지 방 도 로 》	《 유 료 도 로 》
❍ 교 량 : 361개소 21,630m ❍ 터 널 : 8개소 4,506m ❍ 지하차도 : 1개소 235m ❍ 옹 벽 : 1개소 133m	❍ 교 량 : 20개소 1,892m ❍ 터 널 : 6개소 3,531m ❍ 옹 벽 : 1개소 149m

□ 그간의 추진실적

❍ 교량 및 터널 안전점검 실시 : 351개소(1～2회실시)  9억원

❍ 교량 및 터널 등 구조물 부분(긴급)보수 : 88개소 60억원

❍ 문수산 터널 위탁관리 : 5억원

❍ 교량 재가설 공사 시행

- 전천교 준공 : 17억원

- 구 양수대교 착공  : 57억원

□ 향후 추진계획

❍ 정기점검(교량, 터널) 등 구조물 : 340개소, 3.6억원

❍ 정밀점검 및 정밀안전진단(교량, 터널) : 15개소, 2.1억원

❍ 구조물(교량, 터널) 보수 : 30.6억원

❍ 문수산 터널 위탁관리 : 5.5억원

❍ 구 양수대교 재가설공사 추진 : 67억원

※ ‘10년부터 국도 위임 교량 20개소 유지관리비용 국비지원(0.7억원)

□ 과적차량 단속

□ 단속대상

❍ 단속기준 : 축하중 10톤, 총중량 40톤, 폭2.5m 높이 4.0m,

길이 16.7m이상(연결․굴절차 19m) 초과차량

❍ 노    선 : 42개 노선(국도 5, 국지도 10, 지방도 27)

□ 과적 단속인력 및 장비보유 현황

(단위:명)

과적단속 인원(명)				검문소	이동식 축중기	단속 차량	비고
계	일반	기능	무기 계약직	유료도로
17	2	9	6	1개소	14개	2대

□ 그간의 추진실적

(단위 : 건수)

구분	2008년		2009년		2010년 6월말		비고
	검차	적발	검차	적발	검차	적발
계	166,155	504	243,743	562	94,856	169
의왕검문소	160,137	98	235,706	143	91,696	54
이동단속	6,018	406	8,037	419	3,160	115

□ 향후 추진계획

❍ 계측장비 신규교체로 정확성 강화

❍ 민원발생 지역 집중단속(수시)

❍ 야간 및 공휴일 특별단속(분기 1회)

3		이용자 편의위주의 유료도로 관리

◈ 의왕～과천 유료도로의 효율적인 유지관리로 쾌적한 도로환경 조성

◈ 유료도로의 적기 유지보수로 주행 안전성 확보 및 교통안전사고 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 의왕시 고천동～과천시 문원동(지309호선)

❍ 연    장 : L=10.85km (B=24m, 편도 2～4차선)

❍ 시 설 물 : IC 4개소, 교량 20개소, 터널 6개소, 요금소 1개소

❍ 사업내용 : 유료도로 유지관리

- 유료도로 관리 민간위탁, 유료도로 유지보수

□ 그간의 추진실적

❍ 유료도로 관리 민간위탁 시행으로 효율적인 도로 및 시설물 유지관리

- 민간위탁 기관 : 경기개발공사

❍ 명절 연휴기간 통행료 면제를 통한 도로이용객 편의 도모

- 설 명절(‘09.1.25～1.27), 추석 명절(’09.10.2～10.4)

❍ 후불카드 시스템 도입으로 이용자 편의 위주의 요금징수체계 구축

□ 향후 추진계획

❍ 유료도로의 효율적인 유지관리를 위해 민간위탁 시행

- 위탁업무 : 통행료 징수, 도로청소, 제설작업, 도로 및 시설물 관리 등

❍ 도로 및 부속 시설물의 적기 유지보수로 쾌적한 도로환경 조성

- 시설물 안전점검, 포장도 유지보수, 축중기 교체, 조명시설 개선 등

과제 2		효율적인 공공건축물 건립

□ 이용자 중심의 공공 건축물 건립

□ 공공 건축물 품질 향상 및 시공능력 제고

□ 이용자 만족을 위한 준공 건축물 하자관리

1		이용자 중심의 공공 건축물 건립

◈ 이용자 중심의 안전하고 편리한 공간구성

◈ 철저한 현장․품질관리를 통한 견실한 시공 도모

□ 사업개요

○ 계속사업(2건)/연면적 15,518㎡, 총사업비 298억원(‘10년도 116억원)

- 서부(시흥) 노인전문병원 (지하2층, 지상3층, 8,387㎡)

- 남부(평택) 노인전문병원 (지상4층,  7,131㎡)

○ 신규사업(3건)/연면적 131,313㎡, 총사업비 5,858억원(‘10년도 517억원)

- 친환경 농산물센터(연면적 29,700㎡)

- 도 신청사 건립(연면적 98,000㎡)

- 바다향기 수목원(지상 1～2층, 8개동, 연면적 3,613㎡)

□ 그간의 추진실적

○ 공사 추진 진척율(%)

- 서부(시흥) 노인전문병원 : 100% (‘10.4월 완공)

※ 공사 기간 :  ´08. 8 ~ ´10. 4월

- 남부(평택) 노인전문병원 : 37%

※ 철근콘크리트 골조공사 완료

	＜ 친환경 등 기능향상 추진＞
• 신․재생 에너지 활용(태양광, 태양열, 지열 등) 및 에너지 절감 노력 - 서부 노인전문병원(태양광 전력․태양열 난방설비, LED 조명기기 설치) - 남부 노인전문병원(태양광 전력설비, LED 조명기기 설치) • 이용자를 위한 친환경 자재 도입 - 석유계 페인트를 친환경 천연페인트로 시범시공(서부 노인전문병원 : 2,400㎡) • VE 시행으로 기능향상 및 예산절감 - 기능향상 및 예산절감(1.19억원) 추진(남부 노인전문병원)

□ 향후 추진계획

○ 계속사업 : 1건

- 남부(평택) 노인전문병원 : ‘09. 8월 착공, ’11. 5월 완공

○ 신규사업 : 3건

- 친환경 농산물 유통센터 : ´10. 7월  턴키공사 발주, ´10. 12월  공사 착수

- 도신청사 건립 : 설계용역 보류(‘10년도 예산 미반영)

- 제2 도립 바다향기 수목원 : 설계완료후 조달청 감리용역계약 의뢰 중

2		공공 건축물 품질 향상 및 시공능력 제고

◈ 외부 전문가로 구성한 입체적 현장관리 평가와 열린 점검을 통하여

공공 건축물 품질 향상 및 시공능력 제고

□ 사업개요

○ 현장공정 보고회 개최

- 대    상  : 공사중인 공공 건축물 건축현장(2개 현장)

※ 서부노인전문병원, 남부노인전문병원

- 공정보고회 실시 : 매월 1회

○ 품질검사단 합동점검

- 대    상  : 공사중인 공공 건축물 현장(2개 현장, 2회)

※ 서부 노인전문병원(준공 1개월 전), 남부 노인전문병원(공정50%)

- 점검시기 : 공정 50%, 준공 1개월전

□ 그간의 추진실적

○ 현장공정 보고회 개최 : 6회

○ 품질검사단 합동점검 : 1회

- 서부노인전문병원(1회) : 준공 1개월전

	＜ 2009년도 공정보고회 및 품질검사 현황 ＞
• 현장공정 보고회 개최 : 12회 • 품질검사단 합동점검 : 6회 - 실학 박물관(1회) : 준공 1개월전 - 경기도 노인회관(1회) : 준공 1개월전 - 남양주 노인전문병원(2회) : 공정율 50%, 준공 1개월전 - 서부 노인전문병원(1회) : 공정율 50% - 경인교대 지하수질 정화사업(1회) : 공정율 50%

□ 향후 추진계획

○ 현장공정 보고회 개최 : 6회

○ 품질검사단 합동점검  : 1회

3		이용자 만족을 위한 준공 건축물 하자관리

◈ 준공된 공공 건축물에 대하여 이용자 불편 해소와 유지관리를

위해 신속한 하자보수

□ 사업개요

○ 근   거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령     제69조(하자책임기간)

○ 대   상 : 준공된 건축물 37개소 중 하자보증 기간 내에 있는 건축물

□ 그간의 추진실적

○ `10년도 하자검사대상 23개 현장 중 5개 현장에서 총 45건의 하자가 발생 되어 보수 조치 중

	＜ ‘09년도 하자보수 현황 ＞
•하자발생 : `09년도 검사대상(22개 현장) 중 14개 현장 총 50건 하자발생 •조치완료 : 14개 현장 50건

□ 향후 추진계획

○ 하자보증기간 내에 있는 준공 건축물(23개 현장) 하자 발생 시 조속히 보수 추진

	＜ 하자발생 최소화 대책 방안 ＞
- 설계단계 : 설계자문 위원회, 건설기술 심의위원회 등 사전심의를 통해 설계상의 하자 및 미흡한 부분 보완 - 공사단계 : 건설관련 외부 전문가 등 민간인으로 구성된 품질검사단 운영(운영시기 : 공정 50%, 준공 1개월 전) - 준공단계 : 발주청, 수요부서, 유지관리기관 및 시공자, 감리자 합동으로 시설물 예비준공검사 실시

과제 3		하천의 체계적․종합적 정비 추진

□ 안전하고 환경친화적인 하천정비 추진

□ 경기도 “고향의 강” 선도사업 추진

□ 체계적 하천관리를 위한 하천기본계획 재정비

□ 한강살리기 사업 추진

1		안전하고 환경친화적인 하천정비 추진

◈ 하천생태 및 치수기능 등 재해와 환경을 고려한 자연친화적 하천 정비

□ 사업개요

❍ 지방하천 개수사업 : 55지구 200.5km 90,166백만원(국비38,200, 도비51,966)

❍ 소하천 정비사업 : 18지구 16.56km 30,524백만원(국비 15,262, 시군비 15,262)

구 분	도 직접			시군 보조			비 고
	지구수	사업량(㎞)	사업비 (백만원)	지구수	사업량(㎞)	사업비 (백만원)
계	13	53.6	21,483	60	163.46	99,207
지방하천 개수사업	13	53.6	21,483	42	146.90	68,683
소하천 정비사업	-	-	-	18	16.56	30,524

□ 그간의 추진실적

❍ 지방하천 개수 : 55개지구 공사 및 보상 추진 중

- 준공지구(양화천 등 7개지구) : 공정률 78～92%

- 계속지구(안성천 등 39개지구) : 보상 및 공사

- 신규지구(서호천 등 9개지구) : 실시설계용역

❍ 소하천 정비 : 7개지구 준공, 11개지구 보상 및 공사

□ 향후 추진계획

❍ 공사 중인 현장은 우기 전까지 축제, 호안 등 주요공정 완료 추진

❍「하천정비기본계획」에 의거 하천정비공사를 지속적으로 추진하여   재해로부터 주민의 생명과 재산 보호

2		경기도“고향의 강”선도사업 추진

◈ 지역별 대표 하천을 복합정비(利․治․淸․豊水 및 親水)하여 홍수예방,

용수확보, 수질개선 도모

◈ “고향”과 “강”에서 느껴지는 감성적 이미지를 하천에 접목하여 풍요로운 지역명물(Water Landmark) 하천 조성(1시․군 1개소씩 확대 시행)

□ 사업개요

❍ 위  치 : 경안천(용인시 처인구 모현면 초부리～갈담리)

❍ 사업량 : 하천연장 L = 6.4km

- 주제공원조성1), 축제 및 호안, 자전거도로, 산책로, 관찰테크, 자연학습장 등

❍ 사업비 : 48,000백만원(국비 28,800, 도비 19,200)

- 2010년 예산 : 1,667백만원(국비 1,000, 도비 667)

□ 그간의 추진실적

❍ ‘10. 2. 11 : 사업대상 선정 제출(도→국토부)

❍ ‘10. 4. 12 : 선도사업 추진계획 방침결정(국토부)

❍ ‘10. 4. 14 : 선도사업 대상지 결정 및 통보(국토부→도)

※ 전국 15개소 선도사업 결정

❍ ‘10. 5. 27 : 국고보조금 재배정(국토부)

❍ ‘10. 6. 16 : 제2회 추가경정 성립전 예산 확정(국비 1,000백만원)

□ 향후 추진계획

❍ ‘10. 7 ~ ’11. 1월 : 실시설계용역 추진

❍ ‘11. 3월 : 공사 착공(’15. 12월 공사 준공)

1) 용인팔경 중의 하나인 “비파담만풍(조선 숙종 때의 영의정이었던 남구만 선생이 낙향하여 정자를 짓고 비파를 타며 경치를 즐겼다고 전해지는 곳)“을 스토리텔링이 있는 테마공원으로 조성

3		체계적 하천관리를 위한 하천기본계획 재정비

◈ 국토계획상 하천유역 변동상황을 고려한 10년 단위의 하천기본

계획 재정비로 효율적인 하천관리체계 구축

□ 하천기본계획 재정비 현황

❍ 하천기본계획 수립

- 500개(연장 3,003㎞)중 접경지역 6개 하천을 제외한 494개소(2,958㎞) 완료

※ 접경지역 6개 하천 : 사천(파주), 고잔천, 마거천, 적거천, 중사천, 흑석천(연천)

‘09년 하천기본계획 재정비율 87%(430개)		‘10년 하천기본계획 재정비율 90%(444개)

❍ '09년까지 430개 하천 2,525㎞ 기본계획 재정비 완료(87%)

※ 미정비 64개 433㎞

❍ '10년까지 444개 하천 2,598㎞ 기본계획 재정비로 재정비율 90% 달성

※ 미정비 50개 360㎞

□ 그간의 추진실적

❍ ‘10. 4월 : 용역 착수(14개 하천 73.11㎞, 2,871백만원, 여주․양평)

- 용담천 등 9개 L=38.38㎞(용담천, 계장천, 신내천, 금사천, 상호천,

소유천, 향리천, 주어천, 세월천)

- 항금천 등 5개 L=34.73㎞(항금천, 영동천, 가정천, 문호천, 서호천)

❍ ‘10. 6월 : 착수보고회 개최

□ 향후 추진계획

❍ ‘11. 6월 : 용역 완료

❍ 각종 개발사업 등으로 인한 변경 요인 발생 시 수시 재정비 추진

※ 수시 재정비 추진실적(‘09. 1 ~ ’10. 6월) : 11개 하천 88.21㎞

4		한강살리기 사업 추진

◈ 홍수와 가뭄, 물 문제 근원적 해결과 강 중심 국토 재창조

◈ 일자리 창출과 지속적인 지역경제 발전 도모

□ 현 황 도

□ 사업개요

○ 사업범위 : 남한강 및 북한강 일원(팔당댐 상류)

○ 사업기간 : ‘09. 10. 27. ～ ’11. 12. 31.

구 분	공구명	구 간	연장 (km)	사업비 (억원)	발주 방법	발주 시기	시행청	착공일	공정률 (%)
계	7공구		117.2	13,859					27
남한강	1공구	팔당댐~양평대교 (광주, 남양주, 양평)	24.6	634	일반	2차	경기도	‘10. 4.13	1.5
	2공구	양근대교~이포보 (양평, 여주)	11.3	788	일반	1차	경기도	‘09.12.21	23.5
	3공구	이포보~백석리섬 (여주)	9.0	3,628	턴키	1차	서울청	‘09.10.27	27.3 (32.8)
	4공구	백석리섬~여주보 (여주)	3.7	2,945	턴키	1차	서울청	‘09.10.27	26.5 (36.4)
	5공구	여주보~여주대교 (여주)	3.6	913	일반	1차	경기도	‘09.12.21	16.5
	6공구	여주대교~섬강 (여주)	17.5	2,699	턴키	1차	수 공	‘09.10.27	27.1 (21.8)
북한강	9공구	남양주~가평 자라섬 (남양주, 가평)	47.5	781	일반	1차	서울청	‘09.11.18	9.1
소수력발전		이포보, 여주보, 강천보		675			수 공
계속사업		여주제 등 5개소		796			서울청

※ (   )는 보 설치 공정률임

□ 공구별 사업내역

공구	시행청	사업지구	주요 사업내용	비고
1공구	경기도	귀여, 두물지구 등 13개 지구	□ 하천개수 12.13㎞ □ 생태하천 20.68㎞, 관리용도로 21.16 km 등
2공구	경기도	교평, 창대지구 등 5개지구	□ 하천개수 8.37㎞ □ 생태하천 6.97㎞, 관리용도로 8.70㎞ 등
3공구	서울청	당남지구 등 5개지구, 당남리섬	□ 이포보, 소수력발전 1,000㎾×3 □ 여주저류지 1개소 1.85㎢ 등
4공구	서울청	백석지구 등 4개 지구, 백석리섬	□ 여주보, 소수력발전1,650㎾×3 □ 하도정비 1,382만㎥ □ 생태하천 조성 4개소 □ 관리용도로 9.34㎞ 등
5공구	경기도	현암지구, 왕대리섬 지구	□ 하도정비 524만㎥ □ 생태하천 5.58㎞, 관리용도로 7.27㎞
6공구	수자원 공 사	언양지구 등 5개지구, 삼합리섬, 강천섬	□ 강천보, 소수력발전 1,665㎾×3 □ 하도정비 1,430만㎥ □ 생태하천 조성 7개소, □ 관리용도로 30.4㎞ 등
9공구	서울청	진중지구 등 7개지구	□ 생태하천 28.1㎞ □ 관리용도로 17.9㎞

□ 그간의 추진실적

❍ ‘09. 10. 27 : 턴키구간(3․4․6공구) 공사 착공

❍ ‘09. 10. 12 : 대행공사협약(서울지방국토관리청↔경기도)

❍ ‘09. 11～12 : 일반공사(2․5․9공구) 착공

❍ ‘10.  4.  13 : 일반공사 2단계(1공구) 공사 착공

□ 향후 추진계획

❍ ‘10년 말 : 공정계획 45% 목표로 추진

❍ 민원 동향파악 등 민원 사전예방 노력 경주

❍ 사업 추진의 공감대 형성과 필요성을 인식할 수 있도록 현장견학 등을 통한 적극적인 홍보활동과 이해 설득 노력 강화

❍ ‘11년 말 : 공사완료

Ⅳ. 당면 현안사항

□ 도 신청사 건립 추진

□ 서수원～의왕간 민간투자 고속화도로 조기개통

1		도 신청사 건립 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 광교신도시내 특별계획구역 (공공청사 4블럭)

○ 규    모

- 부 지 면 적 : 88,235㎡ (26,690평)

- 건축 연면적 : 98,000㎡ (29,644평)

○ 총사업비 : 4,978억원 (추정)

- 토지 매입비 2,134억원, 공사비 2,600억원

- 설계비, 감리비, 시설부대비 244억원

○ 사업기간 : 2009년 ～

□ 문 제 점

○ 경제사정 악화로 도 재정여건 열악

○ 2010년도 예산심의 시 신청사 기본설계비 삭감

○ 호화청사 논란 등 사회적 여론 비등

※ 광교신도시 입주예정자들은 도청사 조기이전 요구

□ ‘10. 7월 현재 24,472세대 중 11,666세대 분양

□ 대    책

○ 재정여건 등을 감안하여 숙고(熟考)

2		서수원～의왕간 민간투자 고속화도로 조기개통

□ 사업개요

○ 위    치 : 수원시 권선구 금곡동～의왕시 청계동(학의JCT)

○ 사 업 량 : L=13.07㎞ B=4차로⇒6~8차로 확장

○ 총사업비 : 2,954억원(공사비 1,968억원, 보상비 986억원)

○ 공사기간 : 착수일로부터 3년 6개월(운영기간 29년)

○ 사업방식 : BTO(준공시 소유권 경기도 귀속, 29년간 운영)

○ 시 행 자 : 경기남부도로(주)

○ 공 정 율 : 8.9%(보상율 : 99%)

□ 문 제 점

○ 경기영업소에서 학의JCT구간 상습정체로 통행자 불편 초래

○ 지난 2009. 11월 서수원~오산~평택간 고속도로 개통으로

서수원~의왕간 고속화도로의 조기개통이 필요한 실정임

□ 대    책

○ 서수원~의왕간 도로 전구간(L=13.07㎞)에 대해 2012. 12월 까지 완료할 예정이나 1년 공기단축하여 2011. 12월 임시개통할 예정임

○ 특히, 상습정체구간인 경기영업소~학의JCT(L=3.2km) 구간에 대하여 당초보다 2년 공기단축하여 2010. 12월 조기 임시개통

Ⅴ. 간부 공무원 명단

직 위	직 급	성 명	비 고
본 부 장	지방기술서기관	이 의 재
관 리 과 장	지방서기관	조 광 오
기획조정팀장	지방행정사무관	김 종 근
계약관리팀장	지방행정사무관	최 영 준
과적단속팀장	지방행정사무관	강 도 영
도로건설과장	지방기술서기관	손 성 오
간선도로팀장	지방시설사무관	김 정 기
지방도로팀장	지방시설사무관	차 동 길
도로시설팀장	지방시설사무관	남 동 경
도로환경개선팀장	지방시설사무관	이 정 석
도로운영팀장	지방시설사무관	심 창 훈
건축시설과장	지방기술서기관	김 태 용
건축 1 팀 장	지방시설사무관	이 식
건축 2 팀 장	지방시설사무관	이 세 영
건축설비팀장	지방공업사무관	정 성 연
행정타운팀장	지방시설사무관	장 태 호
하 천 과 장	지방기술서기관	김 세 중
하천행정팀장	지방행정사무관	김 정 문
하천계획팀장	지방시설사무관	김 영 후
하천시설팀장	지방시설사무관	이 상 욱
강변살자팀장	지방시설사무관	서 금 석