- 도민이 만족하는 건설인프라 구축 -

2011년 업무계획

경     기     도

( 건 설 본 부 )

Ⅰ. 일반현황	3

1. 기구 및 인력	3

2. 부서별 주요기능	4

3. 기본현황	5

4. 예산규모	6

Ⅱ. 2010년도 주요성과	7

Ⅲ.‘11년도 정책목표 및 과제	9

Ⅳ.‘11년도 역점 추진사업	11

1. 효율적인 도로건설 및 관리	11

2. 이용자 중심의 공공건축물 건립	17

3. 하천의 체계적 ․ 종합적 정비 추진	21

Ⅴ. 간부공무원 명단	27

목    차

Ⅰ. 일반현황

1. 기구 및 인력

--------------------  4과 17팀

기  구

					건설본부
관 리 과 (3팀)			도로건설과 (5팀)					건축시설과 (4팀)					하 천 과 (5팀)
기획조정팀 계약관리팀 과적단속팀			간선도로팀 지방도로팀 도로시설팀 도로환경개선팀 도로운영팀					건 축 1 팀 건 축 2 팀 건축설비팀 행정타운팀					하천행정팀 하천계획팀 하천관리팀 하천시설팀 강변살자팀

------------------  102 / 100명

정원/현원

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
계	102/100	1/1	4/4	17/17	22/22	17/13	9/13	0/0	32/30
관 리 과	29/28	1/1	1/1	3/3	3/3	4/3	1/2	0/0	16/15
도로건설과	31/32		1/1	5/5	8/7	4/3	3/5	0/0	10/11
건축시설과	19/18		1/1	4/4	5/4	2/3	2/3	0/0	5/3
하 천 과	23/22		1/1	5/5	6/8	7/4	3/3	0/0	1/1

2. 부서별 주요기능

3. 기본현황

• 건설본부 행정의 종합 기획 ․ 조정

• 예산 편성, 인력, 청사 등 공유재산 관리

• 공사 ․ 용역 등 계약, 관급자재, 물품구매 및 지출

• 과적차량 단속

• 국지도, 지방도 설계 ․ 시공 및 감리

• 민자도로 건설공사 추진

• 지방도 포장도 유지 ․ 관리 및 도로대장 전산화

• 지방도 시설물(교량, 터널) 유지 ․ 관리

• 위험도로 선형개량사업 추진

• 의왕~과천 유료도로 및 자동차 전용도로 관리

• 건설공사 품질시험실 운영

• 공공 건축물 설계 ․ 시공 및 감리

• 준공 건축물 하자보수 및 유지관리

• 기계, 전기, 통신, 소방 공사 시공 ․ 감리 및 하자 관리

• 도 신청사 건립 추진

• 치수사업 종합계획 및 하천기본계획 수립

• 하천 시설물 유지 및 보수관리

• 하천 개수 및 보수 공사

• 하천 미불용지 보상 및 소송 수행

• 한강살리기사업 추진

도로건설과

건축시설과

하 천 과

관  리  과

도  로

61개 노선 2,845.6km (포장율 82%)-9개노선 중복

□ 국가지원지방도 : 11개 노선,     947km (포장율 79.6%)

□ 일 반 지 방 도 : 42개 노선,  1,742.1km (포장율 83.4%)

□ 위  임  국  도 :  8개 노선,    156.5km (포장율 100%)

- 漢水以南	:	43개 노선,	1,728.5km	(중복 9개 노선)
․국 지 도	:	10개 노선,	600.9km	(중복 5개노선)
․지 방 도	:	28개 노선,	1,088.7km	(중복 3개노선)
․위임국도	:	5개 노선,	38.9km	(중복 1개노선)
- 漢水以北	:	27개 노선,	1,117.1km	(중복 9개 노선)
․국 지 도	:	6개 노선,	346.1km	(중복 5개노선)
․지 방 도	:	17개 노선,	653.4km	(중복 3개노선)
․위임국도	:	4개 노선,	117.6km	(중복 1개노선)

구조물

417개소 (교량 397, 터널 17, 지하차도 1, 옹벽 2)

□ 국    도 :  20개소(교량 20개소)

□ 국 지 도 : 122개소(교량 118, 터널 2, 지하차도 1, 옹벽 1)

□ 지 방 도 : 275개소(교량 259, 터널 15, 옹벽 1)

※ 1종 : 22개소   ❍ 2종 : 56개소  ❍ 기타 : 339개소

•지방도․위임국도 : 390개소(교량377, 터널11, 지하차도1, 옹벽1)

•유료도로 :  27개소(교량 20 터널 6, 옹벽 1)

하  천

516개소 3,493㎞/요개수 4,619㎞, 기개수 3,052㎞

□ 국 가 하 천 : 16개소  480㎞/요개수 481㎞, 기개수 418㎞(개수율 86.9%)

□ 지 방 하 천 : 500개소 3,013㎞/요개수 4,138㎞, 기개수 2,634㎞(개수율 63.7%)

※ 소하천 : 2,170개소  3,252㎞

관리재산

대지 6필지 65,545㎡, 건물 6동 4,258㎡

□ 본    부 : 대지 5필지  9,218㎡, 건물 2동 2,754㎡

□ 의왕～과천 요금소 : 대지 1필지 56,327㎡, 건물 4동 1,504㎡

□ 건설장비․차량 : 굴삭기 등 41대 (건설기계 7, 차량 15, 제설장비 등 19)

4. 예산규모

----------------  4,191억원

'11 예산규모

(단위:백만원)

구 분		2011년	2010년	증감액	비고(%)
총 계		419,085	474,090	△55,005	△11.6
회계별	소 계	203,452	243,929	△40,477	△16.6
	일반회계	168,787	209,454	△40,667	△19.4
	특별회계	34,665	34,475	190	0.6
재배정	소 계	215,633	230,161	△14,528	△6.3
	도로건설	145,898	200,511	△54,613	△27.2
	공공건축	69,735	29,650	40,085	135.2

※ ´11년은 본예산 / ´10년은 최종예산 기준

회계별 현황

´11년 자체 예산

(단위:백만원)

회 계 별	계	정책사업	행정운영	재무활동	비 고
계	203,452	184,078	849	18,525
일반회계	168,787	167,938	849	-
특별회계	34,665	16,140	-	18,525

´11년 재배정 예산

(단위:백만원)

계	도로 건설	공공건축물 건립	비 고
215,633	145,898	69,735

Ⅱ. 2010년도 주요성과

□ 도로건설 ․ 유지관리로 도로교통 편익 도모

❍ 도로사업 공사기간 단축 및 조기 개통

- 제3경인 민간투자 고속화도로 개통(‘10. 8. 1)

․‘10. 5. 3 무료로 임시개통하여 3개월간 8,179천대 무료통행(82억 편익발생)

- 서수원～의왕간 민간투자 고속화도로 조기 개통

․경기영업소～학의JCT구간(L=3.2㎞) 2011. 1월 임시개통(2년 공기단축)

-  국지도 및 지방도 개통으로 이용자 편익 도모

․공사준공 : 용인시 고당～수산(‘10.4월), 이천시 무촌～궁평(’10.12월)

․부분개통 : 안성시 서운～안성간(‘11.1월)

※ 총연장 14.7km 중 남안성IC～모산교차로 5.6km 구간

□ 친환경 공공건축물 건립으로 도민 삶의 질 향상 도모

○ 신․재생 에너지 활용 및 에너지 절감 노력

- 서부(시흥) 노인전문병원

․태양열 난방 : 용량 46RT, 사업비 1.29억원

- 남부(평택) 노인전문병원

․태양광 발전 : 용량 42KW, 사업비 3.6억원

․에너지 절약형 LED 조명기기 설치 : 외부 가로등 전체

○ 이용자를 배려한 친환경 자재 도입 등

- 석유계 페인트 사용을 지양하고 친환경 천연페인트로 시범시공

(서부 노인전문병원 : 2,400㎡)

○ V․E 시행으로 기능향상 및 예산절감

- 기능향상 및 예산절감(1.19억원) 추진(남부 노인전문병원)

□ 자연과 조화를 이룬 체계적이고 종합적인 하천관리 추진

❍ 재해에 안전하고 환경 친화적인 하천정비 추진

- 농경지, 주택 등 수해위험지구 정비 : 63지구 236.36㎞

․준공 : 9지구 26.12km(양화천, 송곡천, 간매천, 걸은천, 안성천,

단천천, 화악천, 부용천, 중랑천)

․공사 및 보상 중 : 54지구 210.24km(안성천 등)

- 산책로, 생태습지 등 친수환경조성 : 15지구 60.56㎞

․준공 : 1지구 1km(청미천)

․공사 및 보상 중 : 14지구 59.56km(통복천 등)

❍ 용인 경안천□고향의 강□선도사업 추진

- 실시설계용역(‘10. 8. 12.~’11. 2. 7.)

- 지역의 고유한 정서와 역사가 담긴 추억의 고향의 강 조성

- 치수․이수에 안전하고 환경생태가 어우러진 하천 조성

❍ 하천의 체계적인 유지관리를 위한 하천기본계획 수립

- 2개 수계 및 14개 하천 73.11㎞ 재정비 용역 추진

- 24개 하천(181필지 245,429㎡) 폐천관리계획 수립ㆍ결정

Ⅲ.‘11년도 정책목표 및 과제

비전			정책목표			정 책 과 제
도민이만족하는건설인프라구축						▶ 지역간 연계강화를 위한 간선도로망 구축 ▶ 쾌적하고 안전한 도로기능 유지 ▶ 이용자 편의위주의 유료도로 관리
			효율적인 도로 건설 및 관리
						▶ 이용자를 배려하는 공공건축물 건립 ▶ 부실시공 방지를 위한 외부전문가 참여 확대 ▶ 신․재생 및 고효율에너지 건축물 추진
			이용자 중심의공공건축물 건립
						▶ 한강살리기 사업의 성공적 마무리 ▶“고향의 강”정비사업 본격 추진 ▶ 체계적인 하천관리를 위한 하천기본계획 재정비 ▶ 환경친화적인 하천정비
			하천의 체계적․ 종합적 정비 추진

Ⅳ.‘11년도 역점 추진사업

과제 1		효율적인 도로건설 및 관리

□ 지역간 연계강화를 위한 간선도로망 구축

□ 쾌적하고 안전한 도로기능 유지

□ 이용자 편의 위주의 유료도로 관리

1		지역간 연계강화를 위한 간선도로망 구축

◈ 선택과 집중 투자를 통한 공기단축 및 도로이용자 편익증진 도모

◈ 지역발전과 주민 편리성 제고를 통한 도민불편 해소

□ 사업개요

❍ 간선 도로망 구축 : 서운～안성 등 22건/113.9km, 사업비1,335억원

- 신도시 주변도로 :	용인 동탄～고매 등	6건/	23.3km,	사업비	266억원
- 수도권 교통정체해소 :	안성 서운～안성 등	4건/	27.9km,	사업비	396억원
- 기업하기 좋은 도로 :	화성 남양～구장(2) 등	5건/	19.8km,	사업비	320억원
- 관광지 주변도로 :	평택 안중～신왕 등	2건/	8.1km,	사업비	40억원
- 동서축 도로확충 :	이천 증포～모전 등	4건/	21.7km,	사업비	307억원
- 민간 투자사업:	수원 서수원～의왕	1건/	13.1km,	사업비	6억원

※ 미착공 : 16건(보상 14건, 설계완료 2건)

□‘10년 추진실적

❍ ‘10년 공사 추진 : 서운～안성 등 21건, 146.9km/1,637억원

⇒ 목표 공정율 50% 달성

※ ‘10년 준공 : 제3경인 고속화도로 등 3건, 46.6km, 217억원

❍ 제3경인 고속화도로 3개월 공기단축으로 ‘10. 5월 조기개통 및

서수원～의왕간 도로, 서운～안성간 도로 ‘11.1월 부분개통

□‘11년 추진계획

❍ 서수원～의왕간 상습정체구간(경기영업소～학의JCT) 완전 개통

❍ 국지도 및 지방도 준공 및 조기 착공으로 이용자 편익 도모

- 김포 송포～인천간 도로(L=3.4km) 준공 및 양평 용문～단월간 도로 등 3건 착공

❍ 공사중인 22개 사업에 집중예산 투입으로 계획 공정율 달성

- 서운～안성 등 22건, 113.9km/1,335억원, 평균 계획 공정율 60%

2		쾌적하고 안전한 도로기능 유지

◈ 도로기능 관리․강화 및 위험도로 개선을 통한 쾌적하고 안전한 도로유지

◈ 도로구조물(교량, 터널 등) 안전점검 및 보수공사 실시로 교통안전사고 예방

1. 지방도 유지 및 개선

□ 사 업 개 요

❍ 포장도 유지관리 : 76억원

- 포장도보수공사 : 9개 시‧군 21억원

- 차선도색공사   : 9개 시‧군 30억원

- 도로시설물 정비공사 : 9개 시‧군 10억원

- 상시보수공사   : 25개소, 15억원

❍ 위험도로 개선 : 7개소, 8.43km, 29억원

- 국가지원 사업(5개소)--------- 5.51km, 29억원

- 도비추진 사업(2개소)--------- 2.92km

□‘10년 추진실적

❍ 체계적이고 효율적인 지방도 유지관리로 도로이용자 편의 도모

- 지방도 유지관리 공사추진 : 85억원

❍ 위험도로 개선사업을 통한 교통사고 위험요인 해소

- 계속사업 : 안성 신령리 등 3개소,  3.2km, 23억원

- 공사착공 : 양평 석곡리, 1.35km, 22억원

□‘11년 추진계획

❍ 지방도 유지관리의 단가계약 확대 및 신속한 집행

❍ 위임국도 L=38.9km 구간 포장도 유지관리 추진(국비 100%)

❍ 위험도로 조기 개선으로 교통사고 사전예방

- 공사완료 : 김포 개곡리 등 3개소, 3.2km, 3억원

․안성 신령리(L=1.1km, `11.6월), 김포 개곡리(L=1.76km, `11.4월)

양평 전수리(L=0.34km, `11.6월)

- 공사추진 : 양평 석곡리 1.35km, 3.7억원

- 공사착공 : 양평 그루고개 1.14km, 22.6억원

- 설계완료 : 양평 야밀고개 등 2개소, 2.74km

2. 구조물 유지관리

□ 사업대상 : 지방도 370개소

❍ 교 량 : 357개소 21,802m ❍ 터 널 : 11개소 6,451m	❍ 지하차도 : 1개소 235m ❍ 옹 벽 : 1개소 133m

※ 위임국도 20개소(교량, 1,361m)는 ‘10.1월부터 전액 국비지원 별도추진

※ 등급별 현황(위임국도 포함) : 390개소(1종 16개소, 2종 50개소, 기타 324개소)

□‘10년 추진실적

❍ 교량 및 터널 안전점검 실시 : 351개소(1～2회실시) 6.8억원

❍ 교량 및 터널 등 구조물 부분(긴급)보수 : 48개소 35.5억원

❍ 문수산 터널 위탁관리 : 5.5억원

❍ 구양수대교 재가설공사 추진 : 67억원

- 교각기초(우물통P1～P5) 및 교대기초완료, 강교제작 추진

□‘11년 추진계획

❍ 정기점검(교량, 터널) 등 구조물 : 370개소, 4억원

❍ 정밀점검 및 정밀안전진단(교량, 터널) : 35개소, 7억원

❍ 구조물(교량, 터널) 보수 : 25.2억원

❍ 문수산 터널 위탁관리 : 5.5억원

❍ 구 양수대교 재가설공사 추진 : 60억원

※ 총사업비 840억원(2011년까지 투자 225억원  향후투자 615억원)

3. 과적차량 단속

□ 단속대상

❍ 단속기준 : 축하중 10톤, 총중량 40톤, 폭2.5m 높이 4.0m,

길이 16.7m이상(연결․굴절차 19m) 초과차량

❍ 노    선 : 43개 노선(위임국도 5, 국지도 10, 지방도 28)

※ 시․군은 시․군 자체 단속 및 도와 합동단속 실시(민원다수 발생지역)

□ 과적 단속인력 및 장비보유 현황

(단위 : 명)

과적단속 인력(명)				단속장비		비고
계	일반	기능	무기 계약직	이동식 축중기	단속 차량
16	2	8	6	16개	2대	고정단속장소 - 의왕～과천 1 - 제3경인 3 - 일산대교 1

□‘10년 추진실적

(단위 : 건수)

구 분	2010년		비 고 (적발율,%)
	검 차	적 발
계	170,269	358
의왕 검문소	163,812	93	0.6%
이 동 단 속	6,457	265	41%

❍ 과적근원지에 대한 현장방문 계도, 과적차량 사전예방

❍ 과적민원 신고지역 집중단속(여주 남한강 일대, 제3경인고속도로 등)

□‘11년 추진계획

❍ 민원발생 지역에 대한 특별 기동단속 실시(분기별 야간단속 병행)

❍ 과적위반 근절을 위한 지속적인 홍보로 과적위반 예방

3		이용자 편의위주의 유료도로 관리

◈ 의왕～과천 유료도로의 효율적인 유지관리로 쾌적한 도로환경 조성

◈ 유료도로의 적기 유지보수로 주행 안전성 확보 및 교통안전사고 예방

□ 사업개요

❍ 위    치 : 의왕시 고천동～과천시 문원동(지309호선)

❍ 연    장 : L=10.85km (B=24m, 편도 2～4차선)

❍ 시 설 물 : IC 4개소, 교량 20개소, 터널 6개소, 요금소 1개소

❍ 사업내용 : 유료도로 유지관리

- 유료도로 관리 민간위탁, 유료도로 유지보수

□‘10년 추진실적

❍ 유료도로 관리 민간위탁 시행으로 효율적인 도로 및 시설물 유지관리

- 민간위탁 기관 : 경기개발공사

❍ 명절 연휴기간 통행료 면제를 통한 도로이용객 편의 도모

- 설 명절(‘10. 2. 13 ～ 2. 15), 추석 명절(’10. 9. 21～9. 23)

❍ 장애인등 감면차량 하이패스시스템 도입으로 이용자 편의 도모

□‘11년 추진계획

❍ 유료도로의 효율적인 유지관리를 위해 민간위탁 시행

- 위탁업무 : 통행료 징수, 도로청소, 제설작업, 도로순찰 및 시설물 관리 등

❍ 도로 및 부속 시설물의 적기 유지보수로 쾌적한 도로환경 조성

- 시설물 안전점검 및 유지보수, 포장도 유지보수, 조명시설 개선 등

❍ 주요 IC주변 및 취약지역에 제설 방제시스템 설치

- IC, 터널 및 취약지역 등 38개소

과제 2		이용자 중심의 공공건축물 건립

□ 이용자를 배려하는 공공건축물 건립

□ 부실시공 방지를 위한 외부전문가 참여 확대

□ 신․재생 및 고효율에너지 건축물 추진

1		이용자를 배려하는 공공건축물 건립

이용자를 배려한 편리하고 안전한 공간구성과 세심한 관리를 통하여 견실한 건축물 건립

□ 사업개요

❍ 계속사업(4개소)

- 남부(평택) 노인전문병원 (지상4층,    연면적  7,131㎡, 사업비 149억원)

- 친환경 농산물유통센터  (지하1/지상2, 연면적 25,351㎡, 사업비 480억원)

- 바다향기 수목원        (지상 2층,   연면적  3,963㎡, 사업비 400억원)

- 경기도 신청사 건립

❍ 신규 예정사업(5개소)

- 경기도 민방위 체험교육장(지상2층,      연면적   990㎡)

- 경기도 종합사격장       (지상1층,      연면적  1,059㎡)

- 광명 소방서             (지하1/지상3층, 연면적  4,823㎡)

- 가평 119안전센터        (지상2층,      연면적   762㎡)

- 포천 소흘 119안전센터   (지상2층,      연면적   760㎡)

□‘10년 추진실적

❍ 공사 추진 진척율

- 남부(평택) 노인전문병원 : 77%

※ 외장공사(조적, 창호공사) 완료 등

- 바다향기 수목원 : 2%

※ 가설 방음벽․울타리 설치완료 등

❍ 설계추진 진척율

- 친환경 농산물유통센터 : 기본설계 완료(100%)

□‘11년 추진계획

❍ 계속사업 : 4개소

- 남부(평택) 노인전문병원      :  ’11. 5월 완공

- 바다향기 수목원              :  공정율 16%

- 친환경 농산물유통센터        :  공정율 10%

- 경기도 신청사 건립

❍ 신규 예정사업 : 5개소

- 경기도 민방위 체험교육장     :  ’12.  6월 완공

- 경기도 종합사격장            :  ’11.  7월 완공

- 광명 소방서                  :  ’12.  6월 완공

- 가평 119안전센터             :  ’11. 12월 완공

- 포천 소흘 119안전센터        :  ’11. 12월 완공

2		부실시공 방지를 위한 외부전문가 참여 확대

외부전문가의 참여 확대를 통한 분야별․공종별 입체적 평가실시로 부실시공 사전 방지

□ 사업개요

❍ 단계별 시공평가 : 100억원 이상,  5,000㎡ 이상

- 대    상 : 기초공사, 골조공사, 마감공사로 구분 실시

❍ 시기별 품질검사 : 공사중인 사업 전체

- 대    상 : 공정 50%, 준공 1개월전

❍ 시공평가단 및 품질검사단 구성

- 설계자문위원(건설본부 운영)

- 건설기술심의위원(기술심사담당관 운영)

□‘10년 추진실적

❍ 품질검사단 합동점검 : 2회

- 서부(시흥) 노인전문병원(1회) : 준공 1개월전

- 남부(평택) 노인전문병원(1회) : 공정 50%

□‘11년 추진계획

❍ 단계별 시공평가 : 2회

- 마감공사 완료시 : 남부(평택) 노인전문병원

- 기초공사 완료시 : 친환경 농산물유통센터

❍ 시기별 품질검사(예정) : 4회(공정 50%  2회, 준공 1개월전  2회)

- 공정 50%     : 광명 소방서, 경기도 민방위 체험교육장

- 준공 1개월전 : 가평 119안전센터, 포천 소흘 119안전센터

3		신․재생 및 고효율에너지 건축물 추진

신･재생에너지(태양광, 태양열, 지열 등) 및 LED조명 등 고효율에너지

기자재 사용으로 에너지절약 도모

□ 사업개요

❍ 근   거

- 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법 제12조

- 공공기관 에너지이용합리화 추진지침 제18조

□ 추진방향

❍ 신․재생에너지 설비 설치 및 다양화

∙ 태양광, 태양열 → 태양광, 태양열, 지열 등

❍ 에너지절약형 LED조명 설치 확대 추진

∙옥외보안등에 국한  → 복도, 화장실, 등 점진적 확대

□‘10년 추진실적

❍ 서부(시흥) 노인전문병원

- 태양열 난방 : 용량 46RT), 사업비 1.29억원

RT(Ton Of Refrigeration) : 냉동톤이라고 하며, 1RT는 약 3.6～3.8kw에 해당함

- 태양광 발전 : 용량 17.6KW, 사업비 1.39억원

❍ 남부(평택) 노인전문병원

- 태양광 발전 : 용량 42KW, 사업비 3.6억원

- 에너지 절약형 LED 조명기기 설치 : 옥외보안등 전체

□‘11년 추진계획

○ 친환경농산물유통센터, 광명 소방서 등 신규사업에 신재생에너지 및 LED조명기기 점진적 확대 설치

과제 3		하천의 체계적․종합적 정비 추진

□ 한강살리기 사업의 성공적 마무리

□ “고향의 강” 정비사업 본격 추진

□ 체계적인 하천관리를 위한 하천기본계획 재정비

□ 환경친화적인 하천정비

1		한강살리기 사업의 성공적인 마무리

◈ 홍수와 가뭄, 물 문제 근원적 해결과 강 중심 국토 재창조

□ 사업개요

❍ 사업범위 : 남한강 및 북한강 일원(팔당댐 상류)

❍ 사업기간 : ’09. 10. 27. ～ ’11. 12. 31.

(‘11. 2. 7일 현재)

구 분	공 구	구 간	연장 (km)	사업비 (억원)	주요사업내용	공정 (%)	착공일	시행청
계	7공구		117.2	13,859		57
남한강	1공구	팔당댐～양평대교 (광주, 남양주, 양평)	24.6	634	□ 하천개수 12.13㎞ □ 생태하천 20.68㎞ 등	41	‘10. 4.13	경기도
	2공구	양근대교～이포보 (양평, 여주)	11.3	788	□ 하천개수 8.37㎞ □ 생태하천 6.97㎞ 등	54	‘09.12.21	경기도
	3공구	이포보～백석리섬 (여주)	9.0	3,628	□ 이포보, 소수력발전 1,000㎾×3 □ 여주저류지 1개소 1.85㎢ 등	59 (70)	‘09.10.27	서울청
	4공구	백석리섬～여주보 (여주)	3.7	2,945	□ 여주보, 소수력발전1,650㎾×3 □ 하도정비 1,382만㎥ 등	58 (73)	‘09.10.27	서울청
	5공구	여주보～여주대교 (여주)	3.6	913	□ 하도정비 524만㎥ □ 생태하천 5.58㎞ 등	62	‘09.12.21	경기도
	6공구	여주대교～섬강 (여주)	17.5	2,699	□ 강천보, 소수력발전 1,665㎾×3 □ 하도정비 1,430만㎥	60 (65)	‘09.10.27	수 공
북한강	9공구	남양주～가평 자라섬 (남양주, 가평)	47.5	781	□ 생태하천 28.1㎞ □ 관리용도로 17.9㎞	37	‘09.11.18	서울청
소수력발전		이포․여주․강천보		675				수 공
계속사업		여주제 등 5개소		796				서울청

※ (   )는 보 설치 공정률임

□‘10년 추진실적

❍ ’10. 2. 5  : 일반공사 1단계(2․5공구) 2차분 착공

❍ ’10. 4. 13 : 일반공사 2단계(1공구) 공사 착공

❍ ’10년 말  : 道 시행분 목표공정 45%(준설 등 주요공정 60% 완료)

□‘11년 추진계획

❍ 도민의 자발적 참여가 가능하도록 ‘참여의 場’ 마련

- ‘희망의 숲’ 조성(수목식재, 4월), ‘희망의 벽’ 조성(타일부착, 9월)

❍ ’11년 준공에 차질이 없도록 공정 관리 강화

- 보, 준설, 조경 등  주요공정 상반기(우기 前) 완료

❍ 지자체 시행분(편의․체육시설 등) 병행 추진으로 시너지 효과 제고

2		“고향의 강”정비사업 본격 추진

◈ 하천의 치수․이수․생태 기능 증진과 지역의 역사․문화와 연계된   하천정비

◈ “고향의 강”에서 느껴지는 감성적 이미지를 하천에 접목 스토리텔링으로 재탄생된 “지역명물(Water Landmark)” 조성

□ 사업개요

❍ 대상사업 : 경안천 등 25개 사업

- 단기 : 용인 경안천 등 11개, 중기 : 성남 탄천 등 5개, 장기 : 의정부 중랑천 등 9개

❍ 사업량 : 하천연장 L = 109.2km

- 주제공원조성, 축제 및 호안, 자전거도로, 관찰테크, 자연학습장 등

❍ 사업비 : 436,536백만원(국비60%, 도비40%)

- 2011년 예산 : 8,000백만원(국비 4,800, 도비 3,200)

□ 추진실적

❍ ‘10.2.11. : 대상사업 선정 제출(도→국토부)

❍ ‘10.4.12. : 선도사업 추진계획 방침결정(국토부)

❍ ‘10.4.14. : 선도사업 대상지 결정 및 통보(국토부→도)

※ 전국 15개소 선도사업 결정(경기도 : 경안천)

❍ ‘10.5.27. : 국고보조금 재배정(국토부→도)

❍ ‘10.8.12. : 실시설계용역 착수(경안천)(용역기간 ‘10.8. ～ ‘11.2.)

□‘11년 추진계획

❍ ‘11.2. : “경안천 고향의 강 사업” 실시설계 용역 완료

❍ ‘11.4. : 안산천 등 10개 하천 실시설계 용역 착수

- 스토리텔링을 통한 지역의 역사문화가 담긴 실시설계용역 추진

※안산(안산천), 동두천(신천), 연천(차탄천), 안성(안성천), 가평(조종천),

양주(회암천), 이천(청미천), 고양(공릉천), 광주(직리천), 남양주(왕숙천)

❍ ‘11.8. : “경안천 고향의 강 사업” 공사 착수

3		체계적인 하천관리를 위한 하천기본계획 재정비

◈ 국토계획상 하천유역 변동상황을 고려한 10년 단위 및 여건변동 등에 따른 수시 하천기본계획 (변경)수립으로 체계적이고 양호한 하천유지관리를 위한 효율적인 하천관리체계 구축

□ 사업개요

❍ 하천기본계획 수립

- 500개(연장 3,013㎞)중 접경지역 6개 하천을 제외한 494개소(2,968㎞) 완료

※ 접경지역 6개 하천 : 사천(파주), 고잔천, 마거천, 적거천, 중사천, 흑석천(연천)

‘10년 하천기본계획 재정비율 90%(447개)		‘11년 하천기본계획 재정비율 92%(453개)

□‘10년 추진실적

❍ 하천기본계획 재정비 완료(14개 하천/73.11㎞)

- 여주(9개) : 38.38㎞(용담천, 계장천, 신내천, 금사천, 상호천, 소유천, 향리천, 주어천, 세월천)

- 양평(5개) : 34.73㎞(항금천, 영동천, 가정천, 문호천, 서호천)

❍ 하천구역 및 하천기본계획 (변경)결정 : 26개 하천, 121.8㎞

□‘11년 추진계획

❍ 석곡천 등 6개 하천 기본계획 재정비 추진

- 74.59㎞ 3,300백만원,  여주(1) / 양평(4) /포천ㆍ연천(1)

❍ 하천구역내 효율적인 토지관리를 위한 폐천관리계획 수립․결정

※ 19개 하천 453필지 619,289㎡

4		환경친화적인 하천정비

◈ 하천의 치수, 이수, 환경을 고려한 자연친화적 생태하천 조성으로 수해 피해예방 및 도민들이 이용하기 편한 친수공간 조성

□ 사업개요

❍ 지방하천 : 65개 지구 237.58km 1,135억원(국비564, 도비571)

❍ 소 하 천 : 23개 지구 14.62km 452억원(국비 226, 시군비 226)

구 분	도 직접			시․군 보조			비 고
	지구수	사업량(㎞)	사업비 (억원)	지구수	사업량(㎞)	사업비 (억원)
계	15	64.1	380	73	188.1	1,207
지방하천 정비사업	15	64.1	380	50	173.48	755
소하천 정비사업	-	-	-	23	14.62	452

□‘10년 추진실적

❍ 지방하천 정비 : 78개 지구 공사 및 보상 추진 중

- 준공지구 : 양화천, 송곡천, 간매천, 걸은천, 안성천, 청미천, 단천천, 화악천, 부용천, 중랑천(10개소)

- 계속지구(안성천 등 52개 지구) : 보상(12) 및 공사진행 중(40)

- 신규지구(서호천 등 16개 지구) : 실시설계용역(12) 및 공사발주 준비(4)

❍ 소하천 정비 : 30개 지구 사업완료 / 3개 지구 공사 진행 중

□‘11년 추진계획

❍ 계속지구중 3개지구(11.94㎞) 공기단축으로 상반기 완공 추진

❍ 공사중인 현장은 우기 전까지 축제, 호안 등 주요공정 완료 추진

Ⅴ. 간부공무원 명단

직 위	직 급	성 명	비 고
본부장	지방부이사관	이 의 재
관 리 과 장	지방서기관	조 광 오
기획조정팀장	지방행정사무관	김 종 근
계약관리팀장	지방행정사무관	최 영 준
과적단속팀장	지방행정사무관	강 도 영
도로건설과장	지방기술서기관	손 성 오
간선도로팀장	지방시설사무관	김 정 기
지방도로팀장	지방시설사무관	차 동 길
도로시설팀장	지방시설주사	윤 석 태
도로환경개선팀장	지방시설사무관	이 정 석
도로운영팀장	지방시설사무관	김 원 담
건축시설과장	지방기술서기관	김 태 용
건축 1 팀 장	지방시설사무관	장 태 호
건축 2 팀 장	지방시설사무관	강 신 호
건축설비팀장	지방공업사무관	정 성 연
행정타운팀장	지방행정사무관	문 영 근
하 천 과 장	지방기술서기관	김 세 중
하천행정팀장	지방행정사무관	이 창 순
하천계획팀장	지방시설사무관	이 범 기
하천관리팀장	지방시설주사	김 응 태
하천시설팀장	지방시설사무관	이 귀 웅
강변살자팀장	지방시설사무관	서 금 석