2015년 주요 업무보고

경기도 건설본부

			목 차

Ⅰ. 일 반 현 황	3

1. 기구 및 인력	3

2. 주요기능	4

3. 예산규모	5

Ⅱ. 2014년 주요업무 성과	6

Ⅲ. 주요업무 추진계획	7

1. SOC의 견실시공 및 안전한 도로관리	8

2. 이용자 중심의 공공건축물 건립	18

3. 사람 중심, 도민과 호흡하는 혁신 청사 건립	22

Ⅰ. 일 반 현 황

1. 기구 및 인력

□ 기구 : 4과 1추진단 18팀

건 설 본 부
관 리 과			도로건설과			북부도로과			건축시설과			신청사건립 추 진 단
총무팀			간선도로팀			도로행정팀			건축1팀			행정팀
계약관리팀			지방도로팀			도로관리팀			건축2팀			건축팀
과적단속팀			도로시설팀			도로시설1팀			건축설비팀			재원팀
			도로환경개선팀			도로시설2팀
			품질시험팀

□ 인력 : 정원 114명 / 현원 111명

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	114/111	1/1	5/5	19/19	29/26	43/41	17/18	0/1
관 리 과	28/26	1/1	1/1	4/3	8/5	10/11	4/5	-
도로건설과	32/31	-	1/1	5/5	7/7	14/12	5/6	-
북부도로과	26/26	-	1/1	4/5	4/4	10/10	7/5	0/1
건축시설과	14/13	-	1/1	3/3	5/3	5/5	0/1	-
신청사건립추진단	14/15	-	1/1	3/3	5/7	4/3	1/1	-

※ 결원 : 3명 (관리과2, 도로건설과1)

2. 주요 기능

관

리

과

○ 건설본부 행정의 종합 기획․조정

○ 예산, 인력, 청사 등 관리

○ 공사·용역 계약, 관급자재, 물품구매 및 지출

○ 운행제한 위반차량 단속 및 과태료 부과

도

로

건

설

과

○ 남부지역 국지도, 지방도, 민자도로 설계․시공 및 감리

○ 남부지역 지방도 유지․관리

○ 남부지역 지방도 시설물 유지․관리

○ 건설공사 품질시험

북

부

도

로

과

○ 북부지역 국지도, 지방도, 민자도로 설계․시공 및 감리

○ 북부지역 지방도 유지․관리

○ 북부지역 지방도 시설물 유지․관리

건

축

시

설

과

○ 공공건축물 설계·시공 및 감리

○ 기계․전기․통신․소방 공사 설계·시공 및 감리

○ 준공 건축물 하자보수 및 유지관리

신

청

사

건

립

추

진

단

○ 신청사 건립 및 현청사 활용 계획 수립

○ 신청사 설계 용역 및 공사시공 ･ 감리용역

○ 신청사 건립 재원 마련 및 공유재산 매각 추진 지원

3. 예산 규모

□ 2015년 부서별 예산 현황

부 서 별	계	정책사업	행 정 운영경비	비고
계	37,525	36,157	1,368
관 리 과	1,103	406	697
도로건설과	16,535	16,385	150
북부도로과	10,237	9,856	381
건축시설과	4,571	4,505	66
신청사건립추진단	5,079	5,005	74

(단위 : 백만원)

□ 주요 투자사업

❍ 지방도 유지관리(도로건설과, 북부도로과)	:	13,740백만원
❍ 구조물 유지관리(도로건설과, 북부도로과)	:	9,995백만원
❍ 도 신청사 건립사업 추진(신청사건립추진단)	:	5,005백만원
❍ 삼막천 유지용수 공급사업(건축시설과)	:	4,500백만원
❍ 군 훈련도로 정비(북부도로과)	:	500백만원
❍ 도로대장 전산화(도로건설과)	:	300백만원
❍ 위험도로 개량(북부도로과)	:	200백만원

Ⅱ. 2014년 주요업무 성과

□ SOC의 견실시공 및 안전한 도로관리

❍ 선택과 집중을 통한 마무리사업 조기개통 : 9개소 L=25.81㎞

∙ 사업완료 : 4개소 L=16.78㎞

- 남부 : 2개소 L=4.58㎞ (송포∼인천 3.38㎞, 누산∼운양 1.20㎞)

- 북부 : 2개소 L=12.20㎞ (법원～상수 10.06㎞, 장남교 재가설 2.14㎞)

∙ 우선개통 : 5개소 L=9.03㎞

- 남부 : 2개소 L=4.03㎞ (용인～남사2 2.83㎞, 진위～남사 1.20㎞)

- 북부 : 3개소 L=5.00㎞ (조리～법원 3.0㎞, 운천～탄동 1.50㎞, 금촌∼월롱 0.5㎞)

❍ 도로기능 강화 및 유지·개선을 통한 안전한 도로관리

∙ 쾌적한 도로서비스 제공을 위한 지방도 유지관리 : 15개 시‧군

∙ 위험도로 구조개선 : 9개소(7.12㎞) 추진(안성 금광리 0.92㎞ `14. 7월 준공)

∙ 대형안전사고 예방을 위한 구조물유지관리 : 양평대교 등 668개소

□ 이용자 중심의 공공건축물 건립

❍ 이용자 중심의 공공 건축물 건립 추진

∙ 이천병원 지역응급의료센터, 파주병원 기숙사/탁아시설, 풍산119안전센터 등 6개소 준공

∙ 소방학교 종합훈련장, 도청·북부청 어린이집, 선인장 연구온실 등 4개소 사업 추진 중

❍ 신․재생 및 고효율에너지 건축물 추진

∙ 7개소에 LED등 1,043개 설치(LED등 설치비율 56.4%)

∙ 파주병원 기숙사 및 탁아시설에 신․재생에너지(태양광) 설치(17.5kw)

❍ 공사 단계별 외부전문가 참여로 시공 완결성 제고

∙ 11개 건축물에 대한 품질검사(8회), 시공검수(4회), 품질검수(2회) 실시

□ 사람 중심, 도민과 호흡하는 혁신청사 건립

❍ 신청사 건립 중앙투･융자심사 승인(’14.10.28, 안행부)

❍ 소통‧혁신 공간창조를 위한 설계용역 검토보고(‘14.11.27, 도지사)

❍ 놀라운 경기도청 마스터플랜 착수보고회(‘14.12.5.)

❍ 기본 및 실시설계 용역 일시정지 해제(‘14.12.15. 감리용역 12.22.)

❍ 기본설계(안) 경기도 건설기술심의위원회 심의(‘14.12.18.)

Ⅲ. 주요업무 추진계획

□	SOC의 견실시공 및 안전한 도로관리 9
□	이용자 중심의 공공건축물 건립 19
□	사람 중심, 도민과 호흡하는 혁신청사 건립 25

□ SOC의 견실시공 및 안전한 도로관리

3     도민이 신뢰하는 안전하고 견실한 지방도건설

❍

3     도로 구조물 내구성 및 안정성 확보

❍

3     안전한 도로환경 조성

❍

3     설계변경 체계 개선

❍

3     운행제한 위반차량 단속

❍

1		도민이 신뢰하는 안전하고 견실한 지방도건설

◈ 선택과 집중 투자를 통한 공기단축으로 장기계속공사 조기개통

◈ 경기북부 균형발전과 주민 편리성 제고를 위한 지방도건설 추진

□ 사업개요

❍ 간선도로망 구축     : 동탄-기흥(2) 등 56건 / 326.74㎞  2,962억원

- 신도시 주변도로      : 동탄-기흥(2) 등 5건   /  31.02㎞    386억원

- 수도권 교통정체 해소 : 본오-오목천(2) 등 5건 /  27.35㎞    889억원

- 기업하기 좋은 도로   : 남양-구장(2) 등 8건   /  35.67㎞    420억원

- 관광지 주변도로      : 안중-신왕 등  2건    /  12.24㎞     35억원

- 동서축 도로확충      : 여주-가남 등  7건    /  55.05㎞    741억원

- 접경지역 도로확충    : 설마-구읍 등  4건    /  33.39㎞    360억원

- 설계 및 보상추진     : 불현-신장 등 25건    / 132.02㎞    131억원

□ 전년도 추진실적

❍ 지방도 확포장공사 법원~상수 등 9개 사업 25.8㎞ 준공 및 우선개통

- 준공(4개) : 송포~인천, 누산~운양, 법원~상수, 장남교재가설

- 우선개통(5개) : 용인~남사, 진위~남사, 조리~법원, 운천~탄동, 금촌~월롱

사업준공(송포∼인천)		사업준공(법원∼상수)		우선개통(운천∼탄동)

□‘15년도 추진계획

❍ 현장종사자 안전의식 강화 및 비상대응 매뉴얼 정비․훈련강화

- 사전대응 모의훈련 강화(2회/년), 안전의식 교육 실시

❍ 마무리사업 적기준공 및 우선개통 추진 : 9개사업 33.9㎞

- 본오~오목천(2) 등 7개사업 26.9㎞ 준공

- 조리∼법원(13.7㎞중 4.3㎞), 정왕IC개선(2.7㎞중 2.7㎞) 우선개통

❍ 경기북부 균형발전을 위한 5대 핵심노선 집중추진

- 국지도 98호선 오남~수동 등 5개사업 39.8㎞

❍ 일자리 창출을 위한「안전 지킴이」시범사업 추진

- 전직 건설현장 등 안전분야 종사자, 연륜과 경험 풍부자 참여

❍ 건설국과 협조하여 효율적인 지방도사업 추진

2015년도 지방도사업 추진 계획

(단위 : 백만원)

사업명			노선명	사업량(㎞)	총사업비	연도별 투자계획			비고
						기투자	2015	향후
계	합 계(56개소)			326.74	5,067,730	1,753,291	296,216	3,018,223
		남부(34개소)		190.49	2,697,481	1,053,310	163,567	1,480,604
		북부(22개소)		136.25	2,370,249	699,981	132,649	1,537,619
	사업준공(7개소)			26.89	599,020	528,056	59,563	11,401
		남부( 5개소)		17.49	356,796	319,754	33,869	3,173
		북부( 2개소)		9.40	242,224	208,302	25,694	8,228
	계속공사(19개소)			138.19	2,247,014	1,074,469	201,553
		남부(15개소)		97.44	1,479,480	670,238	119,498	689,744
		북부( 4개소)		40.75	767,534	404,231	82,055	281,248
	신규공사( 5개소)			29.64	430,103	21,857	22,000	386,246
		남부( 2개소)		9.20	63,700	1,113	3,300	59,287
		북부( 3개소)		20.44	366,403	20,744	18,700	326,959
	설계 및 보상(25개소)			132.02	1,791,593	128,909	13,100	1,649,584
		남부(12개소)		66.36	797,505	62,205	6,900	728,400
		북부(13개소)		65.66	994,088	66,704	6,200	921,184
신도시 주변 도로확충(5개소)				31.02	514,373	293,409	38,604	182,360
	남부(도로건설과)		5개소	31.02	514,373	293,409	38,604	182,360
수도권 교통정체 해소 도로확충(5개소)				27.35	626,763	263,255	88,913	274,595
	남부(도로건설과)		3개소	14.30	322,219	156,703	65,869	99,647
	북부(북부도로과)		2개소	13.05	304,544	106,552	23,044	174,948
기업하기 좋은 도로확충(8개소)				35.67	628,364	410,459	42,044	175,861
	남부(도로건설과)		6개소	25.22	436,884	304,165	29,694	103,025
	북부(북부도로과)		2개소	10.45	191,480	106,294	12,350	72,836
관광지 주변 도로확충(2개소)				12.24	81,810	38,409	3,500	39,901
	남부(도로건설과)		2개소	12.24	81,810	38,409	3,500	39,901
동서축 도로확충(7개소)				55.05	832,044	367,560	74,055	390,429
	남부(도로건설과)		6개소	41.35	544,693	198,419	19,000	327,274
	북부(북부도로과)		1개소	13.70	287,351	169,141	55,055	63,155
접경지역 도로확충(4개소)				33.39	592,786	251,290	36,000	305,496
	북부(북부도로과)		4개소	33.39	592,786	251,290	36,000	305,496
설계 및 보상 추진사업(25개소)				132.02	1,791,593	128,909	13,100	1,649,584
	남부(도로건설과)		12개소	66.36	797,505	62,205	6,900	728,400
	북부(북부도로과)		13개소	65.66	994,088	66,704	6,200	921,184

2015년도 지방도사업 세부 추진계획(남부지역)

(단위 : 백만원)

사업명		노선명	사업량(㎞)	사업기간	총사업비	연도별 투자계획			비고
						기투자	2015	향후
계	합 계(34개소)		190.49		2,697,481	1,053,310	163,567	1,480,604
	사업준공( 5개소)		17.49		356,796	319,754	33,869	3,173
	계속공사(15개소)		97.44		1,479,480	670,238	119,498	689,744
	신규공사( 2개소)		9.20		63,700	1,113	3,300	59,287
	설계 및 보상(12개소)		66.36		797,505	62,205	6,900	728,400
신도시 주변 도로확충(5개소)			31.02		514,373	293,409	38,604	182,360	-
1	동탄~기흥(2)	국23호선	3.46	‘03~’15	143,409	143,409	-	-	준공
2	진위~남사	지314호선	4.90	‘09~’16	48,120	32,373	6,000	9,747	계속
3	용인~남사(2)	지321호선	7.38	‘09~’16	97,515	67,884	12,600	17,031	계속
4	초지대교~인천	국84호선	7.88	‘13~’20	164,029	48,730	19,004	96,295	계속
5	갈천~가수	국82호선	7.40	‘15~’20	61,300	1,013	1,000	59,287	신규
수도권 교통정체 해소 도로확충(3개소)			14.30		322,219	156,703	65,869	99,647
1	본오~오목천(2)	국98호선	5.40	‘09~’15	77,238	55,869	21,369	-	준공
2	오포~포곡(2)	국57호선	6.20	‘11~’17	191,181	83,304	21,500	86,377	계속
3	제3경인정왕IC개선	지330호선	2.70	‘13~’15	53,800	17,530	23,000	13,270	계속
기업하기 좋은 도로확충(6개소)			25.22		436,884	304,165	29,694	103,025
1	남양~구장(2)	지318호선	4.88	‘09~’15	67,000	43,833	2,000	21,167	계속
2	오산~남사	지310호선	5.26	‘05~’16	89,901	76,304	8,000	5,597	계속
3	청북~고덕	지302호선	2.72	‘04~’16	115,000	81,884	5,194	27,922	계속
4	삼계~구문천	지309호선	3.50	‘10~’15	22,172	17,177	4,995	-	준공
5	정남~안녕	지315호선	4.03	‘09~’15	58,905	51,400	7,505	-	준공
6	안중~조암(1)	지313호선	4.83	‘15~’18	83,906	33,567	2,000	48,339	계속
관광지 주변 도로확충(2개소)			12.24		81,810	38,409	3,500	39,901
1	안중~신왕	지313호선	6.20	‘10~’15	30,310	20,609	1,500	8,201	계속
2	일죽~대포(1)	지329호선	6.04	‘15~’18	51,500	17,800	2,000	31,700	계속
동서축 도로확충(6개소)			41.35		544,693	198,419	19,000	327,274
1	여주~가남	지333호선	13.18	‘09~’16	149,000	104,876	6,000	38,124	계속
2	구양수대교	지352호선	1.10	‘09~’15	55,072	51,899	-	3,173	준공
3	용문~단월	지314호선	5.13	‘11~’16	28,800	14,986	1,500	12,314	계속
4	마산~산하	지306호선	1.80	‘15~’16	2,400	100	2,300	-	신규
5	이천~흥천	국70호선	16.03	‘14~’18	225,077	24,576	5,500	195,001	계속
6	실촌~만선	국84호선	4.11	‘14~’19	84,344	1,982	3,700	78,662	계속
설계 및 보상 추진사업(12개소)			66.36	-	797,505	62,205	6,900	728,400
1	고삼~삼죽	지306호선	7.15	-	47,300	4,940		42,360	보상
2	공도~양성	지321호선	6.00	-	48,000	7,600	2,000	38,400	보상
3	용인~포곡	국57호선	9.10	-	291,000	3,000		288,000	보상
4	불현~신장	지325호선	6.22	-	41,000	13,700	1,500	25,800	설계,보상
5	일죽~도계	지318호선	8.40	-	94,000	10,700	-	83,300	보상
6	이화~삼계(2)	지302호선	6.21	-	81,500	5,940	-	75,560	보상
7	자안~분천	지322호선	6.40	-	71,505	11,410	-	60,095	보상
8	월산~고송	지342호선	4.18	-	37,200	3,715	-	33,485	보상
9	진위역~오산시계(2)	지314호선	3.80	-	30,000	-	3,000	27,000	보상
10	백석~내양	지341호선	2.50	-	14,000	-	400	13,600	실시설계
11	매산~일산	지321호선	2.32	-	19,000	200	-	18,800	설계완료
12	매향~화산	지301호선	4.08	-	23,000	1,000	-	22,000	설계완료

2015년도 지방도사업 세부 추진계획(북부지역)

(단위 : 백만원)

사업명		노선명	사업량(㎞)	사업기간	총사업비	연도별 투자계획			비고
						기투자	2015	향후
계	합 계(22개소)		136.25		2,370,249	699,981	132,649	1,537,619
	사업준공( 2개소)		9.40		242,224	208,302	25,694	8,228
	계속공사( 4개소)		40.75		767,534	404,231	82,055	281,248
	신규사업( 3개소)		20.44		366,403	20,744	18,700	326,959
	설계 및 보상(13개소)		65.66		994,088	66,704	6,200	921,184
수도권 교통정체 해소 도로확충(2개소)			13.05		304,544	106,552	23,044	174,948
1	덕양~용미	국78호선	4.65	‘07~’15	126,544	103,174	17,694	5,676	준공
2	오남~수동	국98호선	8.40	‘15~’20	178,000	3,378	5,350	169,272	신규
기업하기 좋은 도로확충(2개소)			10.45		191,480	106,294	12,350	72,836
1	금촌~월롱	지360호선	4.75	‘05~’15	115,680	105,128	8,000	2,552	준공
2	가납~상수	국39호선	5.70	‘15~’20	75,800	1,166	4,350	70,284	신규
동서축 도로확충(1개소)			13.70		287,351	169,141	55,055	63,155
1	조리~법원	국56호선	13.70	‘07~’17	287,351	169,141	55,055	63,155	계속
접경지역 도로확충(4개소)			33.39		592,786	251,290	36,000	305,496
1	설마~구읍	지371호선	8.03	‘07~’18	135,031	87,381	12,000	35,650	계속
2	운천~탄동	지387호선	7.70	‘10~’17	100,192	47,699	2,000	50,493	계속
3	광암~마산	지364호선	11.32	‘09~’17	244,960	100,010	13,000	131,950	계속
4	적성~두일	지371호선	6.34	‘15~’20	112,603	16,200	9,000	87,403	신규
설계 및 보상 추진사업(13개소)			65.66		994,088	66,704	6,200	921,184
1	하송우~마산	지360호선	3.50	-	48,130	8,700	-	39,430	보상
2	광암~신북	지379호선	10.47	-	89,900	9,640	-	80,260	보상
3	진건~오남	지383호선	4.95	-	108,028	9,100	-	98,928	보상
4	화도~운수	지387호선	4.71	-	96,153	6,000	-	90,153	보상
5	용미~광탄	국지78호선	4.53	-	85,059	3,000	-	82,059	보상
6	일패~와부	국지86호선	5.36	-	103,958	9,159	-	94,799	보상
7	신평~심곡	지368호선	2.86	-	31,240	4,500	-	26,740	보상
8	월롱~광탄	지360호선	5.74	-	111,626	8,000	5,000	98,626	보상
9	가평~현리	지364호선	14.50	-	207,354	7,100	-	200,254	보상
10	일영~석현	지371호선	1.62	-	16,440	1,005	-	15,435	설계완료
11	은현~봉암	지375호선	5.50	-	62,000	500	500	61,000	실시설계
12	삼팔교 재가설	지387호선	0.12	-	7,000	-	300	6,700	실시설계
13	문산∼내포	지359호선	1.80	-	27,200	-	400	26,800	실시설계

2		도로 구조물 내구성 및 안정성 확보

◈ 구조물의 세밀한 안전점검으로 안전사고를 사전 예방

◈ 도로구조물의 적기 보수․보강 시행으로 시설물 내구성 강화

□ 사업개요

❍ 총 구조물 현황 : 703개소 (남・북부 총괄)

∙ 교 량 : 676개소 40,710m   ∙ 지하차도 : 4개소 1,565m

∙ 터 널 :  16개소   9,292m   ∙ 옹     벽 : 7개소 2,770m

∙ 구)양수대교 재가설공사 : `09. 7~`15. 3, L=1.1km, B=12~16m(2차로)

※ 위임국도 [ 교량 51개소(3,675m), 지하차도 1개소(70.0m) 포함 ]

□ 전년도 추진실적

❍ 도로구조물(교량, 터널) 유지관리 : 80.2억원

∙ 구조물 안전점검(연 2회) 및 보수․보강 공사  : 양평대교 등 616개소, 80.2억원

❍ 노후위험 교량 재가설 공사 4개소 : 69.3억원

∙ 구)양수대교(90%)   ∙ 비금교(100%)   ∙ 간파교(74%)   ∙ 적목2교(2%)

❍ 문수산 터널 위탁관리용역 : 1.5㎞, 5.0억원

❍ 수해피해교량 복구공사 : 전북교 L=60m, 적목1교 L=65m 공사완료

노진대교 안전점검(정밀점검)		전북교 수해복구(준공)		비금교 개선공사(준공)

□‘15년도 추진계획

❍ 도로구조물(교량, 터널) 유지관리 : 78.9억원

- 안전점검 용역(연 2회) : 서탄대교 등 651개소, 24.7억원

- 구조물 보수․보강 공사 : 흑천교 등 80개소, 47.2억원

- 문수산터널 위탁관리용역 : L=1.5㎞, 7억원

❍ 노후위험 교량 재가설 공사 3개소 : 28억원

- 구)양수대교 : 구교량 교각기초 철거(7개소) 및 부대공사 등 사업 준공

- 간파교 : 교량 [L=48m, B=13m(2차로)] 및 접속도로 L=244m

- 적목2교 : 교량 [L=83m, B=8m(2차로)] 및 접속도로 L=220m

참고자료

구조물 유지관리 현황

□ 총 현황 : 703개소 (교량 676, 터널 16, 옹벽 7, 지하차도 4)

구분		계		도로건설과 소관		북부도로과 소관		비고
		개소	연장	개소	연장	개소	연장
총계	계	703	54,337	420	32,002	283	22,335
	교량	676	40,710	405	23,853	271	16,857
	터널	16	9,292	12	6,764	4	2,528
	옹벽	7	2,770	2	1,150	5	1,620
	지하차도	4	1,565	1	235	3	1,330
위임 국도	소계	52	3,745	21	1,549	31	2,196
	교량	51	3,675	21	1,549	30	2,126
	지하차도	1	70	-	-	1	70
국지도	소계	240	22,802	142	11,574	98	11,228
	교량	226	16,108	137	9,329	89	6,779
	터널	5	2,708	2	860	3	1,848
	옹벽	6	2,491	2	1,150	4	1,341
	지하차도	3	1,495	1	235	2	1,260
지방 도로	소계	411	27,790	257	18,879	154	8,911
	교량	399	20,927	247	12,975	152	7,952
	터널	11	6,584	10	5,904	1	680
	옹벽	1	279	-	-	1	279

□ 2015년 추진 세부계획

구 분		계 (억원)	도로건설과(남부) 소관		북부도로과(북부) 소관
			현 황	예산 (억원)	현 황	예산 (억원)
총 계		106.9		67		39.9
구조물 유지관리		71.9		60		11.9
	안전점검용역 (연2회, 651개소)	24.7	서탄대교등 399개소	20	북삼교등 252개소	4.7
	보수・보강공사 (80개소)	47.2	흑천교 등 65개소	40	등원육교 등 15개소	7.2
노후위험교량재가설 (3개소)		28	1개소	-	2개소	28
			구양수대교	-	간파교	11
					적목2교	17
터널위탁관리		7	문수산터널	7

3		안전한 도로환경 조성

◈ 지방도 적기보수로 안전하고 쾌적한 도로환경 확보

◈ 위험도로 구조개선을 통한 교통사고 위험요인 해소

□ 사업개요

❍ 지방도 유지보수 : 도내 52개노선 2,250㎞         137억원

∙ 포장도 보수 : 37억원        ∙ 차선도색 : 41억원

∙ 도로안전시설 정비 : 16억원   ∙ 상시보수(배수로정비 등) : 43억원

❍ 위험도로 구조개선(9개소(9.38㎞)                   22억원

❍ 군 훈련도로정비(국지도 78호선/연천 삼거∼옥계)     5억원

□ 전년도 추진실적

❍ 지방도 유지보수(도내 52개노선 / 2,250㎞)          201억원

❍ 위험도로 개선공사 : 9개소(6.58㎞)                 54억원

- 준공 : 1개소, 공사중 : 4개소, 설계 : 4개소

지방도302호선 위험도로 구조개선		지방도302호선 포장보수		지방도 342호선 차선도색

□‘15년도 추진계획

❍ 안전 및 취약구간 위험요인 해소에 중점을 둔 지방도 유지보수

- 포장파손 심화 등 교통사고 취약구간 우선 시행

- 포트홀 보수 등 지역별「단가계약」 시행으로 신속·효율성 도모

- 상향된「차선도색 반사성능」기준적용으로 시인성 및 안전성 제고

❍ 포장파손 안전관리 체계 개선(건설국 협업)

- 택시정보시스템 등을 활용한 실시간 신고 시스템 구축 검토

- 포장관리시스템(PMS) 구축 및 포트홀 보수장비 도입 검토 추진

4		설계변경 체계 개선

◈ 계획․설계부터 전문가 자문을 통한 설계변경 체계 개선

◈ 설계자문위원회 설계변경 적정성 검토로 예산의 효율적 집행

□ 사업개요

○ 지방도 확포장사업 : 덕양~용미 등 39건 / 226.4㎞, 2,962억원

- 남부 : 26개사업 / 142.7㎞, - 북부 : 13개사업 / 83.7㎞

○ 공공건축물 공사 : 용인 소방학교 종합훈련장 등 24개 현장

○ 신청사 건립 추진 : 건축연면적 111천㎡

□ 주요 추진방안

○ 설계단계부터 면밀한 조사와 전문가 설계자문을 통한 검증 실시

- 사전 현황조사 및 분석, 주민의견 수렴 및 설계자문위원회 자문을 통한 설계 내실화

○ 발주단계 전 계약심사 및 일상감사를 통하여 설계도서 재검토

구 분	계약심사	일상감사
대 상	∘ 추정가격 5억원 이상 공사 ∘ 1회 설계변경금액이 계약금액의 10% 이상 증가하는 경우	∘ 추정가격 5억원 이상 공사

○ 발주단계 후 설계자문위원회의 자문을 거쳐 설계변경 적정성 검토

- 소규모 설계변경의 경우 분과 설계자문위원회 활용

* 건설본부 설계자문위원회 구성·운영 : 149명(당연직 18, 위촉직 131)

5		운행제한 위반차량 단속

◈ 도로파손 방지로 교통사고 위험 예방과 안전 도모

◈ 원활한 교통소통과 안전하고 쾌적한 도로시설 유지

1

□ 단속개요

❍ 구    간 : 66개 노선 (지방도 43, 국지도 14, 국도 9)

❍ 단속방법 : 이동단속(3개반 16명) 및 고정검문소 (3개소)

❍ 단속기준 : 총중량 40톤, 축하중 10톤, 폭 2.5m, 높이 4.0m 길이 16.7m 초과차량

※ 단속근거 : 도로법 제77조 및 동법시행령 제79조 제2항

□ 전년도 추진실적

❍ 단속실적 : 검차 1,140,329대 /적발 859대

❍ 과태료부과 / 징수 : 858건 465,913천원 / 704건  369,663천원

❍ 홍보 및 특별단속

∙ 사전홍보 : 리플릿 8,140부, 협조공문 91업체, 전광판 연중, 안내문 1,307부

∙ 특별단속 : 49회 (야간·휴일 39회 / 유관기관 합동단속 10회)

특별 단속		전광판 홍보		유관기관 합동 단속

□‘15년도 추진계획

❍ 유관기관 합동단속 (분기 1회)

- 국토관리청, 시군, 경찰서, 교통안전공단, 명예단속원

❍ 선택과 집중을 통한 단속 효율성 강화

- 민원신고지역, 대규모 공사장 등 과적 원점 집중 순찰

- 야간 ․ 휴일 등 취약시간 단속 강화, 사각지대 해소 (월 2회)

❍ 제도개선 지속관리 (도로법 개정 필요)

- 운전자 처벌   → 운전자 ․ 화주 모두 처벌 (관련법 국회 계류 중)

- 단속방법 강화 → 무인 고속축중기 설치 등 (‘15. 1월 국토교통부 건의)

□ 이용자 중심의 공공건축물 건립

3     이용자 중심의 공공 건축물 건립 추진

❍

3     외부전문가 참여로 시공 완결성 제고

❍

1		이용자 중심의 공공 건축물 건립 추진

◈ 이용자를 배려한 편리하고 안전한 공간 제공

◈ 고효율에너지기자재 설치를 통한 에너지 절약 및 견실한 건축물 건립

□ 개요

❍ 사업현황 : 10건(준공 6건, 추진중 4건), 307억원

공 사 명	시설규모	공사기간	공사비 (억원)	비고
이천병원 지역응급의료센터	연면적 487㎡, 지상1층	΄13.05 ~΄14.02	15	준공
파주병원 기숙사/탁아시설	연면적 1,400㎡, 지하1/지상4층	΄13.05 ~΄14.06	26	〃
하남 풍산119안전센터	연면적 721㎡, 지상2층	΄13.09 ~΄14.06	14	〃
바다향기(바다봬)수목원	조성면적 1,116천㎡, 연면적 1,044㎡	΄10.09 ~΄14.11	157	〃
광주 중부119안전센터	연면적 554㎡, 지상2층	΄13.12 ~΄14.12	13	〃
의정부병원 입원병동 환경개선	장례식장, 입원병동 등 리모델링	΄14.01 ~΄14.12	26	〃
소방학교 종합훈련장	연면적 1,537㎡, 5개동, 지상1~3층	΄14.03 ~΄15.03	23	추진중
경기도청 어린이집 증측	연면적 515㎡, 지상2층	΄14.07 ~΄15.03	10	〃
북부청사 어린이집 증측	연면적 371㎡, 지상2층	΄14.08 ~΄15.03	8	〃
선인장 유전자원 연구온실 증축	연면적 660㎡, 지상1층	΄14.08 ~΄15.03	15	〃

❍ 신규(예정) 사업 : 포천병원 의료시설 증축 등 20건 2,317억원(참고자료 별첨)

□ 추진실적

❍ 공공건축물 준공 : 6개소

- 이천병원(’14.2.14준공), 파주병원(’14.6.11준공), 풍산119안전센터(’14.6.30준공), 바다향기수목원(’14.11.18준공), 의정부병원(’14.12.12준공), 중부119안전센터(’14.12.15준공)

❍ 공사 현장별 추진 공정률 (΄15.1월말 기준)

- 소방학교(84%), 도청 어린이집(98%), 북부청 어린이집(93%), 선인장 연구온실(44%)

❍ 고효율에너지(LED등) 설치비율

- 이천병원(30.3%), 파주병원(50.3% / 태양광 17.5Kw), 풍산119안전센터(88.4%), 중부119안전센터(100%), 의정부병원(48%), 소방학교(100%), 도청 어린이집(50%), 북부청 어린이집(100%)

□ 향후계획

❍ 고객위원회 운용을 통해 이용자 실수요를 수렴하여 건축설계 추진

❍ 소방본부, 의료원 등 수요처에서 설계하는 경우 설계 초기부터 협의체 구성 운용

❍ 소방학교 종합훈련장, 도청·북부청 어린이집 등 4개 사업 계속 추진

❍ 포천병원 의료시설 증축 등 공공건축물 건립 신규사업 19건 발주

참고자료

2015년 신규(예정) 사업 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업규모	사업비	사업부서	추진현황	비고
19건		236,803
포천병원 의료시설	연면적 2,778㎡ (지하1/지상4층)	9,018	건강증진과 (경기도의료원)	입찰공고	신규
갯벌자원연구센터	연면적 2,952㎡ (지하1/지상2층)	8,000	해양수산자원 연구소	설계중	신규 (계속비)
지역곤충자원산업화 지원센터	연면적 2,130㎡, (지하1/지상2층)	4,980	농업기술원	설계중	신규
양주 장흥119안전센터	연면적 990㎡, (지상2층)	1,794	양주소방서	설계중	신규
안산 반월119안전센터	연면적 747㎡, (지상2층)	1,600	안산소방서	설계중	신규
고양 화전119안전센터	연면적 770㎡, (지상2층)	2,170	고양소방서	설계중	신규
부천 내동119안전센터	연면적 750㎡, (지상2층)	1,640	부천소방서	설계중	신규
수원병원 리모델링 및 증축	연면적 876㎡ (지상3층)	3,000	건강증진과 (경기도의료원)	설계중	신규
파주병원 건강검진센터 증축	연면적 992㎡ (지상2층)	2,200	건강증진과 (경기도의료원)	설계중	신규
수리산 탐방안내소	연면적 710㎡ (지상2층)	2,000	공원녹지과	설계중	신규
기술학교 생활관 증축	연면적 1,334㎡ (지상2층)	5,350	기술학교	설계준비 (공사비 미확보)	신규
광역재활용센터 구축	미정	2,000	자원순환과	설계준비	신규
관사 리모델링 및 증축	미정	1,289	회계과	설계준비	신규
경기도 문화의 전당	연면적 34,981㎡ 리모델링	13,000	문화정책과	설계준비	신규 (계속비)
이천병원 기숙사 증축	연면적 993㎡ (지상2층)	2,200	건강증진과 (경기도의료원)	설계준비 (공사비 미확보)	신규
포천병원 기숙사 증축	연면적 1,500㎡ (지하1/지상3층)	7,500	건강증진과 (경기도의료원)	설계준비 (공사비 미확보)	신규
에코팜랜드	연면적 99,457㎡ (미정)	143,527	축산정책과	설계준비 (공사비 미확보)	신규 (계속비)
북부청사 증축	연면적 6,000㎡ (지하1지상4층)	13,235	행정관리담당관	예산미확보	신규
북부소방본부․소방서 합동청사	연면적 7,950㎡ (지하1/지상6층)	12,300	행정관리담당관/북부소방재난본부	예산미확보	신규

2		외부전문가 참여로 시공 완결성 제고

◈ 외부전문가 참여 등 분야별․공종별 입체적 점검 실시로 견실시공 도모

◈ 공사추진 단계별 주기적 점검으로 근원적 부실시공 사전 예방

□ 사업개요

❍ 시공평가(건설기술진흥법 제50조) : 건설본부 설계자문위원

∙ 100억 이상, 공정 90% ~ 준공된 해의 다음해 2월말까지

❍ 품질검사(시책) : 건설본부 설계자문위원

∙ 건설본부 추진공사 및 설계, 공정 50%시 및 준공 1개월 전

❍ 시공검수(경기도 건설기술심의위원회 조례 제4조) : 건설기술심의위원

∙ 10억 이상, 공정 90%시

❍ 품질검수(경기도 건설기술심의위원회 조례 제4조) : 건설기술심의위원

∙ 10억 이상, 준공 후 1년 이내

□ 추진실적

(품질검사) 8회 : 바다향기(바다봬)수목원(’14.4.11), 파주병원 기숙사/탁아시설 증축(’14.5.22), 하남 풍산119안전센터(’14.5.29), 광주 중부119안전센터(’14.6.26), 소방학교 종합훈련장(’14.11.24), 북부청 어린이집(’14.12.1), 도청 어린이집(’14.12.2), 선인장 연구온실(’14.12.16)

(시공검수) 4회 : 이천병원 지역응급의료센터(’14.1.24), 파주병원 기숙사/

탁아시설 증축(’14.4.8), 바다향기(바다봬)수목원(’14.10.1), 광주 중부119안전센터(’14.11.7)

(품질검수) 2회 : 남한산성관리사무실(’14.11.7), 인터넷중독대응센터(’14.11.14)

□ 향후계획

❍ 건축공사 추진 단계별 외부전문가 검사 및 점검결과 반영･보완

- 시공평가 : 바다향기(바다봬)수목원 조성공사 1건(준공 후 다음해 2월말까지)

- 품질검사 : 도청 어린이집 증축공사 등 7건(공정률 50% 및 준공1개월전)

- 시공검수 : 소방학교 종합훈련장 건립공사 등 2건(공정률 90% 도래시)

- 품질검수 : 파주병원 기숙사/탁아시설 증축공사 등 3건(준공후 1년 이내)

□ 사람 중심, 도민과 호흡하는 혁신 청사 건립

3     개방·소통의 혁신적 복합청사 건립

❍

3     신청사 건립 관련 재원조달방안 합리화

❍

1		개방·소통의 혁신적 복합청사 건립

◈ 365 시민･도민 소통하는 공간 + 사회적 일자리의 생태계 조성

◈ ｢先 소프트웨어, 後 하드웨어｣의 우선 순위 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 광교신도시 내 공공청사 4-1블럭

❍ 규    모 : 부지면적 59,000㎡, 연면적 111,139㎡(지하2층, 지상25층)

❍ 총사업비 : 4,273억원(건축비 2,716, 토지비 1,427, 설계비 등 130)

□ 도민·직원 의견 수렴

❍ ｢표현·토론의 장｣ 등 도민이 와글와글 이용하는 도민청사

- 건물 보다는 사람을 먼저 고려 → 개방 ‧ 소통 ‧ 혁신 공간 극대화

❍ ｢설계 → 시공 → 운영｣ 청사 건립 전 과정에 의회･도민･직원의 지속적 참여

- 소셜 픽션 및 고객 위원회 운영

- ｢도청사 건립 프로젝트｣ 옴부즈만 채용 및 홈페이지 개설 검토 추진

□ 향후 계획

❍ 소셜 픽션 결과 설계 반영 …………………………… ’15. 3월

❍ 고객 위원회 구성 ……………………………………… ’15. 3월

❍ 추진일정(안) : 설계(’15. 6월) → 착공(’15. 11월) → 준공(’18. 12월)

2		신청사 건립 관련 재원조달방안 합리화

◈ 토지매입은 도시공사 이익배당금으로 충당, 공사비는 재원조달계획 검토 추진

◈ 투명한 예산집행을 위한 신청사 건립 특별회계 설치․운영

□ 추진 방향

❍ 신청사 건립 재원은 도민 세금부담 최소화 방안 추진

- 토지매입비는 도시공사 이익배당금으로 충당

- 건축비는 지방채 등 합리적인 재원조달 방안 검토

❍ 투명한 예산집행을 위한 □신청사 건립 특별회계□ 설치･운영

- 설계부터 준공까지 단계별 투자재원 구분 운영하여 재정의 투명성 확보

□ 추진 실적

❍ ’14. 10. 28 : 신청사 건립 지방재정 중앙 투･융자심사 승인(행자부)

- 총사업비 4,273억원(도비 599, 지방채 2,247, 기타 1,427), 조건부 승인

❍ ’15. 01. 26 : □신청사 특별회계 조례□관련 도의회 요구자료 부서 협의

- 회계과, 자원순환과, 도시정책과, 법무･예산담당관, 미래전략담당관 등 의견수렴

□ 향후 계획

❍ 2015. 2월 : 신청사 특별회계(안) 관련 도의회 요구자료 검토 추진

- 매각대상 공유재산 일제 재조사 및 공유재산 매각 타당성 재검토(GRI)

- 산하기관 전수 재조사 및 현 청사 활용방안 연구 검토(GRI)

❍ 2015. 2월 : 신청사 건립 특별회계 조례(안) 제정 재심의 추진

- ｢공유재산 특별회계 조례｣ 상충 조항은 안행위, 자치행정국 등과 협의

❍ 공유재산 매각 절차 단계별 추진

- 행정재산 및 일반재산 매각 : 2015년부터 단계별로 추진

- 현 청사 입주 산하기관의 재산 매각 : 신청사 준공 이후 단계별로 추진