2016년 주요 업무계획

경기도 건설본부

			목 차

Ⅰ. 일 반 현 황	3

1. 기구 및 인력	3

2. 주요기능	4

3. 예산규모	5

Ⅱ. 2015년 주요 성과	6

Ⅲ. 2016년 주요업무 추진계획	7

1. 신청사 관련	9

2. 도로 관련	15

3. 공공건축 관련	29

Ⅰ. 일 반 현 황

1. 기구와 인력

□ 기  구 : 4과 1단 19팀

건 설 본 부

관  리  과

도로건설과

북부도로과

건축시설과

신청사건립

추  진  단

총무팀

간선도로팀

지방도건설팀

건축1팀

행정팀

계약관리팀

지방도로팀

국지도건설팀

건축2팀

융합기획팀

과적단속팀

도로시설팀

도로정비팀

건축설비팀

건립팀

도로환경개선팀

시설물관리팀

재원조성팀

품질시험팀

□ 인  력 : 정원 114명 / 현원 114명

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	114/114	1/1	5/5	20/20	31/30	47/48	10/6	0/4
관 리 과	26/25	1/1	1/1	4/3	8/8	10/10	2/1	0/1
도로건설과	31/31	-	1/1	5/5	7/7	15/16	3/2	-
북부도로과	25/26	-	1/1	4/5	4/4	12/11	4/2	0/3
건축시설과	14/14	-	1/1	3/3	5/4	5/6	-	-
신청사건립추진단	18/18	-	1/1	4/4	7/7	5/5	1/1	-

2. 주요기능

관 리 과		▸ 건설본부 행정의 종합 기획·조정 ▸ 조직, 인사, 예산, 청사관리 등 ▸ 공사·용역 계약, 관급자재, 물품구매 및 지출 ▸ 운행제한 위반차량 단속 및 과태료 부과 등
도로건설과		▸ 남부지역 국지도, 지방도, 민자도로 설계·시공 및 감리 ▸ 남부지역 지방도 유지·관리 ▸ 남부지역 지방도 구조물 유지·관리 ▸ 건설공사 품질시험 등
북부도로과		▸ 북부지역 국지도, 지방도, 민자도로 설계·시공 및 감리 ▸ 북부지역 지방도 유지·관리 ▸ 북부지역 지방도 구조물 유지·관리 ▸ 북부지역 운행제한 위반차량 단속 및 과태료 부과
건축시설과		▸ 공공건축물 공사설계·시공 및 감리 ▸ 준공 건축물 하자보수 및 유지관리
신청사건립 추진단		▸ 신청사 건립 및 현청사 활용 계획 수립 ▸ 신청사 설계 용역 및 공사시공 ･ 감리용역 ▸ 신청사 건립 재원 마련 및 공유재산 매각 추진 지원 ▸ 경기 융합행정타운 계획 수립 및 복합개발 추진

3. 예산규모

□ 2016년 부서별 예산 현황

(단위 : 백만원)

부 서 별	계	정책사업	행 정 운영경비	재무활동	비 고
계	45,515	33,317	1,398	10,800
관리과	1,181	437	744
도로건설과	19,959	19,840	119
북부도로과	13,399	13,040	359
건축시설과	106	0	106
신청사건립추진단	10,870	0	70	10,800

□ 주요 사업 현황

○ 도 신청사 건립사업 추진	:	10,800 백만원
○ 도로 포장 유지관리(남부 8,650 + 북부 5,090)	:	13,740 〃
○ 도로 구조물 유지관리(남부 7,300 + 북부 6,799)	:	14,099 〃
○ 야밀고개 위험도로 선형개선공사	:	1,500 〃
○ 군 훈련도로(연천 삼거 ~ 옥계) 정비	:	1,000 〃
○ 안성 지방도 325호선 도로개량공사	:	1,000 〃
○ 광주 지방도 325호선 도로개량공사	:	500 〃

Ⅱ. 2015년 주요 성과

□ 융·복합 청사 건립 방향 설정

○ 기금설치 및 운용에 관한 조례 제정(‘15.5.28)

○ 신청사 건립 현안토론회 및 광교주민 간담회 개최(7회, ‘15.6~7월)

○ ｢신청사 건립 사업(융합타운 조성)｣ 로드맵 발표(‘15.7.30)

○ 신청사 및 광교개발 관련 도·수원시 합의문 발표(‘15.9.21)

○ 도의회+도청사 통합 관련 보고회 개최(‘15.12.15)

□ 도로 관련

○ 마무리사업 조기개통

- 사업완료 : 3개소 L=9.31㎞

* 남부 : 2개소 L=4.56㎞(동탄∼기흥 3.46㎞, 구양수대교 1.1㎞)

* 북부 : 1개소 L=4.75㎞(금촌∼월롱 4.75㎞)

- 우선개통 : 2개소 L=2.9㎞ (덕양～용미 1.6km, 조리～법원 1.3km)

○ 안전한 도로관리

- 안전사고 예방을 위한 구조물 유지관리 : 양평대교 등 696개소, 141억원

- 쾌적한 도로서비스 제공을 위한 지방도 유지관리 : 용인 등 15개 시·군, 143억원

- 위험도로 개선 : 3개소 준공

* 문호∼도장 0.8km(`15. 10.), 불당리 0.8km(`15. 6.), 귀전리 0.75km(`15. 6.)

□ 공공건축 관련

○ 이용자 중심의 공공 건축물 건립 추진

* 소방학교 종합훈련장, 도청·북부청 어린이집, 선인장 연구온실 등 4개소 준공

* 포천병원, 지역곤충자원산업화지원센터, 119안전센터(4개소) 등 6개소 추진 중

○ 신․재생 및 고효율에너지 건축물 추진

* 6개소에 LED등 1,376개 설치(설치비율 93.8%)

* 포천병원 의료시설(태양광 45kw), 지역곤충자원산업화 지원센터(태양광 35kw 설치)

○ 공사 단계별 외부전문가 참여로 건축물 안전성 제고

* 7개 건축물에 대한 시공평가(1회), 품질검사(3회), 시공검수(1회), 품질검수(2회)

Ⅲ. 2016년 주요업무 추진계획

□ 신청사 관련	9

□ 도로 관련	15

□ 공공건축 관련	29

	□ 신청사 관련

1. 신청사 관련

1-1		경기융합타운 건립사업

◇ 건립철학 : 자유와 배려를 통한 도민 행복 추구

□ 사업개요(검토 중)

시 설 명		발 주 기 관	부지면적(㎡)	사업방식	연면적 (㎡)		추정 사업비 (억원)	비 고
합 계			120,000		270,770		14,090
도청사 부 지	도청사	경기도	20,000	마스터 플랜 ↓ 마스터 아키텍트 + 설계변경 현상공모 시민참여 ↓ 개별발주 ↓ 통합관리 ↓ 통합운영	63,128	86,770	3,645
	도의회				23,642
	도서관 (복 합)	경기도			20,000		650
	도교육청	경기도 교육청			23,000		850	협의중
	초등학교	경기도 교육청	13,000		13,000		325	협의중
오 픈 스페이스	잔디광장	경기도	60,000		-		1,460
공공업무 단 지	공공기관		10,000		60,000		2.550	혐의중
복합개발 용 지	업 무	민 간 사업자	17,000		68,000		4,610
	상 업
	주 거
	기 타

□ 추진방향

○ 경기융합타운협의체 구성·운영을 통한 정책 반영

○ 수수료, 관리비 책정 등 상호협력을 위한 공동협약 체결 추진

○ 통합 매니지먼트(PM)의 역할을 경기도시공사에서 대행 수행

○ 마스터 플랜(MP)과 마스터 아키텍트(MA)를 도입하여 프로젝트 품질 관리

□ 추진일정

○ 경기융합타운 마스터플랜 수립(1월 ~ 4월)

○ 경기융합타운 사업추진체계 공동협약 체결 및 조직 구성(4월~)

○ 1차 준공 : 2020년(예정)

□ 경기융합타운 사업추진 체계도

1-2		도 신청사 건립사업

◇  도민과 함께 호흡하는 소통 ․ 혁신 ․ 개방의 신청사 건립

◇ 미래에 대응하는 실용적이고 효율적인 공간 계획 수립

□ 사업개요

○ 위    치 : 광교신도시 공공청사 4-1BL

○ 규    모 : 부지면적 19,800㎡, 연면적 111,139㎡

○ 사 업 비 : 3,645억원(건축비 2,716, 토지비 799, 설계비 등 130)

○ 사업기간 : 2008년 ~ 2020년

□ 추진방향

○ 주민과 도 의회 및 도가 공유하는 혁신 오픈플랫폼 설계

- IOT․조경․문화․예술 등 분야별 위원회 구성하여 전문성 강화

- 신재생에너지, 첨단 ICT기술 도입 등 미래에 대응하는 설계

- 세미나실, 회의실, 북카페 등 문화·소통 공간 공유

○ 경기도형 스마트오피스 구상하여 신청사 계획에 반영

- 공간 활용 극대화 및 협업·복지 공간 확충으로 행복한 근무 공간 창조

- ICT기반의 환경, 유·무선 통합시스템 운영 등 업무방식 개선

- 스마트오피스 구상반(정책수립) → 고객위원회로 승계 운영

○ 지역 주민과 함께하는 청사부지 개방사업 추진

- 계절별 부지활용 행사 추진 : 보리밟기 및 체험축제, 유채꽃 조성 등

□ 추진일정

○ 설계완료 : ’16년 12월

○ 공사발주 : ’17년 상반기

1-3		신청사 건립 재원조달 관련

◇ 공유재산 조기 매각 및 융합타운 개발 등으로 도민 부담 최소화

◇ 신청사 건립기금 조례에 의한 연차별 기금적립으로 재정 건전성 강화

□ 재원조달 방안

사 업 비	재원조달 방안	비 고
▸ 합 계 : 3,645억원 - 건 축 비 : 2,716 - 토지매입 : 799 - 기타 설계비 : 130	▸ 합 계 : 5,600억원 - 공유재산매각 : 1,700 - 손실부담금 : 1,100 - 현 청사매각 : 1,300 - 융합타운개발 : 1,500

□ 추진계획

○ 공유재산 매각 T/F 운영을 통한 원활한 매각 추진

- 18건 1,759억원(행정재산 3건 1,328억원, 일반재산 15건 431억원)

○ 공유재산 조기매각 및 경기융합타운 개발수익 등 재원확보 추진

⦁화성 제부리 주차장 일괄매입 합의 및 세입징수(126억원, ‘16.2)

⦁화성 진안동 병점도시개발사업 관련 손실보상 세입징수(3억원, ‘16.2)

⦁수원 종자관리소 도시관리계획변경(농업진흥→일반주거) 행정절차 이행 협의

⦁광주 舊 수자원본부 청사 등 일반재산 입찰 및 매각 협의

⦁공유재산 매각(150억) 및 손실보상금(200억) 등 350억 기금적립(협의)

○ 공유재산 매각대상(18건) 현장점검 실시 및 추진상황 모니터링 강화

- 자체 현장점검 및 실태조사 실시 : 연 2회(상･하반기)

○ 신청사 건립기금 운용계획 및 기금심의회 개최 등 기금운영 내실화 도모

	□ 도로 관련

2. 도로 관련

2-1		도로와 시설물 관리 방안 혁신

□ 노후교량·어스앵커 안전관리 체계 개선

□ 대상현황

○ 노후교량 :  122개소

계	DB24(43.2톤)	DB18(32.4톤)	DB13.5(24.3톤)
668개소	546개소	64개소(남부38+북부26) (’84년∼’94년 설치/21년 이상 경과)	58개소(남부32+북부26) (’84년이전 설치/31년 이상 경과)

○ 어스앵커 : 10개소(급경사지 붕괴방지 시설)

□ 실태 및 문제점

○ (노후교량) 최근 교통량 증가와 대형화물 및 덤프트럭 등 중량차량의  운행 빈도 급증으로 교량 파손 심화

【사례】국지도 78호선 파주시 광탄면 용미2교(DB13.5, C급)의 경우 통행가능 하중을 초과하는 중량차량의 빈번한 통행으로 슬라브 파괴(’15. 9월)

○ (어스앵커)“시특법”에 의한 안전점검 대상시설물에 미 포함

□ 추진계획

○ (노후교량) 정밀점검을 실시하여 시급성에 따라 재가설(DB 24로 격상)      또는 성능개선 추진

- 특별 정밀점검 실시 및「취약교량 개선 연차별 추진계획」수립

- 교량(DB-18, DB-13.5) 통행제한 표지판 일제 보수·정비

○ (어스앵커) 전수조사 및 정밀점검 실시

- 긴장저하 및 기능상실 여부에 따라 보수·보강대책 수립 시행

- 정기 안전점검 대상시설물에 어스앵커 포함

□ 터널 통합관리 체계 관련

□ 터널현황

○ 도내 국지도·지방도 : 16개소(남부 12, 북부 4)

계	1등급 터널 (3,000m이상)	2등급 터널 (1,000∼3,000m이상)	3등급 터널 (500∼3,000m미만)	4등급 터널 (500m미만)
16	-	1 (문수산터널1,566m)	9	6

*  연장 1km이상의 2등급 터널은「도로터널 방재시설 설치 및 관리지침」에  따라「관리사무소」설치

□ 실태 및 문제점

○ 문수산터널을 제외한 15개 터널에 CCTV·비상방송설비 미설치로

차량추돌·화재사고 발생 시 유독가스 피해 등 초동대처에 어려움

□ 추진계획

○「문수산터널관리사무소」기존인력을 활용하여 16개 터널 통합관리

- 터널 내 CCTV를 24시간 모니터링 하여 차량추돌·화재사고 발생시  비상방송을 통해 신속 대피토록 하여 인명피해(질식참사) 예방

○ ’16년도에 황골터널 시범 실시 후 확대 추진

- 문수산관리사무소 : 통합메인설비 설치·운영

- 황골터널 : CCTV, 비상방송시설 설치

○ 사업 추진성과 분석 후 시․군관리 터널(44개소) 통합관리도 검토 추진

【 도내 지방도 터널 통합관리 체계도 】

당성터널 (112m)	황골터널 (730m)	구봉터널(상) (600m)	구봉터널(하) (550m)	서리터널 (313m)
오포터널 (160m)	문수산터널관리사무소			화악터널 (680m)
진우터널 (270m)				갈곡터널 (740m)
단월명성터널 (700m)				죽엽산터널 (640m)
굴고개터널 (88m)	고은터널 (995m)	문수산터널 (1,566m)	초막터널 (680m)	대성터널 (488m)

참고		터널별 CCTV․비상방송시설 설치 현황

(단위:백만원)

NO	터널명	연 장 (m)	계	CCTV			비상방송설비
				존치 여부	필요수량 (EA)	소요액	존 치 여 부	필요수량 (EA)	소요액
계	16개터널	9,312	1,100		41	710		50	390
1	광주 오포터널	160	50	-	2	28	-	2	22
2	양평 명성터널	700	81	-	4	56	-	4	25
3	광주 진우터널	270	65	-	3	42	-	3	23
4	화성 굴고개터널	88	50	-	2	28	-	2	22
5	용인 고은터널	995	26	기존	-		-	5	26
6	화성 구봉터널(상)	600	66	-	3	42	-	3	24
7	화성 구봉터널(하)	550	66	-	3	42	-	3	24
8	화성 당성터널	112	50	-	2	28	-	2	22
9	용인 문수산터널	1,566	166	기존	-	136 (메인설비)	기존	-	30 (메인설비)
10	용인 서리터널	313	65	-	3	42	-	3	23
11	안성 초막터널	680	25	기존	-		-	4	25
12	양평 황골터널	730	81	-	4	56	-	4	25
13	가평 대성터널	488	66	-	3	42	-	3	24
14	포천 죽엽산터널	640	81	-	4	56	-	4	25
15	파주 갈곡터널	740	81	-	4	56	-	4	25
16	가평 화악터널	680	81	-	4	56	-	4	25

* CCTV 14백만원/EA,  비상방송설비 7.2백만원/EA

* 기존 통합 메인설비는 아날로그 방식이므로 사후 디지털방식으로 교체되어야 호환 가능

□ 차선도색 반사성능 증진

□ 실태 및 문제점

○반사성능 노면표시 기준(경찰청 기준)

(단위 : mcd/(㎡․Lux))

1) mcd/(㎡․Lux) : 재귀반사성능

mcd : 1/1000cd(칸델라, 1cd 촛불 하나의 밝기, 광도), Lux : 조도단위, cd/㎡ : 반사성능 단위

구 분	상향 반사성능 기준			비 고
	백색선	황색선	청색선
설 치 시	240	150	80	기 준
재설치 시기	100	70	40	권 장
우천(습윤)시	100	70	40	권 장

○ 문제점

-「경찰청 교통노면표시 설치관리 매뉴얼」에 재도색 권장 반사성능 기준만 제시

- 지역별·교통량별 마모시기가 상이하여 동일 기준적용 불가

- 차선도색 반사성능 관리에 대한 이력관리 기준 부재

□ 추진계획

○ 차선도색 반사성능시험 사후이력관리 모니터링 실시

- 2015 사업시행 구역 중 9개 노선 시범 선정(남부5, 북부4)

* 차로수, 교통량, 도색방법, 지역안배 등을 고려하여 선정

- 당초 반사성능시험실시 후 분기별 재실시 확행하여 데이터 관리 및 활용

* 측정값이 1년 중 어느 시기에 많이 감소되는지 측정

○ 차선 반사성능 책임제 실시

- 공사발주 시방서에 도색 후 6개월 이내 반사성능 검사를 실시하고 기준 미충족 시 수급인 부담으로 보완시공 명시(2016 신규 사업부터 적용)

- 분쟁소지 예방을 위한 시행 세부규정을 마련하고 제도개선을 중앙에도 건의 병행

2-2		도민을 위한 지방도건설

◇ 선택과 집중 투자를 통한 공기단축으로 장기계속공사 조기개통

◇ 경기북부 균형발전과 주민 편리성 제고를 위한 지방도건설 추진

□ 사업개요 : 7개 분야 54건 / 301.72㎞, 2,242억원

▪ 신도시 주변도로  : 진위∼남사 등 4건 / 28.56km, 381억원

▪ 수도권 교통정체 해소 : 오포∼포곡 등 등 5건 / 27.35km, 467억원

▪ 기업하기 좋은 도로 : 남양∼구장(2) 등 8건 / 32.20km, 397억원

▪ 관광지 주변도로 : 안중∼신왕 등 2건 / 12.24km, 108억원

▪ 동서축 도로확충 : 여주∼가남 등 6건 / 38.81km, 612억원

▪ 접경지역 도로확충 : 설마∼구읍 등 5건 / 33.51km, 197억원

▪ 설계 및 보상추진 : 불현∼신장 등 24건 / 129.05km, 80억원

□ 추진계획

○ 마무리사업 적기 준공 및 우선개통 추진 : 14개 사업 52.10km

- (준 공) 11개 사업, 48.54km,  (우선개통) 3개 사업, 3.56km

○ 경기북부 균형발전을 위한 5대 핵심도로 집중 추진 : 5개 사업 39.8km

○ 현장종사자 안전의식 고취 및 훈련강화

- 안전의식 제고를 위해 전문가 교육 및 사전대응 모의훈련 강화(2회)

○ 설계·시공 단계별 지역주민 의견수렴 강화

- 설계착수 시 홍보 및 의견수렴 채널 확대

- 주·야간 설명회 및 공구별 착수 시 추가설명

- 설계변경 시 지역주민, 이해관계인에게 공사시행계획 설명

○ 품질관리 강화

- 품질관리 적정성 및 품질시험계획 이행확인(연 1회)

- 도 사업부서 및 투자기관, 시·군 건설부서 공조

참고1		2016년도 간선도로망 구축 계획

(단위 : 백만원)

사업명			노선명	사업량(㎞)	총사업비	연도별 투자계획			비고
						기투자	2016	향후
계	합 계(54개소)			301.72	4,510,317	1,792,415	224,256	2,493,646
		남부(32개소)		168.87	2,308,166	1,035,565	113,265	1,159,336
		북부(22개소)		132.85	2,202,151	756,850	110,991	1,334,310
	사업준공(11개소)			48.54	735,508	646,293	44,755	44,460
		남부( 10개소)		43.89	603,850	525,482	38,992	39,376
		북부( 1개소)		4.65	131,658	120,811	5,763	5,084
	계속공사(11개소)			88.37	1,455,233	934,482	124,018	396,733
		남부( 7개소)		47.62	730,216	432,100	66,051	232,065
		북부( 4개소)		40.75	725,017	502,382	57,967	164,668
	신규공사( 8개소)			35.76	590,499	73,936	47,483	469,080
		남부( 2개소)		12.26	174,995	6,378	5,222	163,395
		북부( 6개소)		23.50	415,504	67,558	42,261	305,685
	설계및보상(24개소)			129.05	1,729,077	137,704	8,000	1,583,373
		남부(13개소)		65.10	799,105	71,605	3,000	724,500
		북부(11개소)		63.95	929,972	66,099	5,000	858,873
신도시 주변 도로확충(4개소)				28.56	400,841	196,765	38,137	165,939
	남부(도로건설과)		4개소	28.56	400,841	196,765	38,137	165,939
수도권 교통정체 해소 도로확충(5개소)				27.35	631,913	362,693	46,740	222,480
	남부(도로건설과)		3개소	14.30	322,219	230,319	26,120	65,780
	북부(북부도로과)		2개소	13.05	309,694	132,374	20,620	156,700
기업하기 좋은 도로확충(8개소)				32.20	549,213	371,618	39,723	137,872
	남부(도로건설과)		6개소	24.70	443,348	346,123	22,019	75,206
	북부(북부도로과)		2개소	7.50	105,865	25,495	17,704	62,666
관광지 주변 도로확충(2개소)				12.24	83,171	47,509	10,767	24,895
	남부(도로건설과)		2개소	12.24	83,171	47,509	10,767	24,895
동서축 도로확충(6개소)				38.81	576,133	374,236	61,189	140,708
	남부(도로건설과)		4개소	23.97	259,482	143,244	13,222	103,016
	북부(북부도로과)		2개소	14.84	316,651	230,992	47,967	37,692
접경지역 도로확충(5개소)				33.51	539,969	301,890	19,700	218,379
	북부(북부도로과)		5개소	33.51	539,969	301,890	19,700	218,379
설계 및 보상 추진사업(24개소)				129.05	1,729,077	137,704	8,000	1,583,373
	남부(도로건설과)		13개소	65.10	799,105	71,605	3,000	724,500
	북부(북부도로과)		11개소	63.95	929,972	66,099	5,000	858,873	용도지정

참고2		2016년도 간선도로망 세부구축 계획(남부지역)

(단위 : 백만원)

사업명		노선명	사업량 (㎞)	사업 기간	총사업비	연도별 투자계획			비고
						기투자	2016	향후
계	계	합계(32개소)	168.87		2,308,166	1,035,565	113,265	1,159,336
	사업준공(10개소)		43.89		603,850	525,482	38,992	39,376
	계속공사( 7개소)		47.62		730,216	432,100	66,051	232,065
	신규공사( 2개소)		12.26		174,995	6,378	5,222	163,395
	설계 및 보상(13개소)		65.10		799,105	71,605	3,000	724,500
신도시 주변 도로확충(4개소)			28.56		400,841	196,765	38,137	165,939	-
1	진위~남사	지314호선	4.90	‘09~’16	48,120	38,973	8,147	1,000	준공
2	용인~남사(2)	지321호선	7.38	‘09~’16	100,679	77,884	8,764	14,031	준공
3	초지대교~인천	국84호선	7.88	‘13~’20	164,029	79,512	19,226	65,291	계속․우선
4	갈천~가수	국82호선	8.40	‘16~’23	88,013	396	2,000	85,617	신규
수도권 교통정체 해소 도로확충(3개소)			14.30		322,219	230,319	26,120	65,780
1	본오~오목천(2)	국98호선	5.40	‘09~’16	77,238	77,238	-	-	준공
2	오포~포곡(2)	국57호선	6.20	‘11~’17	191,181	110,126	26,120	54,935	계속
3	제3경인정왕IC개선	지330호선	2.70	‘14~’16	53,800	42,955	-	10,845	준공
기업하기 좋은 도로확충(6개소)			24.70		443,348	346,123	22,019	75,206
1	남양~구장(2)	지318호선	4.88	‘09~’16	70,000	51,633	3,000	15,367	계속․우선
2	오산~남사	지310호선	5.26	‘05~’16	89,901	84,304	3,597	2,000	준공
3	청북~고덕	지302호선	2.72	‘04~’16	115,000	90,078	13,422	11,500	준공
4	삼계~구문천	지309호선	3.50	‘10~’16	22,172	22,172	-	-	준공
5	정남~안녕	지315호선	4.03	‘09~’16	62,369	62,369	-	-	준공
6	안중~조암(1)	지313호선	4.31	‘15~’18	83,906	35,567	2,000	46,339	계속
관광지 주변 도로확충(2개소)			12.24		83,171	47,509	10,767	24,895
1	안중~신왕	지313호선	6.20	‘10~’16	31,671	26,609	5,062	-	준공
2	일죽~대포(1)	지329호선	6.04	‘15~’18	51,500	20,900	5,705	24,895	계속
동서축 도로확충(4개소)			23.97		259,482	143,244	13,222	103,016
1	실촌~만선	국84호선	3.86	‘16~’23	86,982	5,982	3,222	77,778	신규
2	여주~가남	지333호선	13.18	‘09~’16	140,800	114,876	5,000	20,924	계속
3	용문~단월	지314호선	5.13	‘11~’16	28,800	19,486	5,000	4,314	계속
4	마산~산하	지306호선	1.80	‘15~’16	2,900	2,900	-	-	준공
설계 및 보상 추진사업(13개소)			65.10		799,105	71,605	3,000	724,500
1	고삼~삼죽	지306호선	7.15	-	47,300	4,940	-	42,360	보상
2	공도~양성	지321호선	6.00	-	48,000	9,600	-	38,400	보상
3	용인~포곡	국57호선	9.10	-	291,000	3,000	-	288,000	보상
4	불현~신장	지325호선	6.40	-	41,000	15,200	2,000	23,800	보상
5	일죽~도계	지318호선	8.40	-	94,000	10,700	-	83,300	보상
6	이화~삼계(2)	지302호선	6.21	-	81,500	5,940	-	75,560	보상
7	자안~분천	지322호선	6.40	-	71,505	11,410	-	60,095	보상
8	월산~고송	지342호선	4.18	-	37,200	3,715	-	33,485	보상
9	진위역~오산시계(남북축)	지314호선	1.86	-	31,100	3,000	1,000	27,100	설계
10	백석~내양	지341호선	2.50	-	12,000	400	-	11,600	설계
11	매산~일산	지321호선	2.32	-	19,000	200	-	18,800	설계완료
12	매향~화산	지301호선	4.08	-	23,000	1,000	-	22,000	설계완료
13	이천시 대월면	지337호선	0.50	-	2,500	2,500	-	-	설계

참고3		2016년도 간선도로망 세부구축 계획(북부지역)

(단위 : 백만원)

사업명		노선명	사업량(㎞)	사업기간	총사업비	연도별 투자계획			비고
						기투자	2016	향후
계	합 계(22개소)		132.85		2,202,151	756,850	110,991	1,334,310
	사업준공( 1개소)		4.65		131,658	120,811	5,763	5,084
	계속공사( 4개소)		40.75		725,017	502,382	57,967	164,668
	신규사업( 6개소)		23.50		415,504	67,558	42,261	305,685
	설계 및 보상(11개소)		63.95		929,972	66,099	5,000	858,873	용도지정
수도권 교통정체 해소 도로확충(2개소)			13.05		309,694	132,374	20,620	156,700
1	덕양~용미	국78호선	4.65	‘07~’16	131,658	120,811	5,763	5,084	준공
2	오남~수동	국98호선	8.40	‘15~’20	178,036	11,563	14,857	151,616	신규․핵심
기업하기 좋은 도로확충(2개소)			7.50		105,865	25,495	17,704	62,666
1	가납~상수	국39호선	5.70	‘15~’20	78,665	25,095	14,704	38,866	신규․핵심
2	문산∼내포	지359호선	1.80	’16~’18	27,200	400	3,000	23,800	신규
동서축 도로확충(2개소)			14.84		316,651	230,992	47,967	37,692
1	조리~법원	국56호선	13.70	‘07~’17	304,651	225,992	40,967	37,692	계속
2	월롱~광탄(2)	지360호선	1.14	’16~’18	12,000	5,000	7,000	-	신규
접경지역 도로확충(5개소)			33.51		539,969	301,890	19,700	218,379
1	설마~구읍	지371호선	8.03	‘07~’18	136,563	102,381	7,000	27,182	계속․핵심
2	운천~탄동	지387호선	7.70	‘10~’17	90,063	53,999	3,000	33,064	계속․우선
3	광암~마산	지364호선	11.32	‘09~’17	193,740	120,010	7,000	66,730	계속․핵심
4	적성~두일	지371호선	6.34	‘15~’20	112,603	25,200	0	87,403	신규․핵심
5	삼팔교 재가설	지387호선	0.12	’16~’18	7,000	300	2,700	4,000	신규
설계 및 보상 추진사업(11개소)			63.95		929,972	66,099	5,000	858,873
1	하송우~마산	지360호선	3.50	-	48,130	8,700	-	39,430	보상
2	광암~신북	지379호선	10.47	-	89,900	9,640	-	80,260	보상
3	진건~오남	지383호선	4.95	-	108,028	9,100	-	98,928	보상
4	화도~운수	지387호선	4.71	-	99,877	6,000	5,000 (용도지정)	88,877	보상
5	용미~광탄	국지78호선	4.53	-	85,059	3,000	-	82,059	보상
6	일패~와부	국지86호선	5.36	-	103,958	9,159	-	94,799	보상
7	신평~심곡	지368호선	2.86	-	31,240	4,500	-	26,740	보상
8	가평~현리	지364호선	14.50	-	207,354	7,100	-	200,254	보상
9	월롱~광탄(1)	지360호선	4.60	-	99,626	8,000	-	91,626	보상
10	효촌~신산	지364호선	4.97	-	27,200	-	-	27,200	설계완료
11	은현~봉암	지375호선	3.50	-	29,600	900	-	28,700	실시설계

2-3		도로구조물 내구성 및 안정성 확보

◇  교량·터널 등 도로구조물에 대한 철저한 안전점검과 보수·보강을     적기에 실시하여 파손부위의 진행 ‧ 확산 방지 및 구조물의 안정성 확보

□ 사업개요

○ 도로구조물 안전점검 696개소 / 25억원(남부 18, 북부 7)

○ 노후교량 특별 정밀점검 122개소 / 24억원(남부 12, 북부 12)

○ 도로구조물 보수·보강 127개소 / 75억원(남부 43, 북부  32)

○ 노후교량(용미2교) 재가설 1개소 / 17억원(북부 17)

□ 추진계획

○ 구조물의 기능과 안전유지를 위한 철저한 안전점검 실시

- “시특법”에 의한 정기점검(상‧하반기), 정밀안전진단 실시

- 교량관리시스템(BMS)에 교량실태 반영 → 통합 유지관리시스템 구축

(금액단위 : 백만원)

구 분	사업비	도로건설과(남부) 소관		북부도로과(북부) 소관
		사업량	사업비	사업량	사업비
계	4,900		3,000		1,900
정기점검	900	이포대교 등 412개소	600	장남교 등 284개소	300
정밀점검	880	고촌고가교 등 23개소	580	공릉천교 등 18개소	300
정밀안전진단	720	가유1가도교 등 5개소	620	북삼교 등 1개소	100
노후교량특별점검	2,400	흑천교 등 70개소	1,200	입암교 등 52개소	1,200

○ 전년도 안전점검 결과에 따라 보수 ‧ 보강 및 재가설 공사 시행

- 기타 교량 결빙·안개구간 및 통행제한 표지판 등 교통안전시설 일제정비

(금액단위 : 백만원)

구 분	사업비	도로건설과(남부) 소관		북부도로과(북부) 소관
		사업량	사업비	사업량	사업비
계	9,200		4,300		4,900
구조물보수보강	7,500	양평대교 등 58개소	4,300	연천 삼화교 등 69개소	3,200
노후교량재가설	1,700	-	-	파주 용미2교(L=31m)	1,700

참고		유지관리 대상 도로구조물 현황

□ 총 현황 : 696개소(교량 668, 터널 16, 옹벽 8, 지하차도 4)

구 분		계		1종 시설물		2종 시설물		기타 시설물		비고
		개소	연장 (m)	개소	연장 (m)	개소	연장 (m)	개소	연장 (m)
계		696	58,511	28	13,565	99	24,495	569	20,450
남 부		412	35,478	16	9,812	57	13,971	339	11,694
북 부		284	23,033	12	3,753	42	10,524	230	8,756
교량	소계	668	44,710	26	11,887	82	14,467	560	18,355
	남부	397	27,329	14	8,134	49	8,464	334	10,730
	북부	271	17,381	12	3,753	33	6,003	226	7,625
터널	소계	16	9,292	2	1,678	9	6,295	5	1,319
	남부	12	6,764	2	1,678	6	4,255	4	831
	북부	4	2,528	-	-	3	2,040	1	488
옹벽	소계	8	2,944	-	-	5	2,238	3	706
	남부	2	1,150			1	1,017	1	133
	북부	6	1,794	-	-	4	1,221	2	573
지하 차도	소계	4	1,565	-	-	3	1,495	1	70
	남부	1	235	-	-	1	235
	북부	3	1,330	-	-	2	1,260	1	70

* 전년도 대비 7개소 감소 (2015년 703개소 ⇒ 696개소)

→ 감소사유 : 도로 확․포장공사 구간 내 기존교량 철거

□ 2016년 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	계	도로건설과(남부) 소관		북부도로과(북부) 소관
		사업량	사업비	사업량	사업비
계	141		73		68
구조물안전점검	25	이포대교 등 412개소	18	장남교 등 284개소	7
노후교량특별점검	24	흑천교 등 70개소	12	입암교 등 52개소	12
보수‧보강공사	75	양평대교 등 58개소	43	삼화교 등 69개소	32
노후교량재가설	17	-	-	용미2교	17

2-4		안전한 도로환경 개선

◇ 지방도 적기보수로 안전하고 쾌적한 도로환경 확보

◇ 위험도로 구조개선을 통한 교통사고 위험요인 해소

□ 사업개요

○ 지방도 유지보수 : 52개 노선 2,431km,  138억원

- 포장도 보수 : 15개 시·군 60km(남부 40km, 북부 20km)

- 차선도색 : 15개 시·군 1,025km(남부 675km, 북부 350km)

- 도로안전시설물 : 가드레일, 안전휀스, 배수로 정비 등

○ 위험도로 구조개선 : 6개소 8.16km,  43억원

- 남부 : 4개소 4.62km, 35억원

- 북부 : 2개소 3.54km,  8억원

○ 도로개량사업 : 2개소 L=5.9km, 15억원

○ 보도설치공사 : 5개소 L=9.7km, 37억원

○ 군(軍) 훈련도로정비 : 1개소 L=4.05km, 10억원

□ 추진계획

○ 지방도 안전 환경개선 및 취약구간 위험요인 해소

- 포장파손이 심하거나 교통사고 취약구간 우선 시행

- 기동순찰반 운영을 통해 위험요인 발견 시 현장보수 추진

- 민원 요구 시 신속조사 및 도로환경 개선 사업추진

○ 위험도로 구조개선 및 군(軍) 훈련도로정비공사 등 철저

- 당초 설계부터 해당지역 주민의견 적극 수렴

- 시공 시 품질관리 철저 및 조기추진으로 주민편의 증진

2-5		운행제한 차량 단속 강화

◇ 도로운행이 제한되는 차량 단속으로 도로 구조 보존 ․ 유지

◇ 교통사고 위험 예방과 안전하고 원활한 교통 소통 도모

□ 단속개요

○ 근    거 : 도로법 제77조, 도로법 시행령 제79조

○ 단속방법 : 이동단속반  및 고정검문소 운영

▪이동단속반 : 3개반 16명

▪고정검문소 : 민자도로 3개소 (의왕, 일산대교, 제3경인)

○ 단속기준 : 총중량 40톤, 축하중 10톤,

폭 2.5m, 높이 4.0m 길이 16.7m 초과차량

□ 추진계획

○ 과적차량 단속 효율화 방안 연구용역 실시

- 예 산 액 : 30,000천원

- 용역기간 : 5개월 (3월 ~ 7월)

- 추진방향 : 인터넷 및 스마트폰 실시간 앱 활용방안, 관련 실·국간

효율적인 협업체계 방안 마련 등

- 용역결과 : 국토교통부, 국회 등에 정책 건의

○ 유관기관 합동단속 및 야간 ․ 휴일 특별단속

- 도, 시․군 : 주 1회 (1개반 5명)

- 유관기관 : 분기별 1회 (도, 시․군, 경찰, 교통안전공단)

- 야    간 : 매월 2, 4주 화요일 (2개반 10명)

- 휴    일 : 매월 1, 3주 토요일 (1개반  5명)

○ 과적예방 순찰 및 홍보활동 강화

- 민원발생지 및 대규모 공사장 (12개소) 집중 순찰

- 관련업체 (91개소) 방문 및 공문 협조, 리후렛 및 전광판 홍보

- 교통연수원 과적예방 교육과정 신설 : 28개 교육장 10,000명

	□ 공공건축 관련

3. 공공건축 관련

3-1		도민이 공감하는 공공건축물 건립

◇ 편리하고 안전한 에너지 절약형 고효율 공공건축물 건립

◇ 건축물 용도에 부합하는 아름답고 역동적인 건축물 추진

□ 개    요

○ 2016년 추진사업 : 26건, 2,472억원(신규 19건, 공사추진 6건, 설계추진 1건)

- 신규사업 : 19건, 2,123억원(북부소방본부 합동청사 등) : 별 첨

- 계속사업 :  7건, 349억원(공사추진 6건, 설계추진 1건)

공 사 명	시설규모	공사(설계)기간	사업비 (억원)	비 고
포천병원 의료시설 증축	연면적 2,788㎡,, 지하1층, 지상4층	΄15.03 ~΄16.09	84	40%
지역곤충자원산업화 지원센터	연면적 1,918㎡, 지상2층	΄15.06 ~΄16.06	49	42%
안산 반월 119안전센터	연면적 843㎡, 지상2층	΄15.11 ~΄16.09	16	공사착공
고양 화전 119안전센터	연면적 772㎡, 지상2층	΄15.12 ~΄16.11	25	〃
부천 내동 119안전센터	연면적 756㎡, 지상2층	΄15.12 ~΄16.10	19	〃
양주 장흥 119안전센터	연면적 990㎡, 지상2층	΄15.12 ~΄16.10	26	〃
경기도 문화의전당 리모델링	연면적 39,302㎡, 지상3층	΄15.03 ~΄16.02	130	설계중(90%)

□ 추진계획

○ 공공건축물의 예술성, 상징성, 경제성 등을 고려한 사업추진

- 설계공모 : 설계심의 과정에서 디자인 전문가 자문 등 반영

- 소규모 건축물 : 119안전센터 등 道 공공디자인 심의 반영

- 건축디자인 부서와 공공디자인 세미나 등 공조 추진

○ 고효율 LED조명 100% 설치

-「공공기관 에너지이용 추진 규정」 : 2016년 60% 이상 → 100% 설치 추진

참고		2016년 공공건축물 건립 추진(예정) 사업물량

구분	사 업 명	위치	규 모	사업비 (백만원)	추진(예상) 일정	비고
	26개소			247,147
1	포천병원 의료시설 증축	포천 (북부)	연면적 2,788㎡ (지하1/지상4)	8,354	∘공사 : ‘15.03.~’16.09.	공사 중 (40%)
2	지역곤충자원산업화 지원센터	화성	연면적 1,918㎡ (지하1/지상2)	4,836	∘공사 : ‘15.06.~’16.06.	공사 중 (42%)
3	안산 반월 119안전센터	안산	연면적 843㎡ (지상2)	1,590	∘공사 : ‘15.11.~‘16.09.	공사착공
4	고양 화전 119안전센터	고양 (북부)	연면적 772㎡ (지상2)	2,518	∘공사 : ‘15.12.~’16.11	“
5	양주 장흥 119안전센터	양주 (북부)	연면적 990㎡ (지상2)	2,583	∘공사 : ‘15.12.~’16.10.	“
6	부천 내동 119안전센터	부천	연면적 756㎡ (지상2)	1,881	∘공사 : ‘15.12.~’16.10.	“
7	수원병원 증축 및 리모델링	수원	연면적 876㎡ (지상3)	3,000	∘공사 : ‘16.02.~’17.02.	착공준비
8	수리산 탐방안내소	군포	연면적 685㎡ (지상2)	2,300	∘공사 : ‘16.03.~’16.12.	‘16. 2월 발주의뢰
9	경기도 문화의전당 리모델링	수원	연면적 39,302㎡ (리모델링)	13,000	∘설계 : ‘15.03.~’16.02. ∘공사 : ‘16.04.~’17.06.	설계 중
10	북부소방본부 합동청사	의정부 (북부)	연면적 8,370㎡ (지하1/지상6)	27,000	∘설계 : ‘15.12.~‘16.06. ∘공사 : ‘16.08.~’18.04.	“
11	기술학교 실습장 증축	화성	연면적 2,100㎡ (2층)	1,673	∘설계 : ‘15.10.~’16.04. ∘공사 : ‘16.06.~’17.02.	“
12	화성 동탄 119안전센터	화성	연면적 990㎡ (지상2)	2,200	∘설계 : ‘16.02.~’16.06. ∘공사 : ‘16.08.~’17.07.	설계준비
13	김포 대곶 119안전센터	김포	연면적 924㎡ (지상2층)	2,172	∘설계 : ‘16.02.~’16.06. ∘공사 : ‘16.08.~’17.07.	“
14	김포 마산 119안전센터	김포	연면적 990㎡ (지상2)	2,200	∘설계 : ‘16.02.~’16.06. ∘공사 : ‘16.08.~’17.07.	“
15	파주 운정 119안전센터	파주 (북부)	연면적 990㎡ (지상2)	2,200	∘설계 : ‘16.02.~’16.06. ∘공사 : ‘16.08.~’17.07.	“
16	고양 일산 119안전센터	고양 (북부)	연면적 990㎡ (지상2)	2,200	∘설계 : ‘16.02.~’16.06. ∘공사 : ‘16.08.~’17.07.	“
17	경기해양캠핑장 조성	안산	부지면적 3,000㎡ 야영센터 등	3,000	∘설계 : ‘16.03.~’16.06. ∘공사 : ‘16.08.~’17.08.	“
18	오산소방서 청사	오산	연면적 4,950㎡ (지하1/지상3)	11,300	∘설계 : ‘16.03.~’16.07. ∘공사 : ‘16.09.~’17.12.	“
19	광역 업 사이클 플라자 구축	수원	연면적 2,447㎡ (지하1/지상1)	19,000	∘설계 : ‘16.03.~’16.07. ∘공사 : ‘16.09.~’18.12.	“
20	승용 마 조련센터	안산	설계 준비 단계 (미정)	3,000	∘설계 : ‘16.02.~’16.08. ∘공사 : ‘16.10.~’17.10.	“
21	포천병원 기숙사 증축 및 환경개선 사업	포천 (북부)	연면적 1,500㎡ (지하1/지상3)	7,500	∘설계 : ‘16.02.~’16.09. ∘공사 : ‘16.11.~’18.04.	“
22	파주병원 주차장 증축 및 환경개선사업	파주 (북부)	연면적(증) 3,951㎡ (지하1/지상3)	4,300	∘설계 : ‘16.02.~’16.10. ∘공사 : ‘16.12.~’18.02.	“
23	의정부병원 장례식장 증축 및 환경개선사업	의정부 (북부)	연면적(증) 1,076㎡ (지상3)	5,140	∘설계 : ‘16.02.~’16.10. ∘공사 : ‘16.12.~’18.02.	“
24	해양안전체험관 건립	안산	연면적 9,550㎡ (지상3)	40,000	∘설계 : ‘16.05.~’17.05. ∘공사 : ‘17.07.~’19.06.	“
25	여성능력개발센터 청사	수원	연면적 11,880㎡ (지상2/지상11)	26,000	∘설계 : 16년~ ∘공사 : 17년~18년	기본계획 수립 중
26	보건환경연구원 청사	수원	연면적 15,000㎡ (지상2/지상5)	48,200	∘설계 : 16년~ ∘공사 : 17년~19년	“

3-2		현장 중심의 견실한 공공건축

◇ 개별 공사현장 감리체크리스트 시행 등 건축현장 점검 강화

◇ 외부전문가 참여, 분야별․공종별 현장점검으로 견실시공 도모

□ 공사장「현장 점검의 날」운영

○ 월 1회 이상 공사관계자 합동점검 등으로 안전·견실시공 도모

- 점검참여 : 시공자, 사용자, 감리자, 공사 감독관 등

- 합동점검 후 품질, 안전, 공정관리상 문제점 즉시 해결방안 모색

□ 비 상주감리 공사현장 감리체크리스트 시행

상주감리 대상 : 바닥면적 5천㎡ 이상, 연속된 5개층 이상으로 바닥면적 3천㎡ 이상 건축물, 이외는 비상주감리

○ 공종별 세부 감리체크리스트를 작성

○ 감리자 책임의식 강화로 부실공사 사전 예방

□ 외부 전문가 주요 공정별 현장점검 추진

○ 공정 단계별로 현장점검 → 하자발생 요인 조기 차단

○ 2016년 현장점검 추진(10개소)

점 검 유 형	대 상	시 기	근 거	비 고
품 질 검 사	∘ 모든 건설공사	∘ 공정률 50% ∘ 준공 1개월 전	∘ 검사단 구성․운영 계획(자체시책)	건설본부 (설계자문위원)
시 공 검 수	∘ 건설공사 10억원 이상	∘ 공정률 90%	∘ 도 건설기술심의 위원회 조례 제4조	건설기술과 (건설기술위원)
시 공 평 가	∘ 건설공사 100억원 이상	∘ 공정률 90% 이상 준공년 다음 2월까지	∘ 건설기술진흥법 제50조	건설본부 (설계자문위원)
품 질 검 수	∘ 건설공사 10억원 이상	∘ 준공 후 1년 이내 (하자검사)	∘ 도 건설기술심의 위원회 조례 제4조	건설기술과 (건설심의위원)

- 품질검사 및 시공검수(8개소) : 포천병원 의료시설, 지역곤충자원산업화  지원센터, 수원병원 증축 및 리모델링, 119안전센터 4건(안산 반월, 고양 화전, 부천 내동, 양주 장흥), 수리산 탐방안내소

- 품질검수(2개소) : 소방학교 종합훈련장, 선인장 연구온실 증축