		2019. 2. 14(목) 건설교통위원회

2019년 주요 업무계획

건 설 본 부

			목 차

Ⅰ. 일 반 현 황	3

1. 기구 및 인력	3

2. 비전 및 주요업무	4

3. 예산규모	5

Ⅱ. 2019년 업무추진방향	6

Ⅲ. 2019년 주요업무 추진계획	7

1. 도로사업	9

2. 공공건축물 건립	13

3. 경기융합타운조성 및 도 신청사 건립사업	15

※ 간 부 명 단	18

Ⅰ. 일 반 현 황

1. 기구와 인력

□ 기  구 : 4과 1단 20팀

건 설 본 부

관  리  과

도로건설과

북부도로과

건축시설과

경기융합타운

추  진  단

총무팀

간선도로팀

지방도건설팀

문화시설팀

융합지원팀

계약관리팀

지방도로팀

국지도건설팀

업무시설팀

융합기획팀

과적단속팀

도로시설팀

도로정비팀

복지시설팀

융합청사건립팀

도로환경개선팀

시설물관리팀

건축설비팀

융합개발팀

품질시험팀

□ 인  력 : 정원 127명 / 현원 122명

(단위 : 명)

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	127/122	1/1	5/5	20/19	41/38	52/46	7/11	0/2
관 리 과	27/26	1/1	1/1	3/3	12/10	10/10	0/1	-
도로건설과	32/32	-	1/1	5/5	9/10	13/12	4/4	-
북부도로과	27/26	-	1/1	4/4	5/4	15/11	2/6	-
건축시설과	19/18	-	1/1	4/3	7/6	6/6	1/0	0/2
경기융합타운추진단	22/20	-	1/1	4/4	9/8	8/7	-	-

※ 공무직 : 25명 (무기계약직 21, 청원경찰 3, 기간제 1)

2. 비전 및 주요업무

비전 : 안전한 시공, 공정한 관리
업무분야		주 요 업 무		담당부서
도로		〇 건설국 기획 국지도 및 지방도 건설 공사 〇 국지도, 지방도 포장 유지관리 〇 국지도, 지방도 구조물 유지관리		도로건설과 북부도로과
		〇 건설공사 품질시험		도로건설과
		〇 운행제한 위반차량 단속 및 과태료 부과		관리과/북부도로과
공공건축		〇 경기도 발주 건축공사(공사비 10억 이상)		건축시설과
융합타운 & 신청사		〇 경기융합타운 통합개발 사업 조정·관리 〇 경기도 및 도의회 신청사 건립		경기융합타운 추 진 단
행정지원		〇 건설본부 예산, 인력, 청사, 물품 관리 〇 공사/용역 계약(1억 미만) 및 계약관리		관 리 과

3. 예산규모

□ 2019년 예산현황

○ 자체예산 : 일반회계 87,120백만원, 기금 42,316백만원

(단위 : 백만원)

부 서 별	계	정책사업	재무활동	행정운영경비	비 고
일 반 회 계 기 금	87,120 42,316	63,580 42,316	21,500	2,040 -
관리과	1,421	432	-	989
도로건설과	40,730	40,560	-	170
북부도로과	23,256	22,519	-	737
건축시설과	119	42	-	77
경기융합타운 추진단	21,594	27	21,500	67
	42,316	42,316	-	-	신청사 건립기금

○ 재배정 예산 : 493,701백만원 (도로 : 181,430 / 건축 : 312,271)

□ 주요사업 현황

○ 지방도 건설공사	(남 113,576, 북 53,804)	:	167,380백만원
○ 위험도로 및 선형개선	(남 21,000, 북 4,000)	:	25,000백만원
○ 지방도 유지관리	(남 17,500, 북 13,000)	:	30,500백만원
- 포장도 보수	(남 11,500, 북 8,600)	:	20,100 〃
- 차선도색	(남 2,000, 북 1,600)	:	3,600 〃
- 도로안전시설물	(남 4,000, 북 2,800)	:	6,800 〃
○ 구조물 유지관리	(남 12,705, 북 8,220)	:	20,925백만원
- 노후교량 성능개선	(남 1,900, 북 500)	:	2,400 〃
- 도로구조물 유지관리	(남 9,920, 북 7,120)	:	17,040 〃
- 터널 통합상황관리시스템	(남 885, 북 600)	:	1,485 〃
○ 도 신청사 건립(기금)		:	42,316백만원

Ⅱ. 2019년 업무추진방향

〇 경기도정의 핵심가치중 하나인 『공정』을 실현하기 위하여

「안전한 시공, 공정한 관리」를 건설본부 비전으로 설정

〇 건설현장의 안전관리 강화를 위해 상시 안전관리체계 유지

- 고용노동부 “자율안전보건컨설팅” 제도 도입

․ 공사금액 150억원~800억원 도로공사 매월 1회이상 안전/보건분야

전문가 컨설팅 실시

- 현장별 안전관리자 상시배치, 도급자-수급자-근로자 합동안전점검

실시(2개월에 1회 이상)

- 해빙기 및 폭염, 태풍, 폭우 등 극한 기후시 건설공사장 안전조치 철저

〇 투명하고 공정한 계약관리로 관급공사 신뢰도 제고

- 『건설공사 대금지급 확인 시스템』 사용(2018. 9월 이후 발주 공사)으로

하도급자, 건설근로자 등 보호

- 건설공사 원가(내역서)공개 추진

- 반복적 안전사고 발생업체(중대재해 2회 이상) 및 입찰담합업체

(중대재해) 1명 사망, 3개월 이상 요양 2명 이상, 부상자 10명 이상 동시 발생

특허·신기술 공법 선정 시 참여 배제, 1인 견적에 의한 수의계약 배제 등

Ⅲ. 2019년 주요업무 추진계획

□ 도로사업	9

□ 공공건축물 건립	13

□ 경기융합타운 조성 및 신청사 건립사업	15

1. 도로 사업

1		효율적인 도로유지 관리방안

□ 도로유지보수 개선 (51개 노선 1,836㎞)

구 분	현 행	개 선
① 유지관리	국부적, 사후대처 (사고발생 후 발생지점 보수)	선제적 대응 (사고발생 우려 지역 우선 전면 재포장)
② 운영체계	자체 보수(본부직원)	보수업체 선정 365일 24시간 보수 체제 구성
③ 관리체계	민원접수 구간 우선 선정 관리	포장관리시스템(PMS) 활용 체계적 도로유지관리 체계 구축

※ 관리체계 : 과학적 포장관리시스템(PMS) 분석으로 2019년 하반기부터 시행 검토중

〈 공사 전 〉	〈 공사 중 〉	〈 공사 후 〉

□ 도로안전사고 발생 시 합리적 배상방안 수립

〈현 행〉				〈개 선〉
민사소송 또는 국가배상				영조물 배상공제 시행
○ 민사소송 : 보험사→도로관리청 ○ 국가배상 : 피해자→검찰청		평균 3개월~ 1년이상		○ 2019년 3월 영조물배상공제가입 시 (영조물배상공제) 지방자치단체가 소유, 사용, 관리하는 시설의 관리부실로 인하여 타인의 신체나 재물을 훼손시켜 법률상 배상책임이 발생하는 경우 손해보험사가 전담처리하는 제도 처리기간 단축 (평균 1개월 이내) ※ 보상한도액 : 1사고당 5천만원 (자기부담금 10만원) / 연간 총보상액 : 1억원 ※ 道 재산관리과에서 예산수립 후 일괄 보험가입
※ 최근 3년간 소송현황 - 평균 124건 / 배상액 : 45백만원

□ 道 관리도로 부적합 과속방지턱 조사 및 정비

○ 대    상 : 비규격 임의설치 및 도색 마모 등으로 안전사고 우려 방지턱

○ 관련규정 : 「도로의 구조 시설 기준에 관한 규칙」 및 「도로안전시설 설치 및 관리지침」

- 설치기준 : 원호형(L=3.6m, H=10㎝), 가상방지턱, 사다리꼴 등

○ 추진계획

- 2018. 12 ~ 2019. 2월 : 전수조사(51개 노선, 1,836㎞)

- 2019. 9월 : 부적합 과속방지턱 일제 정비 완료

2		교량, 터널 등 도로구조물 안전관리 강화

□ 도로구조물 안전관리

○ 대    상 : 797개소(교량 693, 터널 26, 지하차도 7, 옹벽 11, 보도육교 7, 절토사면 53)

○ 사업내용 : 도로구조물 안전점검 등 3개 사업 797개소 194.4억원

① 도로구조물 안전점검 용역	② 도로구조물 보수․보강	③ 노후교량 성능개선
797개소 / 32.5억원	용역 후 사업량 산정 / 137.9억원	15개소 / 24.0억원

① 안전점검(교량)	② 구조물 보수․보강(난간교체 및 충격흡수시설 설치)		③ 교량성능개선

□ 터널안전 통합상황관리 운영

○ 대   상 : 도 관리 터널 26개소 (남부 12, 북부 14)

○ 사업내용 : 관리사무소 설치, 24시간 모니터링 및 터널시설 원격조정 등

○ 사 업 비 : 22억원(시설비 20.5억원, 부대비 1.5억원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년
사업비	22억원	8.8억원	8.85억원	4.35억원

※ 관리용역사 : (주)KR산업/ 총7명(전기 1, 소방 1, 기계 1, 토목 1, 정보통신 1, 보통인부 2) / 24시간 상시근무(2인 1조 / 주·야간 3교대)

○ 추진실적 및 계획

- 2017~2019 : 통합관리시스템 구축

․  CCTV, 비상방송시설, 정보표지판, 재방송(라디오)시설, 진입차단시설 설치 등

- 2018.1.~2020.6. : 통합상황관리 운영(남부 통합)

※ 2020.12월  북부지역 통합관리시스템 구축 북부 단독운영 예정

〈통합관리 상황실 전경〉		〈재난대응훈련 실시전경〉

3		지방도로 건설공사 보상기간 단축

□ 현 실태

○ 경기도 사무위임 조례에 따라 해당 시장·군수가 보상업무 추진

- 시‧군 보상 담당자의 빈번한 인사이동으로 인한 업무미숙 및 업무 과다 등으로 적기보상 지연에 따른 사업추진 지연

○ 또한, 예산(보상비) 부족 및 보상지연으로 공정 추진 지연

※ 평균 공기지연 기간 : 70개월 / 최근 6년간 년 평균 공시지가 상승률 : 3.29%

□ 개선방안

○ 3개 市에 해당되는 갈천–가수 국지도 건설공사를 ‘18.10.29. 보상전문기관(한국감정원) 과 위·수탁 협약체결 하여 보상업무 추진 중

※ 보상 전문기관에 의한 보상업무 추진 효과를 검토하여 확대 시행여부 판단

4		엄정한 건설공사 품질관리로 안전시공 지원

□ 道내 건설공사 품질관리 시행

구 분	품질시험 실시	품질관리의 적절성 확인
근 거	경기도 건설공사 품질관리 등에 관한 조례 제3조 및 제9조
대 상	道내 공공 및 민간발주 건설공사	- (품질관리계획) ․ 500억원 이상 공사, 3만㎡ 이상 다중이용건축물 (품질시험계획) ・총공사비가 5억원 이상 토목공사 ・연면적이 660㎡ 이상인 건축물의 건축공사 ・총공사비가 2억원 이상인 전문공사
절 차	사업시행자 신청 시
시험 및 확인종목	콘크리트 압축강도, 노면표시 휘도 등 136종	공사관리, 중점품질관리 등 26개 항목
처 리 결 과	측정값 회신 ※ 적정여부 판단 : 사업시행자	지적사항 통보, 2개월 내 조치결과를 확인 ※ ’18년도 안전관리분야 지적사항 37건임

□ 2019년 추진계획

○ 도내 건설공사 품질시험 및 품질관리의 적절성 확인 지속실시

○ 품질시험 기능성 강화(소요예산 : 4억원, 1회추경 반영 요청)

- 이동식 반사성능 자동측정차량 및 노후장비(차량 및 시험기자재 등) 교체구입

5		운행제한 위반(과적) 차량 단속 강화

□ 과적 단속 개요

○ 단속구간 : 58개 노선 1,976㎞ (지방도 40, 국지도 11, 위임국도 7)

○ 단속방법 : 이동단속반(5개반 24명) 및 민자도로 검문소(남부도로, 일산대교, 제삼경인)

○ 단속기준 : 축하중10톤, 총중량40톤, 폭2.5m, 높이4m, 길이16.7m 초과차량

○ 적발실적 : ′15년 479건 → ′16년 577건 → ′17년 616건 → ′18년 899건

□ 과적 단속 효과

○ 도로 및 도로구조물의 보전 및 유지관리비 절감

- 과적 10% 감소 시 도로포장 및 도로구조물 유지관리비 연간 37억 원 절감

○ 차량의 주행 안정성 확보와 교통사고 위험 감소

- 과적 차량(총중량 45톤 이상) 교통사고 치사율＊: 5.7명(승용차 1.4명의 4배 이상)

* 교통사고 100건 당 사망자수

- 과적 차량(9.5톤 적재 화물차에 18.5톤 적재) 시속60㎞ 제동거리 : 35.7% 증가

□ 2019년 추진계획

○ 유관기관 합동단속 및 조간ㆍ야간 특별단속 강화

- 도로관리청(도ㆍ국토관리사무소ㆍ시군 등) 합동 단속(월1회)

- 조간ㆍ야간 불시 특별단속(3~11월/동절기 제외)

○ 화물차 운전자 교육 및 홍보 강화

- 화물차 운전자 과적예방 교육 실시(경기도교통연수원, 6만명)

- 과적 유발업체 과적예방 협조공문 발송(남부 184, 북부 117)

- 운전자 과적예방 홍보 리플릿 배포(20,000부)

○ 운행제한 위반 차량 과태료 통합관리시스템 구축

- 국토부 예산(7억원)으로 시스템 구축(6개월) 및 운영

※ 전국 도로 적발 차량 과태료 가중 부과 가능(2회 이상 적발 시 70만원～300만원 부과)

2. 공공건축물 건립

□ 사업개요

○ 2019년 추진사업 : 34건, 3,123억원

- 계속사업 16건 1,219억원 (북부소방본부 합동청사, 오산소방서 신축 등)

- 신규예정 18건 1,904억원 (해양안전종합체험관, 소방학교 실전훈련시설 신축 등)

□ 추진방향

○ 건축물 품질관리 향상

- 품질검사 : 공정 50% 건설본부 기술자문위원 현장확인 검사

- 시공검수 : 공정 80% ~ 90% 도 건설기술심의위원 현장확인 검수

- 공사현장별 사용자 및 공사관계자「현장소통의 날」운영(현장 별 월 1회)

○ 친환경기술 도입 및 에너지절약형 공공건축물 추진

- 경기도 공공건축물 친환경 기술(녹색건축물 인증 등)도입 시행

「경기도 녹색건축물 조성 및 공공건축물 친환경기술 도입 지원 조례, 2019.1.12.」 시행으로 경기도는 공공건축물 연면적 500㎡ 이상은  설계 발주시 「경기도 공공건축물 친환경 기술심의위원회 심의」를 받아 에너지효율등급 인증, 녹색건축물 인증, 신재생에너지 공급의무비율을 법령보다 강화하여 적용

- 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 설계 및 시공

녹색건축물지원법 시행령 제10조(에너지 절약계획서 제출 대상 등) : 연면적 500㎡ 건축물은 에너지성능지표 평점(74점) 이상 취득

- LED 조명기구 100% 적용

○ 공사장 안전관리 강화

- 미세먼지 비상저감조치 발령시 공사중지(작업시간 조정 등) 조치

- 폭염시 작업시간 조정, 그늘막 휴식 공간 제공(물, 식염포도당, 선풍기)

- 공사장 건설장비(타워크레인·항타기·포크레인 등) 안전사항 수시 점검

□ 향후계획

○ 외부전문가와 함께 지속적인 건축물 품질관리 도모

○ 친환경적이고 에너지 성능이 강화된 공공건축물 건립 추진

참고		2019 공공건축물 건립 추진현황

구분	사 업 명	위치	연면적/층수	사업비 (백만원)	추진(예상) 일정	사업의뢰부서
2018년 계속추진사업 (16건)				121,924
1	업사이클 플라자 리모델링 및 증축공사	수원	2,660㎡ 지상1	7,048	∘공사:‘17.12.～‘19.01.	자원순환과
2	북부소방재난본부· 합동청사 건립공사	의정부	8,370㎡ 지상6	26,221	∘공사:‘17.12.～‘20.04.	소방재난본부
3	의정부병원 본관동 환경개선 및 장례식장 증축공사	의정부	증축969㎡ 지상4	4,791	∘공사:‘18.01.～‘19.01.	보건정책과
4	오산소방서 청사 신축공사	오산	4,993㎡ 지상3	12,516	∘공사:‘18.04.～‘19.09	오산소방서
5	동물위생시험소 생물안전 연구시설 증축공사	수원	1,100㎡ 지상3	5,298	∘공사:‘18.04.～‘19.01.	동물위생시험소
6	일산풍동 119안전센터 신축공사	고양	997.8㎡ 지상3	2,331	∘공사:‘18.05.～‘19.04.	일산소방서
7	소방학교 소방종합훈련장 신축공사	용인	4,580.17㎡ 지상3	11,700	∘공사:‘18.06.～‘20.02.	소방학교
8	용인보라 119안전센터 신축공사	용인	954㎡ 지상2	2,218	∘공사:‘18.06.～‘19.02.	용인소방서
9	양주옥정 119안전센터 신축공사	양주	992.26㎡ 지상2	2,287	∘공사:‘18.06.～‘19.03.	양주소방서
10	종자관리소 종자생산시설 신축공사	평택	2,130.62㎡ 지상1	4,756	∘공사:‘18.09.～‘19.04.	종자관리소
11	가평설악 119안전센터 신축공사	가평	990㎡ 지상2	2,377	∘공사:‘18.11.～‘19.10.	가평소방서
12	고양삼송 119안전센터 신축공사	고양	990㎡ 지상2	2,356	∘공사:‘18.12.～‘19.11.	고양소방서
13	소방학교 도시탐색훈련시설 신축공사	용인	872.43㎡ 지상2	3,147	∘공사:‘18.12.～‘19.10.	소방학교
14	해양안전체험관 신축공사	안산	9,824㎡ 지상3	25,847	∘공사:‘18.12.～‘20.11.	해양항만정책과
15	에코팜랜드 조성사업(젖소송아지, 육성기지)	화성	7,377㎡ 지상1	6,600	∘공사:‘19.03～‘20.03.	축산정책과
16	이천마장 119안전센터 신축공사	이천	990㎡ 지상2	2,431	∘공사:‘19.01.～‘19.12.	이천소방서
2019년 발주예정사업 (18건)				190,394
1	남양주별내 119안전센터 중축공사	남양주	증축400㎡ 지상2	1,400	∘공사:‘19.02.～‘19.10.	남양주소방서
2	반려동물테마파크 조성사업	여주	9,093㎡ 지하1~지상3	35,800	∘설계:‘16.11.～‘19.03.	동물보호과
					∘공사:‘19.06.～‘20.12.
3	경기도재난안전종합체험관 신축공사	오산	7,050㎡ 지하1, 지상1	24,080	∘설계:‘17.11.～‘19.05.	재난안전본부
					∘공사:‘19.08.～‘20.12.
4	경기북부장애인복지종합지원센터 신축공사	양주	6,596.97㎡ 지하1․지상4	17,900	∘설계:‘18.03.～‘19.01.	사회복지 담당관
					∘공사:‘19.02.～‘20.10.
5	에코팜랜드 조성사업(승용마단지, 축산R&D단지)	화성	77,644㎡ 66동	47,382	∘설계:‘15.11.～‘18.11.	축산정책과
					∘공사:‘19.03.～‘22.02.
6	안양비산 119안전센터 신축공사	안양	990㎡ 지상2	2,527	∘설계:‘18.04.～‘18.12.	안양소방서
					∘공사:‘19.03.～‘19.12.
7	장애인 복지종합지원센터 증축공사	수원	1,312㎡ 지상4	3,532	∘설계:‘18.06.～‘18.12.	장애인복지과
					∘공사:‘19.11.～‘20.11.
8	안성병원(기숙사) 증축공사	안성	1,687.84㎡ 지상5	3,800	∘설계:‘18.07.～‘19.01.	보건정책과
					∘공사:‘19.04.～‘20.11.
9	구리갈매 119안전센터 신축공사	구리	990㎡ 지상2층	2,547	∘설계:‘18.07.～‘18.11.	구리소방서
					∘공사:‘19.02.～‘19.12.
10	수원금호 119안전센터 신축공사	수원	995㎡ 지상2층	2,784	∘설계:‘18.04.～‘18.10.	수원소방서
					∘공사:‘19.02.～‘19.12.
11	일산문화 119안전센터 신축공사	고양	990㎡ 지상3층	2,785	∘설계:‘18.08.～‘18.12.	일산소방서
					∘공사:‘19.02.～‘19.12.
12	서판교 119안전센터 신축공사	성남	990㎡ 지상2층	2,538	∘설계:‘18.05.～‘18.10.	분당소방서
					∘공사:‘19.03.～‘19.12.
13	연천백학 119안전센터 신축공사	연천	990㎡ 지상2층	2,530	∘설계:‘18.05.～‘18.10.	연천소방서
					∘공사:‘19.02.～‘19.12.
14	포천선단 119안전센터 신축공사	포천	990㎡ 지상2층	2,538	∘설계:‘18.03.～‘18.11.	포천소방서
					∘공사:‘19.02.～‘19.12.
15	성남소방서 청사 신축공사	성남	4,958㎡ 지하1~지상3	12,651	∘설계:‘18.04.～‘19.04.	성남소방서
					∘공사:‘19.08.～‘21.08.
16	경기도소방학교후생관 신축공사	용인	6,800㎡ 지하1~지상4	17,500	∘설계:‘18.11.～‘19.09.	경기도소방학교
					∘공사:‘19.10.～‘21.03.
17	야생동물생태관찰원 조성사업	평택	918㎡ 지하1~지상1	6,000	∘설계:‘16.07.～‘18.09.	동물보호과
					∘공사:‘19.06.～‘20.12.
18	경기북부야생동물보호센터 신축공사	연천	1,000㎡ 지상2	4,100	∘설계:‘18.06.～‘18.12.	동물보호과
					∘공사:‘19.11.～‘20.11.

3. 경기융합타운 조성 및 도 신청사 건립사업

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 수원시 이의동 186일원 / 융합타운 115,287㎡, 신청사 29,184㎡

○ 사업내용

- (입주기관) 도, 도의회, 도교육청, 도 대표도서관, 한국은행, 경기도시공사, 경기신용보증재단

- (道 직접사업) 도 신청사(사업비 3,934억원), 잔디광장․이벤트광장․내부도로 등(사업비 미정)

○ 사업총괄 : 경기도건설본부 / 사업대행자 : 경기도시공사

□ 주요추진현황

○ 적기 준공을 위한 효율적인 공정관리 및 안전하고 견실한 시공관리 병행 추진 ※ ’19.01.24. 기준 공정률  : 16.70%

○ 고객 의견 수렴을 통한 소통·개방의 혁신청사 건립 추진

- 기조실 주관 道 신청사 건립 총괄 T/F 운영 (’18. 05. 09[1차], ’18. 06. 04[2차])

: ’18년도 감사관 특별점검에 따른 사무공간 확대(15.09㎡→17.52㎡)등 설계변경 검토

- 도의회 신청사 공간 배치 T/F 운영 (제10대 도의회 의장 공약사항)

: 본회의장 공간구성 및 개인 의원실 내부배치 변경 요청 등

□ 2019년 추진계획

○ 경기융합타운 복합개발 및 건축협정 기조 유지를 위한 사업조정 · 관리 강화

- 도교육청 및 한국은행 설계공모․인허가 등 추진 행정지원, 협업 지속

※ 대표도서관(공유재산 심의예정), 경기도시공사(도의회 심의예정), 경기신용보증재단(이사회 개최예정)

○ 환승주차장(경기도시공사 직접사업) ’19년도 착공을 위한 행정지원 강화

- 사업내용 : 주차면수 1,346면 / 사업비 1,087억원(융합타운 복합개발수익 활용)

○ 안전사고 및 민원 · 갈등 예방을 위한 철저한 시공관리

- 민간전문가 및 주민 참여 감독 등 상시 모니터링 구축을 통한 부실공사 방지 도모

- 공정하도급 분쟁조정위원회 운영(필요시), 분쟁 사전예방을 위한 교육 실시(수시)

○ ’19년 예산(1,024억) 편성 및 적기 집행

- 본예산 423억 편성, 부족분 601억 추경 확보(舊 종자관리소 3월 매각 예정)

참고		2019년 신청사 건립사업 공정 계획

현재시점(‘19.01.24 공정률 약 16.70%)

현재시점 (‘19년 1월말)

의회 골조 완료 시점(‘19년 8월말)

전체 골조 완료 시점(‘19년 12월말)

		간부명단

직 위						직 급	성 명	비 고
건설본부장						지방부이사관	김 철 중
	관리과장					지방서기관	김 병 만
		총 무 팀 장				지방행정사무관	오 세 화
		계약관리팀장				지방행정사무관	서 봉 석
		과적단속팀장				지방행정사무관	황 수 익
	도로건설과장					지방기술서기관	이 범 기
			간선도로팀장			지방시설사무관	윤 석 태
			지방도로팀장			지방시설사무관	안 치 문
			도로시설팀장			지방시설사무관	오 세 현
			도로환경개선팀장			지방시설사무관	김 응 태
			품질시험팀장			지방시설사무관	이 경 우
	북부도로과장					지방기술서기관	안 재 명
			지방도건설팀장			지방시설사무관	박 성 규
			국지도건설팀장			지방시설사무관	조 진 희
			도로정비팀장			지방시설사무관	이 용 원
			시설물관리팀장			지방시설사무관	심 상 현
	건축시설과장					지방기술서기관	강 신 호
				문화시설팀장		지방시설사무관	이 은 선
				업무시설팀장		지방시설사무관	공 석
				복지시설팀장		지방시설사무관	박 경 원
				건축설비팀장		지방공업사무관	안 윤 모
	경기융합타운추진단장					지방기술서기관	윤 성 진
					융합지원팀장	지방행정사무관	유 갑 상
					융합기획팀장	지방시설사무관	박 현 석
					융합청사건립팀장	지방시설사무관	정 종 국
					융합개발팀장	지방시설사무관	박 성 중